휴일 및 야간 작업계획

(`15.05.23 ~ `15.05.29)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월23일(토) 932,933정거장 931S1환기구 쉴드터널 (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 비계 설치	김선태	박종현 이기상
	932 정거장	- 4Span B1 철근조립 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm, 기둥 거푸집 설치, 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 7Span 보조파일설치 및 파일절단 - 8,9Span 하수박스 받침보 해체 - 9,10,11Span 대형 상수관 복구공 철근 및 거푸집 설치 - 11Span 상부 슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 - 12Span 덕트 배기 벽체 거푸집 설치 - 12Span 소형 지장물 지장물 복구공 - #1~4번 출입구 토사굴착, 강재 토류판 설치, 팩앵커 시공, 띠장 설치		이태신 정순길
	933 정거장	- 정화조 화장실 비내력벽 거푸집 해체 - 7Span B1 환승슬라브 철근조립 - 9Span B1 2단 내력벽 거푸집 해체 - 10Span B1 슬라브 거푸집 동바리 설치 - #1,2번 출입구 지장물 매달기 및 받침 설치, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치, 토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형받침보, 주형보, 복공판설치, ㄷ형강, 띠장, 버팀보 설치, 지장물 줄파기, 파일천공, 토류판 설치	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- TBM U턴, 후방설비 해체, 작업장 점용		권우형 최민수
05월24일(일)		- 작업장 휴무		이원욱 신길호 (당직)

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월25일(월) 932,933정거장 931S1환기구 (07:00~18:00) 쉴드터널 (07:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 비계 설치 및 벽체 철근 조립	유승필	박종현 이현탁
	932 정거장	- 4Span B1 철근조립 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm, 기둥 거푸집 설치, 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 7Span 보조파일설치 및 파일절단 - 8,9Span 하수박스 받침보 해체 - 9,10,11Span 대형 상수관 복구공 철근 및 거푸집 설치 - 11Span 상부 슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 - 12Span 덕트 배기 벽체 거푸집 설치 - 12Span 소형 지장물 지장물 복구공 - #1~4번 출입구 토사굴착, 강재 토류판 설치, 팩앵커 시공, 띠장 설치		이태신 정순길
	933 정거장	- 정화조 화장실 비내력벽 거푸집 해체 - 7Span B1 환승슬라브 철근조립 - 9Span B1 2단 내력벽 거푸집 해체 - 10Span B1 슬라브 거푸집 동바리 설치 - #1,2번 출입구 지장물 매달기 및 받침 설치, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치, 토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형받침보, 주형보, 복공판설치, ㄷ형강, 띠장, 버팀보 설치, 지장물 줄파기, 파일천공, 토류판 설치	백인기	박민주 김세현
	쉴드터널	- TBM U턴, 후방설비 해체, 작업장 점용		류주열 홍동우 박지현(야) 이원욱(야)

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.05.23(토)		2015.05.24(일)		2015.05.25(월)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	김선태			보조감리원	유승필
	보조감리원	임승만			보조감리원	백인기
시공사	현장대리인	서용범	공사대리	이원욱 (당직)	현장소장	김용희
	공사과장	이태신	품질사원	신길호 (당직)	공사과장	이태신
	공사과장	박종현			공사과장	박종현
	공사대리	이기상			공사대리	이현탁
	공사주임	정순길			공사주임	정순길
	공사대리	김세현			공사과장	박민주
	공사과장	박민주			공사과장	서성일
	공사과장	서성일			공사대리	박진정
	공사대리	박진정			공사대리	김세현
	공사대리	김세현			공사주임	이윤구
	공사주임	이윤구			공사주임	임희승
	터널과장	권우형			터널차장	조광영
	터널과장	김준철			터널과장	류주열
	터널기장	최승부			터널기장	김양환
	터널기장	문동식			터널대리	김정연
	터널대리	최민수			터널대리	박지현
	터널주임	박지웅			터널대리	이원욱
	측량대리	손현민			터널대리	홍동우
	안전과장	김태화			터널주임	이성열
	안전과장	안병욱			측량주임	신상훈
	안전주임	이원규			안전과장	김태화
	안전주임	염찬수			안전과장	안병욱
	안전주임	유대우			안전주임	이원규
	안전사원	박재원			안전주임	염찬수
	품질과장	김병호			안전주임	유대우
	품질과장	전형준			품질과장	김병호
					품질과장	김기태
					품질사원	신길호
	계	28명	계	2명	계	30명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월26일(화) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 비계 설치 및 벽체 철근 조립	김완수	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 철근조립 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm, 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 7Span 보조파일 설치 및 파일절단 인양 - 8,9Span 보조파일 설치 및 찬넬 해체 - 9,10,11Span 대형 상수관 복구공 철근 및 거푸집 설치 - 11Span 상부 슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 - 12Span 좌측 사보 띠장 해체 - 12Span 덕트 배기 벽체 거푸집 설치 - 12Span 소형 지장물 지장물 복구공 - #1~4번 출입구 토사굴착, 토류판 설치, 띠장 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 되메우기 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 거푸집 설치 - 9Span B1 2단벽체 되메우기, 버팀보, 버팀보 보강재 해체 - 10Span 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근 조립 - #1,2번 출입구 지장물 매달기 및 받침 설치, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치, 토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형받침보, 주형보, 복공판설치, ㄷ형강, 띠장, 버팀보 설치, 지장물 줄파기, 파일천공, 토류판 설치	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- TBM U턴, 후방설비 해체		박지현 이원욱
05월27일(수) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 비계 설치 및 벽체 철근 조립	유승필	이현탁 김현규
	932정거장	- 4Span B1 철근조립 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm, 기둥 양생, 상부슬래브 파일박스 양생 - 7Span 보조파일 설치 및 파일절단 인양 - 8,9Span 보조파일 설치 및 찬넬 해체 - 9,10,11Span 대형 상수관 복구공 철근 및 거푸집 설치 - 11Span 상부 슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 - 12Span 좌측 사보 띠장 해체 - 12Span 덕트 배기 벽체 거푸집 설치 - 12Span 소형 지장물 지장물 복구공 - #1~4번 출입구 토사굴착, 토류판 설치, 띠장 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 되메우기 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 거푸집 설치 - 9Span B1 2단벽체 되메우기, 버팀보, 버팀보 보강재 해체 - 10Span 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근 조립 - #1,2번 출입구 지장물 매달기 및 받침 설치, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치, 토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형받침보, 주형보, 복공판설치, ㄷ형강, 띠장, 버팀보 설치, 지장물 줄파기, 파일천공, 토류판 설치	백인기	박진정 이윤구
	쉴드터널	- TBM U턴, 후방설비 해체		박지현 이원욱

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월28일(목) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 벽체 철근 조립 및 거푸집 설치	양희석	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 철근조립 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm, 기둥 양생, 상부슬래브 파일박스 양생 - 7Span 보조파일 설치 및 파일절단 인양 - 8,9Span 보조파일 설치 및 찬넬 해체 - 9,10,11Span 대형 상수관 복구공 철근 및 거푸집 설치 - 11Span 상부 슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 - 12Span 좌측 사보 띠장 해체 - 12Span 덕트 배기 벽체 거푸집 설치 - 12Span 소형 지장물 지장물 복구공 - #1~4번 출입구 토사굴착, 토류판 설치, 띠장 설치		이현탁 김현규
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 되메우기 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 거푸집 설치 - 9Span B1 2단벽체 되메우기, 버팀보, 버팀보 보강재 해체 - 10Span 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근 조립 - #1,2번 출입구 지장물 매달기 및 받침 설치, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치,토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형받침보, 주형보, 복공판설치, ㄷ형강, 띠장, 버팀보 설치, 지장물 줄파기, 파일천공, 토류판 설치	김선태	박진정 이윤구
	쉴드터널	- TBM U턴, 후방설비 해체		박지현 이원욱
05월29일(금) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 벽체 철근 조립 및 거푸집 설치	김완수	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 철근조립 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm, 기둥 양생, 상부슬래브 파일박스 양생 - 7Span 보조파일 설치 및 파일절단 인양 - 8,9Span 보조파일 설치 및 찬넬 해체 - 9,10,11Span 대형 상수관 복구공 철근 및 거푸집 설치 - 11Span 상부 슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 - 12Span 좌측 사보 띠장 해체 - 12Span 덕트 배기 벽체 거푸집 설치 - 12Span 소형 지장물 지장물 복구공 - #1~4번 출입구 토사굴착, 토류판 설치, 띠장 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 되메우기 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 양생 - 9Span B1 2단벽체 되메우기, 버팀보, 버팀보 보강재 해체 - 10Span 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근 조립 - #1,2번 출입구 지장물 매달기 및 받침 설치, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치, 토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형받침보, 주형보, 복공판설치, ㄷ형강, 띠장, 버팀보 설치, 지장물 줄파기, 파일천공, 토류판 설치	임승만	박진정 이윤구
	쉴드터널	- TBM U턴, 후방설비 해체		박지현 이원욱

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	05.26일(화)	05.27일(수)	05.28일(목)	05.29일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O			O
	보조감리원	유승필		O
	보조감리원	임승만	O			O
	보조감리원	백인기		O
	보조감리원	김선태			O
	보조감리원	양희석			O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O		O
	공사과장	박종현	O		O	O
	공사대리	이기상	O		O	O
	공사대리	김현규		O	O
	공사대리	이현탁		O	O	O
	공사기사	정순길	O	O		O
	공사과장	박민주	O
	공사대리	김세현	O
	공사대리	박진정		O	O	O
	공사주임	이윤구		O	O	O
	터널대리	박지현	O	O	O	O
	터널대리	이원욱	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O
	안전대리	유대우		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	안전주임	염찬수	O		O
	안전사원	박재원	O		O
	품질과장	김병호		O		O
	품질과장	전형준	O		O
	품질기사	신길호		O		O
합계			16명	16명	16명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)