휴일 및 야간 작업계획

(`15.05.09 ~ `15.05.15)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월09(토) (07:00~18:00)	931S1 환기구	- B2 1단벽체 채움 콘크리트 타설	김선태	박종현 이기상
	932 정거장	- 4Span B1 동바리 설치 - 5,6Span B2 중앙파일 해체 및 인양 - 7Span 하수박스 받침보 해체 - 7Span 1단버팀 및 띠장 해체 - 8Span 하수박스 받침 거푸집 설치 - 10,11Span 상수관 복구공 거푸집 설치 - 10,11Span B2 중앙파일 절단 인양 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 12Span 덕트 급기 벽체철근 조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 찬넬설치 - 931S2E2환기구 계측기 천공 작업		이태신 김현규
	933 정거장	- 7Span B1 슬라브 거푸집설치, 마감벽 철근조립 - 정화조 화장실 1단벽체 거푸집 설치 - 9Span B1 2단벽체, 마감벽 거푸집 설치 - 10Span 3단 띠장 해체 - #1,2번 출입구 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치 등 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형보 및 복공판 설치, ㄷ형강 설치, 줄파기 등	양희석	박민주 김세현
	쉴드터널	- TBM해체 준비작업 - 터널내부 정리정돈 - 도달부 가시설 해체 - 도달부 정리정돈(관통준비)		조광영 권우형
05월10일(일)		- 작업장 휴무		박진정 손현민

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.05.09.(토)		2015.05.10(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	김선태
	보조감리원	양희석
시공사	현장대리인	서용범	공무차장	이상도
	공사과장	이태신	공사대리(당직)	박진정
	공사과장	박종현	측량대리(당직)	손현민
	공사대리	이기상
	공사대리	이현탁
	공사대리	김현규
	공사주임	정순길
	공사과장	박민주
	공사과장	서성일
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	공사주임	임희승
	공사주임	최동선
	터널차장	조광영
	터널과장	권우형
	터널과장	류주열
	터널과장	김준철
	터널기장	최승부
	터널기장	김양환
	터널기장	문동식
	터널대리	최민수
	터널대리	박지현
	터널대리	이원욱
	터널대리	홍동우
	터널주임	박지웅
	안전과장	김태화
	안전과장	안병욱
	안전대리	김성관
	안전주임	유대우
	안전주임	이원규
	안전사원	박재원
	품질과장	김병호
	품질과장	전형준
	품질사원	신길호
	계	36명	계	3명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월11일(월) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 6,7단 가시설 해체	양희석	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 동바리 및 거푸집 설치 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm 및 B2 중앙파일 해체 인양 - 7Span 보조파일 설치 1단버팀 및 띠장해체 - 8Span 하수박스 받침거푸집 설치 - 10,11Span 상수관 복구공 거푸집설치 - 10,11Span B2 중앙파일 절단 인양 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 12Span 덕트 급기 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 강재토류판 설치 - #1~4번 출입구 앵커천공, 삽입, 그라우트 주입 - 931S2E2환기구 토공작업, 토류판 설치, 지장물 매달기, 사버팀 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 거푸집설치 - 7Span B1 2단벽체 거푸집 설치, 마감벽 및 슬라브 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 및 마감벽 거푸집 설치 - 10Span 2단 레이커 해체 - #1,2번 출입구 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치 등 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형보 및 복공판 설치, ㄷ형강 설치, 줄파기 등	김선태	박민주 김세현
	쉴드터널	- TBM해체 준비작업 - 터널내부 정리정돈 - 도달부 가시설 해체 - 도달부 정리정돈(관통준비)		최승부 박지현
05월12일(화) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 6,7단 가시설 해체	김완수	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 동바리 및 거푸집 설치 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm 및 B2 중앙파일 해체 인양 - 7Span 보조파일 설치 1단버팀 및 띠장해체 - 8Span 하수박스 받침거푸집 설치 - 10,11Span 상수관 복구공 거푸집설치 - 10,11Span B2 중앙파일 절단 인양 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 12Span 덕트 급기 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 강재토류판 설치 - #1~4번 출입구 앵커천공, 삽입, 그라우트 주입 - 931S2E2환기구 토공작업, 토류판 설치, 지장물 매달기, 사버팀 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 거푸집설치 - 7Span B1 2단벽체 거푸집 설치, 마감벽 및 슬라브 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 및 마감벽 거푸집 설치 - 10Span 2단 레이커 해체 - #1,2번 출입구 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치 등 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형보 및 복공판 설치, ㄷ형강 설치, 줄파기 등	임승만	박진정 이윤구
	쉴드터널	- TBM해체 준비작업 - 터널내부 정리정돈 - 도달부 가시설 해체 - 도달부 정리정돈(관통준비)		최승부 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월13일(수) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 6,7단 가시설 해체	유승필	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 동바리 및 거푸집 설치 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm 및 B2 중앙파일 해체 인양 - 7Span 보조파일 설치 1단버팀 및 띠장해체 - 8Span 하수박스 받침거푸집 설치 - 10,11Span 상수관 복구공 거푸집설치 - 10,11Span B2 중앙파일 절단 인양 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 철근용접 및 타설 - 12Span 덕트 급기 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 강재토류판 설치 - #1~4번 출입구 앵커천공, 삽입, 그라우트 주입 - 931S2E2환기구 토공작업, 토류판 설치, 지장물 매달기, 사버팀 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 거푸집설치 - 7Span B1 2단벽체 거푸집 설치, 마감벽 및 슬라브 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 및 마감벽 거푸집 설치 - 10Span 2단 레이커 해체 - #1,2번 출입구 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치 등 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형보 및 복공판 설치, ㄷ형강 설치, 줄파기 등	백인기	박민주 김세현
	쉴드터널	- TBM해체 준비작업 - 터널내부 정리정돈 - 도달부 가시설 해체 - 도달부 정리정돈(관통준비)		최승부 박지현
05월14일(목) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 6,7단 가시설 해체	양희석	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 동바리 및 거푸집 설치 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm 및 B2 중앙파일 해체 인양 - 7Span 보조파일 설치 1단버팀 및 띠장해체 - 8Span 하수박스 받침거푸집 설치 타설 - 10,11Span 상수관 복구공 거푸집설치 - 10,11Span B2 중앙파일 절단 인양 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 12Span 덕트 급기 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 강재토류판 설치 - #1~4번 출입구 앵커천공, 삽입, 그라우트 주입 - 931S2E2환기구 토공작업, 토류판 설치, 지장물 매달기, 사버팀 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 거푸집설치 - 7Span B1 2단벽체 거푸집 설치, 마감벽 및 슬라브 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 및 마감벽 거푸집 설치 - 10Span 2단 레이커 해체 - #1,2번 출입구 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치 등 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형보 및 복공판 설치, ㄷ형강 설치, 줄파기 등	김선태	박진정 이윤구
	쉴드터널	- TBM해체 준비작업 - 터널내부 정리정돈 - 도달부 가시설 해체 - 도달부 정리정돈(관통준비)		최승부 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
05월15일(금) 931S1환기구 932,933정거장 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 6,7단 가시설 해체	김완수	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 동바리 및 거푸집 설치 - 5,6Span 상수도 복구공 2200mm 및 B2 중앙파일 해체 인양 - 7Span 보조파일 설치 1단버팀 및 띠장해체 - 8Span 하수박스 받침거푸집 설치 - 10,11Span 상수관 복구공 거푸집설치 - 10,11Span B2 중앙파일 절단 인양 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 철근용접 - 12Span 덕트 급기 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 강재토류판 설치 - #1~4번 출입구 앵커천공, 삽입, 그라우트 주입 - 931S2E2환기구 토공작업, 토류판 설치, 지장물 매달기, 사버팀 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 화장실 1단벽체 거푸집설치 - 7Span B1 2단벽체 거푸집 설치, 마감벽 및 슬라브 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 및 마감벽 거푸집 설치 - 10Span 2단 레이커 해체 - #1,2번 출입구 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 기존구조물 깨기, 버팀보, 띠장, ㄷ형강설치 등 - #5,6번 출입구 기존구조물 깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 및 상차, 주형보 및 복공판 설치, ㄷ형강 설치, 줄파기 등	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- TBM해체 준비작업 - 터널내부 정리정돈 - 도달부 가시설 해체 - 도달부 정리정돈(관통준비)		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	05.11일(월)	04.12일(화)	05.13일(수)	05.14일(목)	05.15일(금)
감리단	책임감리원	김완수		O			O
	보조감리원	유승필			O
	보조감리원	임승만		O			O
	보조감리원	백인기			O
	보조감리원	김선태	O			O
	보조감리원	양희석	O			O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O	O	O
	공사과장	박종현	O	O	O	O	O
	공사대리	이기상	O	O	O	O	O
	공사대리	김현규	O	O	O	O	O
	공사대리	이현탁	O	O	O	O	O
	공사기사	정순길	O	O	O	O	O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사주임	임희승		O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O	O
	터널대리	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	안전사원	박재원		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질과장	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
합계			19명	19명	19명	19명	19명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)