휴일 및 야간 작업계획

(`15.06.13 ~ `15.06.19)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월13(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- B2 2단벽체 외벽거푸집 해체	김완수	이현탁 김현규
	932 정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립 -5Span 상부슬래브 파일박스오픈부 치핑 및 철근조립 -7~9Span 지하2층 중앙파일절단 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -11Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간치핑 -12Span 덕트(급기) 2단 벽체 철근조립 -12Span 154kv 지장물 복구 기초철근조립 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933 정거장	- 5Span B1 슬래브 동바리 설치 - 7Span B1 환승슬래브 동바리 거푸집 해체 - 9Span B1 슬래브 동바리 설치 - 10Span B1 슬래브 철근조립 - #1,2,5,6번 출입구 토공굴착 및 반출/가시설 설치/구조물깨기	임승만	서성일 이윤구
	쉴드터널	- 후방대차 해체, TBM장비 U-TURN - 겐트리크레인 설치준비(복공판교체)		권우형 박지웅 홍동우(야) 이성열(야)
06월14일(일) (07:00~18:00)	931S1 환기구	- B2 2단벽체 외벽 방수	백인기	이기상 이현탁
	932 정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립 -5Span 상부슬래브 파일박스오픈부 치핑 및 철근조립 -7~9Span 지하2층 중앙파일절단 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -11Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간치핑 -12Span 덕트(급기) 2단 벽체 철근조립 -12Span 154kv 지장물 복구 기초철근조립 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		박종현 최동선
	933 정거장	- 5Span B1 슬래브 동바리 설치 - 7Span B1 환승슬래브 동바리 거푸집 해체 - 9Span B1 슬래브 동바리 설치 - 10Span B1 슬래브 철근조립 - #1,2,5,6번 출입구 토공굴착 및 반출/가시설 설치/구조물깨기	양희석	박민주 박진정
	쉴드터널	- 후방대차 해체, TBM장비 U-TURN - 겐트리크레인 설치준비(복공판교체)		조광영 이원욱

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.06.13(토)		2015.06.14(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	보조감리원	백인기
	보조감리원	임승만	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	김용희	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁	공사대리	이기상
	공사대리	김현규	공사대리	이현탁
	공사주임	정순길	공사과장	박민주
	공사과장	서성일	공사대리	박진정
	공사대리	김세현	공사주임	최동선
	공사주임	이윤구	터널차장	조광영
	공사주임	임희승	터널과장	김준철
	터널과장	권우형	터널기장	최승부
	터널과장	류주열	터널기장	문동식
	터널기장	김양환	터널대리	박지현
	터널기장	유기영	터널대리	이원욱
	터널대리	최민수	안전과장	안병욱
	터널대리	김정연	안전대리	김성관
	터널대리	홍동우	안전주임	이원규
	터널주임	박지웅	품질과장	김기태
	터널반장	이성열	품질과장	전형준
	터널반장	게트너
	터널반장	테미
	안전과장	안병욱
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	안전사원	박재원
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	계	28명	계	20명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월15일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- B2 2단벽체 외벽 방수	백인기	박종현 정순길
	932정거장	- 4Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 5,6Span 2200mm상수도 복구공 기둥거푸집해체 - 7Span 우측 측벽되메우기 - 7~9Span 중앙파일절단 및 인양 - 9~11Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 - 11Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간치핑 - #1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재 토류판 설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 5,9Span B1 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 동바리 거푸집 해체, 2단 벽체 되메우기 - 10Span B1 슬라브 철근조립 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	김완수	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 후방대차 해체, TBM장비 U-TURN, 겐트리크레인 설치		홍동우 이성열
06월16일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 채움 콘크리트 거푸집 설치	양희석	이기상 김현규
	932정거장	- 4Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 5,6Span 2200mm상수도 복구공 기둥거푸집해체 - 7Span 우측 측벽되메우기 - 7~9Span 중앙파일절단 및 인양 - 9~11Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 - 11Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간치핑 - 12Span 덕트(급기)2단 벽체 철근조립 - #1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재 토류판 설치		최동선 임희승
	933정거장	- 5,9Span B1 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 동바리 거푸집 해체, 2단 벽체 되메우기 - 10Span B1 슬라브 철근조립 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	백인기	김세현 박진정
	쉴드터널	- 후방대차 해체, TBM장비 U-TURN, 겐트리크레인 설치		홍동우 이성열
06월17일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 채움 Con`c타설	김선태	박종현 정순길
	932정거장	- 4Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 5,6Span 2200mm상수도 복구공 기둥거푸집해체 - 7Span 우측 측벽되메우기 - 7~9Span 중앙파일절단 및 인양 - 9~11Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 - 11Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간치핑 - 12Span 덕트(급기)2단 벽체 철근조립 - #1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재 토류판 설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 5,9Span B1 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 동바리 거푸집 해체, 2단 벽체 되메우기 - 10Span B1 슬라브 철근조립 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	양희석	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 후방대차 해체, TBM장비 U-TURN, 겐트리크레인 설치		홍동우 이성열

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월18일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 5단 가시설 해체	임승만	이기상 김현규
	932정거장	- 4Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 5,6Span 2200mm상수도 복구공 기둥거푸집해체 - 7Span 우측 측벽되메우기 - 7~9Span 중앙파일절단 및 인양 - 9~11Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 - 11Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간치핑 - 12Span 덕트(급기)2단 벽체 철근조립 - #1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재 토류판 설치		최동선 임희승
	933정거장	- 5,9Span B1 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 동바리 거푸집 해체, 2단 벽체 되메우기 - 10Span B1 슬라브 철근조립 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	김선태	김세현 박진정
	쉴드터널	- 후방대차 해체, TBM장비 U-TURN, 겐트리크레인 설치		홍동우 이성열
06월19일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 5단 가시설 해체	김완수	박종현 정순길
	932정거장	- 4Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 5,6Span 2200mm상수도 복구공 기둥거푸집해체 - 7Span 우측 측벽되메우기 - 7~9Span 중앙파일절단 및 인양 - 9~11Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 - 11Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간치핑 - 12Span 덕트(급기)2단 벽체 철근조립 - #1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재 토류판 설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 5,9Span B1 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 1단벽체 되메우기 - 7Span B1 환승슬라브 동바리 거푸집 해체, 2단 벽체 되메우기 - 10Span B1 슬라브 철근조립 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	임승만	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 후방대차 해체, TBM장비 U-TURN, 겐트리크레인 설치		홍동우 이성열

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	06.15일(월)	06.16일(화)	06.17일(수)	06.18일(목)	06.19일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O				O
	보조감리원	유승필
	보조감리원	임승만				O	O
	보조감리원	백인기	O	O
	보조감리원	김선태			O	O
	보조감리원	양희석		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O		O
	공사대리	박종현	O		O		O
	공사대리	이기상		O		O
	공사대리	김현규		O		O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길	O		O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사대리	김세현		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구	O		O		O
	공사주임	최동선		O		O
	공사사원	임희승		O		O
	터널대리	홍동우	O	O	O	O	O
	터널반장	이성열	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전대리	유대우		O		O
	안전사원	박재원	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	안전주임	염찬수	O		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
	품질과장	김기태		O		O
합계			17명	16명	17명	16명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)