휴일 및 야간 작업계획

(`15.06.20 ~ `15.06.26)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월20(토) (07:00~18:00)	931S1 환기구	-5단 가시설 해체	김선태	이기상 김현규
	932 정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립, 2단벽체 내부 거푸집 보강 -5Span 상부슬래브 파일 박스구간 방수 -7Span 2200mm 상수도 지장물 복구공 -7Span 우측열 중앙파일 보조파일 설치 및 파일해체 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -7~11Span 중간슬래브 파일박스 오픈구간 거푸집해체 -12Span 154kv 지장물 복구공 기둥철근 및 거푸집 설치 -12Span 덕트(급기) 2단벽체 철근조립 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 이현탁
	933 정거장	- 5Span B1 슬래브 철근 조립 - 6Span B1 3단 버팀보 해체 - 9Span B1 슬래브 동바리 설치, 마감벽 기둥 철근 조립 - 10Span B1 외벽 거푸집 설치 및 동바리 보강 - #1,2,5,6번 출입구 토공굴착 및 반출/가시설 설치/구조물깨기	임승만	박민주 임희승
	쉴드터널	- 후방대차 이동, 2차 그라우팅 - 겐트리크레인 레일 설치준비		권우형 박지웅
06월21일(일)	931S1 환기구	-작업장 휴무 (당직 근무)	-	김병호 이원규 (당직)
	932 정거장
	933 정거장
	쉴드터널

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.06.20(토)		2015.06.21(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	김선태
	보조감리원	임승만
시공사	현장소장	김용희	품질과장 (당직)	김병호
	현장대리인	서용범	안전주임 (당직)	이원규
	공사과장	이태신
	공사과장	박종현
	공사대리	이기상
	공사대리	이현탁
	공사대리	김현규
	안전주임	이원규
	안전사원	박재원
	공사과장	박민주
	공사대리	김세현
	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선
	공사주임	임희승
	안전대리	김성관
	터널과장	권우형
	터널과장	류주열
	터널과장	김준철
	터널기장	최승부
	터널기장	유기영
	터널대리	최민수
	터널대리	박지현
	터널주임	박지웅
	터널반장	게트너
	터널반장	테미
	품질과장	전형준
	품질사원	신길호
	계	30명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월22일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 5단 가시설 해체	백인기	이기상 최동선
	932정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립, 2단벽체 내부 거푸집 보강 -5~6Span 상부슬래브 되메우기, 박스구간 방수 -7Span 우측열 중앙파일 보조파일 설치 및 파일해체 -7Span 2200mm 상수도 지장물 복구공, 우측 벽체 되메우기 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -7~11Span 중간슬래브 파일박스 오픈구간 거푸집해체 -12Span 154kv 지장물 복구 기둥철근, 거푸집 설치 -12Span 덕트(급기) 2단벽체 철근조립, 2000mm 상수도 받침해체 -#1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 5Span B1 슬라브 철근 조립 - 6Span B1 3단 버팀보 해체 - 9Span B1 슬라브 동바리 설치, 마감벽 기둥철근 조립, 거푸집 설치 - 10Span B1 슬라브 외벽 거푸집 설치 및 동바리 보강 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	김완수	김세현 박진정
	쉴드터널	- 2차 그라우팅		이원욱 문동식
06월23일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 5단 가시설 해체	양희석	김현규 정순길
	932정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립, 2단벽체 내부 거푸집 보강 -5~6Span 상부슬래브 되메우기, 박스구간 방수 -7Span 우측열 중앙파일 보조파일 설치 및 파일해체 -7Span 2200mm 상수도 지장물 복구공, 우측 벽체 되메우기 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -7~11Span 중간슬래브 파일박스 오픈구간 거푸집해체 -12Span 154kv 지장물 복구 기둥철근, 거푸집 설치 -12Span 덕트(급기) 2단벽체 철근조립, 2000mm 상수도 받침해체 -#1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 5Span B1 슬라브 철근 조립 - 6Span B1 3단 버팀보 해체 - 9Span B1 슬라브 동바리 설치, 마감벽 기둥철근 조립, 거푸집 설치 - 10Span B1 슬라브 외벽 거푸집 설치 및 동바리 보강 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	백인기	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 2차 그라우팅		이원욱 문동식
06월24일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 5단 가시설 해체	김선태	이기상 최동선
	932정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립, 2단벽체 내부 거푸집 보강 -5~6Span 상부슬래브 되메우기, 박스구간 방수 -7Span 우측열 중앙파일 보조파일 설치 및 파일해체 -7Span 2200mm 상수도 지장물 복구공, 우측 벽체 되메우기 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -7~11Span 중간슬래브 파일박스 오픈구간 거푸집해체 -12Span 154kv 지장물 복구 기둥철근, 거푸집 설치 -12Span 덕트(급기) 2단벽체 철근조립, 2000mm 상수도 받침해체 -#1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 5Span B1 슬라브 철근 조립 - 6Span B1 3단 버팀보 해체 - 9Span B1 슬라브 동바리 설치, 마감벽 기둥철근 조립, 거푸집 설치 - 10Span B1 슬라브 외벽 거푸집 설치 및 동바리 보강 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	양희석	김세현 박진정
	쉴드터널	- 2차 그라우팅		이원욱 문동식

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월25일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 5단 가시설 해체	임승만	김현규 정순길
	932정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립, 2단벽체 내부 거푸집 보강 -5~6Span 상부슬래브 되메우기, 박스구간 방수 -7Span 우측열 중앙파일 보조파일 설치 및 파일해체 -7Span 2200mm 상수도 지장물 복구공, 우측 벽체 되메우기 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -7~11Span 중간슬래브 파일박스 오픈구간 거푸집해체 -12Span 154kv 지장물 복구 기둥철근, 거푸집 설치 -12Span 덕트(급기) 2단벽체 철근조립, 2000mm 상수도 받침해체 -#1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 5Span B1 슬라브 철근 조립 - 6Span B1 3단 버팀보 해체 - 9Span B1 슬라브 동바리 설치, 마감벽 양생 - 10Span B1 슬라브 외벽 거푸집 설치 및 동바리 보강 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	김선태	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 2차 그라우팅		이원욱 문동식
06월26일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 미들 슬래브 거푸집 및 동바리 설치	김완수	이기상 최동선
	932정거장	-4Span B1 상부슬래브 철근조립, 2단벽체 내부 거푸집 보강 -5~6Span 상부슬래브 되메우기, 박스구간 방수 -7Span 우측열 중앙파일 보조파일 설치 및 파일해체 -7Span 2200mm 상수도 지장물 복구공, 우측 벽체 되메우기 -9~10Span 대형상수관 복구공 철근 및 거푸집설치 -7~11Span 중간슬래브 파일박스 오픈구간 거푸집해체 -12Span 154kv 지장물 복구 기둥철근, 거푸집 설치 -12Span 덕트(급기) 2단벽체 철근조립, 2000mm 상수도 받침해체 -#1,2,3,4 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 5Span B1 슬라브 철근 조립 - 6Span B1 3단 버팀보 해체 - 9Span B1 슬라브 동바리 설치, 마감벽 양생 - 10Span B1 슬라브 양생 - #1,2,5,6 출입구 토공굴착, 반출/가시설 설치/구조물깨기	임승만	김세현 박진정
	쉴드터널	- 2차 그라우팅		이원욱 문동식

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	06.22일(월)	06.23일(화)	06.24일(수)	06.25일(목)	06.26일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O				O
	보조감리원	임승만				O	O
	보조감리원	백인기	O	O
	보조감리원	김선태			O	O
	보조감리원	양희석		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신		O		O
	공사대리	박종현	O		O		O
	공사대리	이기상	O		O		O
	공사대리	김현규		O		O
	공사대리	이현탁		O		O
	공사기사	정순길		O		O
	공사과장	박민주		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정	O		O		O
	공사주임	이윤구		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사사원	임희승	O		O		O
	터널대리	이원욱	O	O	O	O	O
	터널기장	문동식	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전사원	박재원		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호		O		O
	품질과장	김기태	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
합계			17명	16명	17명	16명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)