휴일 및 야간 작업계획

(`15.07.11 ~ `15.07.17)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월11일(토) 931S1환기구, 932정거장, 933정거장, (07:00~18:00) 쉴드터널 (07:00~익일06:00)	931S1 환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 보강재, 내부 거푸집 설치	양희석	이기상 정순길
	932 정거장	-4Span 단부 면벽 거푸집 설치 -5,6Span 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 -5,6Span 소형지장물 복구공 기둥 철근 및 거푸집 설치 -11Span 소형지장물 복구공 철근 및 거푸집 설치 -8,9,10Span 2000mm 상수도 기초 철근 및 거푸집 설치 -6~8Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑, 철근용접 -11,12Span 2000mm 상수도 받침해체 -12Span 상부슬래브 토사되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 임희승
	933 정거장	- 3Span 바닥면 정리 - 5Span B1 슬래브 철근조립 - 7Span 한전관로 깨기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬래브 거푸집 설치 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	유승필	서성일 김세현
	쉴드터널	- 메인베어링 교체 준비 - 갱내 레일 철거		류주열 김정연 홍동우(야) 이성열(야)
07월12일(일) 931S1환기구, 932정거장, 933정거장, 쉴드터널 (07:00~18:00)	931S1 환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 보강재, 내부 거푸집 설치	임승만	박종현 정순길
	932 정거장	-4Span 단부 면벽 거푸집 설치 -5,6Span 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 -5,6Span 소형지장물 복구공 기둥 철근 및 거푸집 설치 -11Span 소형지장물 복구공 철근 및 거푸집 설치 -8,9,10Span 2000mm 상수도 기초 철근 및 거푸집 설치 -6~8Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑, 철근용접 -11,12Span 2000mm 상수도 받침해체 -12Span 상부슬래브 토사되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이현탁 박진정
	933 정거장	- 3Span 바닥면 정리 - 5Span B1 슬래브 철근조립 - 7Span 한전관로 깨기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬래브 거푸집 설치 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	김선태	박민주 최동선
	쉴드터널	- 메인베어링 교체 준비 - 갱내 레일 철거 - 쉴드 수전설비 이설		권우형 박지현

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.07.11(토)		2015.07.12(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	유승필	보조감리원	임승만
	보조감리원	양희석	보조감리원	김선태
시공사	현장소장	김용희	현장소장	김용희
	공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사과장	서성일	공사과장	박민주
	공사대리	이기상	공사대리	이현탁
	공사대리	김현규	공사대리	박진정
	공사대리	김세현	공사주임	정순길
	공사주임	정순길	공사주임	최동선
	공사주임	이윤구	터널과장	권우형
	공사주임	임희승	터널과장	김준철
	터널차장	조광영	터널기장	최승부
	터널과장	류주열	터널기장	문동식
	터널기장	최승부	터널대리	박지현
	터널기장	김양환	터널대리	이원욱
	터널기장	유기영	터널주임	박지웅
	터널대리	김정연	안전과장	안병욱
	터널대리	최민수	안전대리	김성관
	터널대리	홍동우	안전주임	이원규
	터널기장	이성열	품질과장	김병호
	터널반장	게트너	품질사원	신길호
	터널반장	테미
	안전과장	안병욱
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	안전주임	유대우
	안전사원	박재원
	측량대리	손현민
	측량주임	신상훈
	품질과장	김기태
	품질대리	전형준
	계	31명	계	21명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월13일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 보강재, 내부 거푸집 설치	백인기	김현규 이현탁
	932정거장	-4Span 단부 면벽 거푸집 설치, 지하1층 측벽되메우기 -5,6Span 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 -5,6,11Span 소형지장물 기둥 철근 및 거푸집 설치 -8,9,10Span 2000 상수도 기초 철근, 거푸집 설치 -6~8Span 파일박스 오픈구간 치핑, 철근용접 -11,12Span 2000mm 상수도 받침해체 -12Span 상부슬래브 토사되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span 바닥면 정리 - 5Span B1 슬래브 철근조립, 외벽 거푸집 설치 - 7Span 한전관로 깨기, B1 슬라브 동바리 설치, 기둥 철근 조립, 거푸집 설치 - 9Span B1 슬래브 거푸집 설치, 동바리 보강, 복공파일 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	임승만	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 갱내 레일 철거		홍동우 이성열
07월14일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 보강재, 내부 거푸집 설치	김완수	박종현 이기상
	932정거장	-4Span 단부 면벽 거푸집 설치, 지하1층 측벽되메우기 -5,6Span 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 -5,6,11Span 소형지장물 기둥 철근 및 거푸집 설치 -8,9,10Span 2000 상수도 기초 철근, 거푸집 설치 -6~8Span 파일박스 오픈구간 치핑, 철근용접 -11,12Span 2000mm 상수도 받침해체 -12Span 상부슬래브 토사되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		박진정 임희승
	933정거장	- 3Span 바닥면 정리 - 5Span B1 슬래브 철근조립, 외벽 거푸집 설치 - 7Span 한전관로 깨기, B1 슬라브 동바리 설치, 기둥 철근 조립, 거푸집 설치 - 9Span B1 슬래브 거푸집 설치, 동바리 보강, 복공파일 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	백인기	김세현 최동선
	쉴드터널	- 갱내 레일 철거		홍동우 이성열
07월15일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 보강재, 내부 거푸집 설치	김선태	김현규 이현탁
	932정거장	-4Span 단부 면벽 거푸집 설치, 지하1층 측벽되메우기 -5,6Span 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 -5,6,11Span 소형지장물 기둥 철근 및 거푸집 설치 -8,9,10Span 2000 상수도 기초 철근, 거푸집 설치 -6~8Span 파일박스 오픈구간 치핑, 철근용접 -11,12Span 2000mm 상수도 받침해체 -12Span 상부슬래브 토사되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span 바닥면 정리 - 5Span B1 슬래브 철근조립, 외벽 거푸집 설치 - 7Span 한전관로 깨기, B1 슬라브 동바리 설치, 기둥 철근 조립, 거푸집 설치 - 9Span B1 슬래브 거푸집 설치, 동바리 보강, 복공파일 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	김완수	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 갱내 레일 철거		홍동우 이성열

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월16일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 보강재, 내부 거푸집 설치	양희석	박종현 이기상
	932정거장	-4Span 단부 면벽 거푸집 설치, 지하1층 측벽되메우기 -5,6Span 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 -5,6,11Span 소형지장물 기둥 철근 및 거푸집 설치 -8,9,10Span 2000 상수도 기초 철근, 거푸집 설치 -6~8Span 파일박스 오픈구간 치핑, 철근용접 -11,12Span 2000mm 상수도 받침해체 -12Span 상부슬래브 토사되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		박진정 임희승
	933정거장	- 3Span 바닥면 정리 - 5Span B1 슬래브 철근조립, 외벽 거푸집 설치 - 7Span 한전관로 깨기, B1 슬라브 동바리 설치, 기둥 철근 조립, 거푸집 설치 - 9Span B1 슬래브 거푸집 설치, 동바리 보강, 복공파일 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	김선태	김세현 최동선
	쉴드터널	- 갱내 레일 철거		홍동우 이성열
07월17일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 보강재, 내부 거푸집 설치	유승필	김현규 이현탁
	932정거장	-4Span 단부 면벽 거푸집 설치, 지하1층 측벽되메우기 -5,6Span 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 -5,6,11Span 소형지장물 기둥 철근 및 거푸집 설치 -8,9,10Span 2000 상수도 기초 철근, 거푸집 설치 -6~8Span 파일박스 오픈구간 치핑, 철근용접 -11,12Span 2000mm 상수도 받침해체 -12Span 상부슬래브 토사되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span 바닥면 정리 - 5Span B1 슬래브 철근조립, 외벽 거푸집 설치 - 7Span 한전관로 깨기, B1 슬라브 동바리 설치, 기둥 철근 조립, 거푸집 설치 - 9Span B1 슬래브 거푸집 설치, 동바리 보강, 복공파일 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	양희석	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 갱내 레일 철거		홍동우 이성열

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	07.13일(월)	07.14일(화)	07.15일(수)	07.16일(목)	07.17일(금)
감리단	책임감리원	김완수		O	O
	보조감리원	유승필					O
	보조감리원	임승만	O
	보조감리원	백인기	O	O
	보조감리원	김선태			O	O
	보조감리원	양희석				O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O		O
	공사대리	박종현		O		O
	공사대리	이기상		O		O
	공사대리	김현규	O		O		O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길	O		O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사대리	김세현		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구	O		O		O
	공사주임	최동선		O		O
	공사사원	임희승		O		O
	터널대리	홍동우	O	O	O	O	O
	터널기장	이성열	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O	O	O	O	O
	안전사원	박재원	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	안전주임	염찬수	O		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질과장	김기태		O		O
	품질대리	전형준	O		O		O
	품질기사	신길호		O		O
합계			17명	17명	17명	17명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)