휴일 및 야간 작업계획

(`15.07.18 ~ `15.07.24)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월18일(토) 931S1환기구, 932정거장, 933정거장, 쉴드TBM (07:00~18:00)	931S1 환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 및 거푸집 보강, 외벽 거푸집 설치	김완수	박종현 김현규
	932 정거장	-4Span 측벽 되메우기, 1단 버팀해체 -5,6Span 토사피트 2단벽체 거푸집 설치 -7Span 우측 렉카 띠장 해체 -11Span 2000mm 상수도 복구공 거푸집 해체 -11Span 좌측열 보조파일 설치 -12Span 상부슬래브 토사 되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 임희승
	933 정거장	- 3Span 보호벽 거푸집 설치 - 5Span B1 슬래브 양생 - 7Span 마감벽 기둥거푸집 설치 - 9Span B1 슬래브 철근 조립 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	백인기	박민주 박진정
	쉴드터널	- 도달부 토사씰 해체 - 갱내 레일 철거, 슬리퍼 해체 및 반출 - 지상문형 크레인 전기 결선		류주열 김준철
07월19일(일) (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 현장 휴무 - 당직자 근무 (2명)	-	현장당직 정재희 이용한
	932 정거장
	933 정거장		-
	쉴드터널

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.07.18(토)		2015.07.19(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	-	-
	보조감리원	백인기	-	-
시공사	현장소장	김용희	관리대리 (휴무당직)	정재희 이용한
	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신
	공사과장	박종현
	공사대리	김현규
	공사과장	박민주
	공사대리	박진정
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	공사주임	임희승
	터널차장	조광영
	터널과장	류주열
	터널과장	권우형
	터널과장	김준철
	터널기장	최승부
	터널기장	김양환
	터널기장	유기영
	터널기장	문동식
	터널반장	게트너
	터널반장	테미
	안전과장	김태화
	안전과장	안병욱
	안전대리	김성관
	안전사원	박재원
	측량대리	손현민
	측량주임	신상훈
	품질과장	김병호
	품질대리	전형준
	품질사원	신길호
	계	31명	계	1명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월20일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 및 거푸집 보강, 외벽 거푸집 설치	임승만	이기상 최동선
	932정거장	-4Span 측벽 되메우기, 1단 버팀해체 인양 -5,6Span 좌측 상부슬래브 되메우기 -5,6Span 토사피트 2단벽체 거푸집 설치 -7Span 우측 렉카 띠장 해체 -7Span 2200mm 상수도 복구공 기초 철근조립 -7~8Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 -11Span 2000 상수도 복구공 거푸집 해체. 좌측열 보조파일 설치 -12Span 상부슬래브 토사 되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 3Span 보호벽 콘크리트 타설 준비 - 5Span B1 외벽 거푸집 해체 - 7Span 마감벽 기둥, 기둥 거푸집 설치 및 타설 준비 - 9Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 설치, 철근조립 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	유승필	김세현 박진정
	쉴드터널	- 갱내 레일 슬리퍼 해체, 반출, 청소, 가설세그 해체준비 - 면판보수, 보강. 비트커터해체 및 메인베어링 박스 청소		이원욱 최승부
07월21일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 및 거푸집 보강, 외벽 거푸집 설치	김완수	김현규 이현탁
	932정거장	-4Span 측벽 되메우기, 1단 버팀해체 인양 -5,6Span 좌측 상부슬래브 되메우기 -5,6Span 토사피트 2단벽체 거푸집 설치 -7Span 우측 렉카 띠장 해체 -7Span 2200mm 상수도 복구공 기초 철근조립 -7~8Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 -11Span 2000 상수도 복구공 거푸집 해체. 좌측열 보조파일 설치 -12Span 상부슬래브 토사 되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span 보호벽 콘크리트 타설 준비 - 5Span B1 외벽 거푸집 해체 - 7Span 마감벽 기둥, 기둥 거푸집 설치 및 타설 준비 - 9Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 설치, 철근조립 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	임승만	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 갱내 레일 슬리퍼 해체, 반출, 청소, 가설세그 해체준비 - 면판보수, 보강. 비트커터해체 및 메인베어링 박스 청소		이원욱 최승부
07월22일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 미들슬래브 철근조립 - 동바리 및 거푸집 보강, 외벽 거푸집 설치	양희석	이기상 최동선
	932정거장	-4Span 측벽 되메우기, 1단 버팀해체 인양 -5,6Span 좌측 상부슬래브 되메우기 -5,6Span 토사피트 2단벽체 거푸집 설치 -7Span 우측 렉카 띠장 해체 -7Span 2200mm 상수도 복구공 기초 철근조립 -7~8Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 -11Span 2000 상수도 복구공 거푸집 해체. 좌측열 보조파일 설치 -12Span 상부슬래브 토사 되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 3Span 버림면 방수 몰탈 타설 준비 - 5Span B1 외벽 거푸집 해체 - 9Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 설치, 철근조립 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	김완수	김세현 박진정
	쉴드터널	- 갱내 레일 슬리퍼 해체, 반출, 청소, 가설세그 해체준비 - 면판보수, 보강. 비트커터해체 및 메인베어링 박스 청소		이원욱 최승부

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월23일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 및 거푸집 보강, 외벽 거푸집 설치	유승필	김현규 이현탁
	932정거장	-4Span 측벽 되메우기, 1단 버팀해체 인양 -5,6Span 좌측 상부슬래브 되메우기 -5,6Span 토사피트 2단벽체 거푸집 설치 -7Span 우측 렉카 띠장 해체 -7Span 2200mm 상수도 복구공 기초 철근조립 -7~8Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 -11Span 2000 상수도 복구공 거푸집 해체. 좌측열 보조파일 설치 -12Span 상부슬래브 토사 되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span 버림면 방수 몰탈 타설 준비 - 5Span B1 외벽 거푸집 해체 - 9Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 설치, 철근조립 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토 공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	양희석	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 갱내 레일 슬리퍼 해체, 반출, 청소, 가설세그 해체준비 - 면판보수, 보강. 비트커터해체 및 메인베어링 박스 청소		이원욱 최승부
07월24일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	-미들슬래브 철근조립 -동바리 및 거푸집 보강, 외벽 거푸집 설치	임승만	이기상 최동선
	932정거장	-4Span 측벽 되메우기, 1단 버팀해체 인양 -5,6Span 좌측 상부슬래브 되메우기 -5,6Span 토사피트 2단벽체 거푸집 설치 -7Span 우측 렉카 띠장 해체 -7Span 2200mm 상수도 복구공 기초 철근조립 -7~8Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 -11Span 2000 상수도 복구공 거푸집 해체. 좌측열 보조파일 설치 -12Span 상부슬래브 토사 되메우기 -#1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 3Span 버림면 방수 몰탈 타설 준비 - 5Span B1 외벽 거푸집 해체 - 9Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 설치, 철근조립 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토 공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 천공 및 주입	유승필	김세현 박진정
	쉴드터널	- 갱내 레일 슬리퍼 해체, 반출, 청소, 가설세그 해체준비 - 면판보수, 보강. 비트커터해체 및 메인베어링 박스 청소		이원욱 최승부

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	07.20일(월)	07.21일(화)	07.22일(수)	07.23일(목)	07.24일(금)
감리단	책임감리원	김완수		O	O
	보조감리원	유승필	O			O	O
	보조감리원	임승만	O	O			O
	보조감리원	백인기
	보조감리원	김선태
	보조감리원	양희석			O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신		O		O
	공사대리	박종현	O		O		O
	공사대리	이기상	O		O		O
	공사대리	김현규		O		O
	공사대리	이현탁		O		O
	공사기사	정순길		O		O
	공사과장	박민주		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정	O		O		O
	공사주임	이윤구		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사사원	임희승	O		O		O
	터널대리	이원욱	O	O	O	O	O
	터널기장	최승부	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전대리	유대우	O	O	O	O	O
	안전사원	박재원		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호		O		O
	품질과장	김기태	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
합계			17명	17명	17명	17명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)