휴일 및 야간 작업계획

(`15.07.25 ~ `15.07.31)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월25일(토) 931S1환기구, 932정거장, 933정거장 (07:00~18:00) 쉴드TBM (07:00~익일06:00)	931S1 환기구	-미들슬래브 콘크리트 타설	유승필	이기상 김현규
	932 정거장	- 4Span 1단 버팀해체 - 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 8Span 0단 버팀 및 띠장 해체 - 7,8,12Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 - 11Span 2000mm 상수도 복구공 거푸집 해체 - 11Span 좌측열 중앙파일 해체 - 11Span 집수정덕트 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 상부슬래브 토사 되메우기 - #1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		이태신 임희승
	933 정거장	- 7Span 한전관로 깨기 및 매달기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬래브 철근 조립 및 동바리 보강 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토류판 설치 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 인장, 줄파기, 파일 천공	임승만	박민주 이윤구
	쉴드터널	- 메인베어링 설치 - 후방대차 U턴 - 반력대 해체		류주열 김정연 박지현(야) 이원욱(야)
07월26일(일) 931S1환기구, 932정거장, 933정거장, 쉴드TBM (07:00~18:00)	931S1 환기구	-미들슬래브 양생	백인기	박종현 이현탁
	932 정거장	- 4Span 1단 버팀해체 - 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 8Span 0단 버팀 및 띠장 해체 - 7,8,12Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 - 11Span 2000mm 상수도 복구공 거푸집 해체 - 11Span 좌측열 중앙파일 해체 - 11Span 집수정덕트 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 상부슬래브 토사 되메우기 - #1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 버팀보 설치, 강재토류판 설치		정순길 최동선
	933 정거장	- 7Span 한전관로 깨기 및 매달기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬래브 철근 조립 및 동바리 보강 - 10Span B1 슬래브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토류판 설치 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 인장, 줄파기, 파일 천공	김완수	서성일 김세현
	쉴드터널	- 메인베어링 설치 - 후방대차 U턴 - 반력대 해체		권우형 홍동우

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.07.25(토)		2015.07.26(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	유승필	책임감리원	김완수
	보조감리원	임승만	보조감리원	백인기
시공사	현장소장	김용희	현장소장	김용희
	공사과장	이태신	현장대리인	서용범
	공사과장	박민주	공사과장	박종현
	공사대리	이기상	공사과장	서성일
	공사대리	김현규	공사대리	이현탁
	공사주임	이윤구	공사대리	김세현
	공사주임	임희승	공사주임	정순길
	터널차장	조광영	공사주임	이윤구
	터널과장	류주열	공사주임	최동선
	터널기장	김양환	터널과장	권우형
	터널기장	유기영	터널과장	김준철
	터널기장	최승부	터널기장	문동식
	터널기장	이성열	터널대리	홍동우
	터널대리	최민수	터널주임	박지웅
	터널대리	김정연	안전과장	김태화
	터널대리	박지현	안전과장	안병욱
	터널대리	이원욱	안전주임	이원규
	터널반장	게트너	안전주임	유대우
	터널반장	테미	안전주임	염찬수
	안전과장	안병욱	품질과장	김기태
	안전대리	김성관
	안전주임	이원규
	안전주임	유대우
	안전사원	박재원
	품질과장	김병호
	품질대리	전형준
	계	28명	계	22명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월27일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 시점 사버팀보 보강재 해체	백인기	이기상 최동선
	932정거장	- 4Span 1단 버팀 및 띠장 해체 - 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 7Span 점검통로 해체 및 상수도 복구공 받침빔 설치 - 8Span 0단 버팀 및 띠장 해체 - 7,8,12Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 - 9Span 2200mm 상수도 복구공 거푸집 설치 - 11Span 좌측열 중앙파일 해체 인양 - 11Span 집수정덕트 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 상부슬래브 토사 되메우기 - #1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 3Span 기초 철근 조립 - 7Span 한전관로 깨기 및 매달기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬라브 철근 조립, 동바리 보강 - 10Span B1 슬라브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토류판 설치 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 인장, 줄파기, 파일 천공	양희석	김세현 박진정
	쉴드터널	- 가설 세그먼트 해체준비 - 면판보수 및 보강, 후방대차 U턴		이원욱 최승부
07월28일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 시점 사버팀보 보강재 해체	김완수	김현규 이현탁
	932정거장	- 4Span 1단 버팀 및 띠장 해체 - 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 7Span 점검통로 해체 및 상수도 복구공 받침빔 설치 - 8Span 0단 버팀 및 띠장 해체 - 7,8,12Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 - 9Span 2200mm 상수도 복구공 거푸집 설치 - 11Span 좌측열 중앙파일 해체 인양 - 11Span 집수정덕트 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 상부슬래브 토사 되메우기 - #1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		서성일 정순길
	933정거장	- 3Span 기초 철근 조립 - 7Span 한전관로 깨기 및 매달기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬라브 철근 조립, 동바리 보강 - 10Span B1 슬라브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토류판 설치 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 인장, 줄파기, 파일 천공	백인기	박민주 임희승
	쉴드터널	- 가설 세그먼트 해체준비 - 면판보수 및 보강, 후방대차 U턴		이원욱 최승부
07월29일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 외벽 거푸집 해체 - 외벽 방수	김선태	이기상 최동선
	932정거장	- 4Span 1단 버팀 및 띠장 해체 - 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 7Span 점검통로 해체 및 상수도 복구공 받침빔 설치 - 8Span 0단 버팀 및 띠장 해체 - 7,8,12Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 - 9Span 2200mm 상수도 복구공 거푸집 설치 - 11Span 좌측열 중앙파일 해체 인양 - 11Span 집수정덕트 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 상부슬래브 토사 되메우기 - #1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 3Span 기초 철근 조립 - 7Span 한전관로 깨기 및 매달기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬라브 철근 조립, 동바리 보강 - 10Span B1 슬라브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토류판 설치 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 인장, 줄파기, 파일 천공	김완수	김세현 박진정
	쉴드터널	- 가설 세그먼트 해체준비 - 면판보수 및 보강, 후방대차 U턴		이원욱 최승부

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
07월30일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 외벽 거푸집 해체 - 외벽 방수	양희석	김현규 이현탁
	932정거장	- 4Span 1단 버팀 및 띠장 해체 - 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 7Span 점검통로 해체 및 상수도 복구공 받침빔 설치 - 8Span 0단 버팀 및 띠장 해체 - 7,8,12Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 - 9Span 2200mm 상수도 복구공 거푸집 설치 - 11Span 좌측열 중앙파일 해체 인양 - 11Span 집수정덕트 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 상부슬래브 토사 되메우기 - #1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		서성일 정순길
	933정거장	- 3Span 기초 철근 조립 - 7Span 한전관로 깨기 및 매달기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬라브 철근 조립, 동바리 보강 - 10Span B1 슬라브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토류판 설치 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 인장, 줄파기, 파일 천공	김선태	박민주 임희승
	쉴드터널	- 가설 세그먼트 해체준비 - 면판보수 및 보강, 후방대차 U턴		이원욱 최승부
07월31일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 채움 거푸집 설치 - 외벽 방수	유승필	이기상 최동선
	932정거장	- 4Span 1단 버팀 및 띠장 해체 - 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 7Span 점검통로 해체 및 상수도 복구공 받침빔 설치 - 8Span 0단 버팀 및 띠장 해체 - 7,8,12Span 상부슬래브 파일박스 오픈구간 치핑 및 철근용접 - 9Span 2200mm 상수도 복구공 거푸집 설치 - 11Span 좌측열 중앙파일 해체 인양 - 11Span 집수정덕트 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 상부슬래브 토사 되메우기 - #1,2,3,4 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 임희승
	933정거장	- 3Span 기초 철근 조립 - 7Span 한전관로 깨기 및 매달기, B1 슬라브 동바리 설치 - 9Span B1 슬라브 철근 조립, 동바리 보강 - 10Span B1 슬라브 거푸집, 동바리 해체 - #1,2,5,6번 출입구 지장물 매달기, 기존 구조물 깨기, 토류판 설치 토공굴착 및 반출, 가시설 설치, 어스앵커 인장, 줄파기, 파일 천공	양희석	김세현 박진정
	쉴드터널	- 가설 세그먼트 해체준비 - 면판보수 및 보강, 후방대차 U턴		이원욱 최승부

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	07.27일(월)	07.28일(화)	07.29일(수)	07.30일(목)	07.31일(금)
감리단	책임감리원	김완수		O	O
	보조감리원	유승필					O
	보조감리원	임승만
	보조감리원	백인기	O	O
	보조감리원	김선태			O	O
	보조감리원	양희석	O			O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	박종현	O		O		O
	공사대리	이기상	O		O		O
	공사대리	김현규		O		O
	공사대리	이현탁		O		O
	공사기사	정순길		O		O
	공사과장	박민주		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정	O		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사주임	임희승	O	O	O	O	O
	터널대리	이원욱	O	O	O	O	O
	터널기장	최승부	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	유대우	O	O	O	O	O
	안전사원	박재원		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호		O		O
	품질과장	김기태	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
합계			15명	17명	15명	17명	15명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)