휴일 및 야간 작업계획

(`15.08.29 ~ `15.09.04)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
08월29일(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07:00~18:00) 쉴드터널 (07:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 2단벽체 철근조립, 기둥 철근조립, 동바리 설치	백인기	이기상 김현규
	932 정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 - 9Span #1,2 연결통로 1단 버팀보 해체 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체 - #1,2,3,4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 및 버팀보 설치 - #1,2,3,4번 출입구 강재 토류판 설치		이태신 이현탁
	933 정거장	- 3Span B3 1단벽체 철근조립 - 6Span 상부슬래브 철근조립, 거더부 Con’c 타설 - 7Span 한전관로 깨기 및 매달기/상부슬래브 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	김완수	서성일 박진정
	쉴드터널	- 반력대 설치 - 테일씰 설치 - 커터모터 설치 - 지상설비 배관 - 임시전력배선 - 인버트 청소		권우형 류주열 박지현(야) 홍동우(야)
08월30일(일) 931S1환기구 932정거장 933정거장 쉴드터널 (07:00~18:00)	931S1 환기구	현장휴무 (당직근무 2명)	-	김태화 김정연 (당직근무)
	932 정거장
	933 정거장
	쉴드터널

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.08.29(토)		2015.08.30(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	-	-
	보조감리원	백인기	-	-
시공사	현장소장	김용희	안전과장(휴일당직)	김태화
	현장대리인	서용범	쉴드대리(휴일당직)	김정연
	공사과장	이태신
	공사대리	이기상
	공사대리	김현규
	공사대리	이현탁
	안전주임	이원규
	안전사원	박재원
	품질과장	김병호
	공사과장	서성일
	공사대리	김세현
	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선
	안전대리	김성관
	품질대리	전형준
	쉴드과장	권우형
	쉴드과장	류주열
	쉴드대리	박지현
	쉴드대리	홍동우
	안전과장	안병욱
	계	23명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
08월31일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 동바리 및 기둥 거푸집 설치, 2단벽체 철근 조립	김선태	김현규 임희승
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span B3 1단벽체 거푸집 설치, 기둥 철근조립 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체 및 재설치 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 거더부 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	김완수	박민주 박진정
	쉴드터널	- 인버트 청소, 커터모터 설치		홍동우 박지현
09월01일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 기둥 Con’c 타설, 합판 거푸집 및 동바리 설치, 슬래브 철근조립	양희석	이기상 최동선
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 이현탁
	933정거장	- 3Span B3 1단벽체 거푸집 설치, 기둥 철근조립 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체 및 재설치 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 거더부 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	김선태	서성일 김세현
	쉴드터널	- 인버트 청소, 커터모터 설치		홍동우 박지현
09월02일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 합판거푸집 및 동바리 설치, 슬래브 철근 조립	유승필	김현규 임희승
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span B3 1단벽체 거푸집 설치, 기둥 철근조립 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체 및 재설치 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 거더부 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	양희석	박민주 박진정
	쉴드터널	- 인버트 청소, 커터모터 설치		홍동우 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
09월03일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 합판거푸집 및 동바리 설치, 슬래브 철근 조립	임승만	이기상 최동선
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치,상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 이현탁
	933정거장	- 3Span B3 1단벽체 Con’c 양생 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체 및 재설치 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 거더부 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/ 토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기, 토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	유승필	서성일 김세현
	쉴드터널	- 인버트 청소, 커터모터 설치		홍동우 박지현
09월04일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 합판거푸집 및 동바리 설치, 슬래브 철근 조립	백인기	김현규 임희승
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치,상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span B3 1단벽체 Con’c 양생 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체 및 재설치 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 거더부 철근조립 - 9Span B1 2단벽체 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/ 토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기, 토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	임승만	박민주 박진정
	쉴드터널	- 인버트 청소, 커터모터 설치		홍동우 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	08.31일(월)	09.01일(화)	09.02일(수)	09.03일(목)	09.04일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O
	보조감리원	유승필			O	O
	보조감리원	임승만				O	O
	보조감리원	백인기					O
	보조감리원	김선태	O	O
	보조감리원	양희석		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O		O
	공사대리	박종현		O		O
	공사대리	이기상		O		O
	공사대리	김현규	O		O		O
	공사대리	이현탁		O		O
	공사기사	정순길	O		O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현		O		O
	공사대리	박진정	O		O		O
	공사주임	최동선		O		O
	공사주임	임희승	O		O		O
	터널대리	홍동우	O	O	O	O	O
	터널대리	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O	O	O	O	O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전주임	유대우		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	안전주임	염찬수	O		O		O
	안전사원	박재원		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질과장	김기태		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질사원	신길호	O		O		O
합계			16명	17명	16명	17명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)