휴일 및 야간 작업계획

(`15.08.08 ~ `15.08.14)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
08월08일(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 가시설 해체	임승만	김현규 임희승
	932 정거장	- 5,6Span 토사피트 측벽되메우기 - 4Span 1단 버팀해체 - 8Span 1단 버팀 및 띠장 해체 - #1,2,3,4출입구 토사굴착 및 반출 / 강재토류판 설치 - #1,2,3,4출입구 띠장 설치 및 버팀보설치		이태신 정순길
	933 정거장	- 3Span 기초슬래브 철근 조립 - 6Span 상부슬래브 동바리 설치 - 7Span 한전관로 깨기 및 매달기/상부슬래브 동바리 설치 - 9Span 상부슬래브 철근조립/동바리 보강 - #1,2번 출입구 토공굴착/가시설 설치 - #1,2번 출입구 지장물 매달기/강재토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물깨기,지장물 매달기,토공굴착 - #5,6번 출입구 가시설 설치/강재토류판 및 복공판 설치	백인기	서성일 김세현
	쉴드터널	- 면판 육성보강 및 비트 해체 - 커터헤드 가대 해체 - 백필 플랜트 이설 - 잔여 반력대 해체 및 레일 해체 - 가설세그먼트 반출		류주열 김준철 홍동우(야) 박지현(야)
08월09일(일) (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 외벽 거푸집해체 / 코너 사보해체	김완수	이기상 박진정
	932 정거장	- 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 4Span 1단 버팀해체 - 8Span 띠장해체 - 11Span 좌측열 중앙 파일 해체 - #1~4번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치		박종현 최동선
	933 정거장	- 5Span 상부슬래브 동바리 해체 - 7Span 상부슬래브 동바리 설치 - 9Span 상부슬래브 철근조립 - 154Kv 흄관깨기 및 매달기작업 - #1,2번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 - #5,6번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치	김선태	박민주 서성일
	쉴드터널	- 면판 육성보강 및 비트 해체 - 커터헤드 가대 해체 - 백필 플랜트 이설 - 잔여 반력대 해체 및 레일 해체 - 가설세그먼트 반출		조광영 김준철

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.08.08(토)		2015.08.09(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	임승만	책임감리원	김완수
	보조감리원	백인기	보조감리원	김선태
시공사	현장소장	김용희	현장소장	김용희
	공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사대리	김현규	공사대리	이기상
	공사주임	정순길	공사과장	박민주
	공사과장	서성일	공사과장	서성일
	공사대리	김세현	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구	공사주임	최동선
	공사주임	임희승	쉴드차장	조광영
	쉴드과장	류주열	쉴드과장	김준철
	쉴드과장	김준철	쉴드대리	최민수
	쉴드대리	김정연	쉴드대리	이원욱
	쉴드대리	박지현	쉴드주임	박지웅
	쉴드대리	이원욱	안전과장	김태화
	측량대리	손현민	안전과장	안병욱
	측량주임	신상훈	안전대리	김성관
	안전과장	안병욱	안전주임	이원규
	안전주임	이원규
	안전주임	유대우
	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호
	품질주임	신길호
	쉴드대리(야간)	홍동우
	계	22명	계	16명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
08월10일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 3,4단 버팀해체	유승필	김현규 임희승
	932정거장	- 5,6Span 토사피트 되메우기 - 4Span 1단 버팀해체 - 8Span 1단 버팀 및 띠장해체 - 11Span 지하2층 좌측열 중앙파일 해체 - 11,12Span 한전관로 매달기 - #1~4번 출입구 띠장 및 버팀보 설치/토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 5Span 상부슬래브 동바리 해체 - 7Span 상부슬래브 동바리 설치 - 9Span 상부슬래브 철근조립 - 154Kv 흄관깨기 및 매달기작업 - #1,2번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 - #5,6번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치	양희석	박민주 박진정
	쉴드터널	- 커터헤드 육성보강 및 비트 해체 - 커터헤드 가대 해체 및 갱내 청소		홍동우 박지현
08월11일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 3,4단 버팀해체	임승만	이기상 임희승
	932정거장	- 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 4Span 1단 버팀해체 - 8Span 띠장해체 - 11Span 좌측열 중앙 파일 해체 - #1~4번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치		박종현 이현탁
	933정거장	- 3Span 기초슬래브 철근조립 - 6Span 상부슬래브 동바리 설치 - 7Span 상부슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - 9Span 상부슬래브 철근조립/외벽거푸집설치 - 154Kv 흄관깨기 및 매달기작업 - #1,2번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 - #5,6번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치	유승필	박민주 최동선
	쉴드터널	- 커터헤드 육성보강 및 비트 해체 - 커터헤드 가대 해체 및 갱내 청소		홍동우 박지현
08월12일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 3,4단 버팀해체	백인기	김현규 임희승
	932정거장	- 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 4Span 1단 버팀해체 - 8Span 띠장해체 - 11Span 좌측열 중앙 파일 해체 - #1~4번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span 기초슬래브 철근조립 - 6Span 상부슬래브 동바리 설치 - 7Span 상부슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - 9Span 상부슬래브 철근조립/외벽거푸집설치 - 154Kv 흄관깨기 및 매달기작업 - #1,2번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 - #5,6번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치	임승만	서성일 박진정
	쉴드터널	- 커터헤드 육성보강 및 비트 해체 - 커터헤드 가대 해체 및 갱내 청소		홍동우 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
08월13일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 3,4단 버팀해체	김완수	이기상 임희승
	932정거장	- 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 4Span 1단 버팀해체 - 8Span 띠장해체 - 11Span 좌측열 중앙 파일 해체 - #1~4번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치		박종현 이현탁
	933정거장	- 3Span 기초슬래브 철근조립 - 6Span 상부슬래브 동바리 설치 - 7Span 상부슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - 9Span 상부슬래브 철근조립/외벽거푸집설치 - 154Kv 흄관깨기 및 매달기작업 - #1,2번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 - #5,6번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치	백인기	박민주 최동선
	쉴드터널	- 커터헤드 육성보강 및 비트 해체 - 커터헤드 가대 해체 및 갱내 청소		홍동우 박지현
08월14일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 3,4단 버팀해체	김선태	김현규 임희승
	932정거장	- 5,6Span 상부슬래브 되메우기 - 4Span 1단 버팀해체 - 8Span 띠장해체 - 11Span 좌측열 중앙 파일 해체 - #1~4번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 3Span 기초슬래브 철근조립 - 6Span 상부슬래브 동바리 설치 - 7Span 상부슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - 9Span 상부슬래브 철근조립/외벽거푸집설치 - 154Kv 흄관깨기 및 매달기작업 - #1,2번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치 - #5,6번 출입구 기존구조물깨기, 지장물 매달기, 토공굴착 - #5,6번 출입구 토공굴착/가시설 설치/강재토류판 설치	김완수	서성일 박진정
	쉴드터널	- 커터헤드 육성보강 및 비트 해체 - 커터헤드 가대 해체 및 갱내 청소		홍동우 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	08.10일(월)	08.11일(화)	08.12일(수)	08.13일(목)	08.14일(금)
감리단	책임감리원	김완수				O	O
	보조감리원	유승필	O	O
	보조감리원	임승만		O	O
	보조감리원	백인기			O	O
	보조감리원	김선태					O
	보조감리원	양희석	O
시공사	현장대리인	서용범			O	O	O
	공사과장	이태신	O		O		O
	공사대리	박종현		O		O
	공사대리	이기상		O		O
	공사대리	김현규	O		O		O
	공사대리	이현탁		O		O
	공사기사	정순길	O		O		O
	공사과장	박민주	O	O		O
	공사과장	서성일			O		O
	공사대리	김세현
	공사대리	박진정	O		O		O
	공사주임	최동선		O		O
	공사주임	임희승	O	O	O	O	O
	터널대리	홍동우	O	O	O	O	O
	터널대리	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O	O			O
	안전과장	안병욱	O	O	O	O	O
	안전주임	유대우	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	안전주임	염찬수	O		O		O
	안전사원	박재원		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질과장	김기태		O		O
	품질대리	전형준				O
	품질사원	신길호	O		O		O
합계			15명	14명	15명	15명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)