휴일 및 야간 작업계획

(`15.09.12 ~ `15.09.18)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
09월12일(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 쉴드터널 (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 지하1층 상부 슬래브 철근조립, 거푸집 및 동바리 보강재 설치	김완수	박종현 이기상
	932 정거장	- 1~3Span 저압그라우팅, 토류벽 철근조립 및 거푸집 조립 - 5~11Span 현장 물청소 - 7~12Span 작업구 차수턱 설치 - 5~7Span 상부슬라브 빔개구부 방수 - #1,2,3,4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 및 버팀보 설치 - #1,2,3,4번 출입구 강재 토류판 설치, 토류벽 철거		이태신 김현규
	933 정거장	- 2Span 바닥면 정리, 지열 천공, 배관 및 그라우팅 - 3Span B3 1단벽체, 기둥 거푸집 해체 - 6Span 상부슬래브 양생, 7Span B1 슬라브 철근 조립 - 9Span B1 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치, 어스앵커 천공, 주입, 인장	김선태	박민주 김세현
	쉴드터널	- 컨베이어 벨트 설치 - 지상설비 배관 - 토사피트 시공 - 세그먼트 호이스트 설치 - WTP 천막설치		김준철 박지웅
09월13일(일)	931S1 환기구	현장 휴무 : 당직자 2명 근무	-	김태화 이원규 (당직)
	932 정거장
	933 정거장
	쉴드터널

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.09.12(토)		2015.09.13(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	-	-
	보조감리원	김선태	-	-
시공사	현장소장	김용희	안전과장	김태화
	현장대리인	서용범	안전주임	이원규
	공사과장	이태신
	공사과장	박종현
	공사대리	이기상
	공사대리	이현탁
	공사대리	김현규
	안전주임	이원규
	안전사원	박재원
	공사과장	박민주
	공사대리	박진정
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	안전주임	염찬수
	쉴드차장	조광영
	쉴드과장	류주열
	쉴드과장	권우형
	쉴드과장	김준철
	쉴드대리	최민수
	쉴드대리	박지현
	쉴드대리	이원욱
	쉴드대리	홍동우
	쉴드주임	박지웅
	안전주임	유대우
	안전과장	안병욱
	계	27명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
09월14일(월) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 상부 슬래브 철근조립,외벽 거푸집 및 동바리 보강재 설치	백인기	이기상 이현탁
	932정거장	- 1,2,3Span 저압, 고압 그라우팅, 폐기물 상차 - 1,2,3Span 토류벽, 토류판 설치, 철근조립, 거푸집 조립 및 타설 - 1,2,3Span 4단 버팀 및 6단 사버팀 띠장 설치 - #1~4번 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 최동선
	933정거장	- 2Span 바닥면 정리, 지열 배관 및 그라우팅 - 3Span B3 슬라브 동바리 설치, 정화조 화장실 슬라브 동바리 설치 - 5Span B1 2단벽체 방수, 7Span B1 슬라브 철근 조립 - 9Span B1 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치,어스앵커 천공,주입,인장	임승만	서성일 김세현
	쉴드터널	- 컨베이어 벨트/세그먼트 호이스트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		박지현 홍동우
09월15일(화) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 상부 슬래브 철근조립,외벽 거푸집 및 동바리 보강재 설치	김완수	김현규 정순길
	932정거장	- 1,2,3Span 저압, 고압 그라우팅, 폐기물 상차 - 1,2,3Span 토류벽, 토류판 설치, 철근조립, 거푸집 조립 및 타설 - 1,2,3Span 4단 버팀 및 6단 사버팀 띠장 설치 - #1~4번 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 임희승
	933정거장	- 2Span 바닥면 정리, 지열 배관 및 그라우팅 - 3Span B3 슬라브 동바리 설치, 정화조 화장실 슬라브 동바리 설치 - 5Span B1 2단벽체 방수, 7Span B1 슬라브 철근 조립 - 9Span B1 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치,어스앵커 천공,주입,인장	백인기	박민주 박진정
	쉴드터널	- 컨베이어 벨트/세그먼트 호이스트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		박지현 홍동우
09월16일(수) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 상부 슬래브 철근조립,외벽 거푸집 및 동바리 보강재 설치	김선태	이기상 이현탁
	932정거장	- 1,2,3Span 저압, 고압 그라우팅, 폐기물 상차 - 1,2,3Span 토류벽, 토류판 설치, 철근조립, 거푸집 조립 및 타설 - 1,2,3Span 4단 버팀 및 6단 사버팀 띠장 설치 - #1~4번 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 최동선
	933정거장	- 2Span 바닥면 정리, 지열 배관 및 그라우팅 - 3Span B3 슬라브 동바리 설치, 정화조 화장실 슬라브 동바리 설치 - 5Span B1 2단벽체 방수, 7Span B1 슬라브 철근 조립 - 9Span B1 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치,어스앵커 천공,주입,인장	김완수	서성일 김세현
	쉴드터널	- 컨베이어 벨트/세그먼트 호이스트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		박지현 홍동우

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
09월17일(목) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 상부 슬래브 철근조립,외벽 거푸집 및 동바리 보강재 설치	양희석	김현규 정순길
	932정거장	- 1,2,3Span 저압, 고압 그라우팅, 폐기물 상차 - 1,2,3Span 토류벽, 토류판 설치, 철근조립, 거푸집 조립 및 타설 - 1,2,3Span 4단 버팀 및 6단 사버팀 띠장 설치 - #1~4번 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 임희승
	933정거장	- 2Span 바닥면 정리, 지열 배관 및 그라우팅 - 3Span B3 슬라브 동바리 설치, 정화조 화장실 슬라브 동바리 설치 - 5Span B1 2단벽체 방수, 7Span B1 슬라브 철근 조립 - 9Span B1 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/ 토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공 굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치,어스앵커 천공,주입,인장	김선태	박민주 박진정
	쉴드터널	- 컨베이어 벨트/세그먼트 호이스트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		박지현 홍동우
09월18일(금) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 상부 슬래브 철근조립,외벽 거푸집 및 동바리 보강재 설치	유승필	이기상 이현탁
	932정거장	- 1,2,3Span 저압, 고압 그라우팅, 폐기물 상차 - 1,2,3Span 토류벽, 토류판 설치, 철근조립, 거푸집 조립 및 타설 - 1,2,3Span 4단 버팀 및 6단 사버팀 띠장 설치 - #1~4번 출입구 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 최동선
	933정거장	- 2Span 바닥면 정리, 지열 배관 및 그라우팅 - 3Span B3 슬라브 동바리 설치, 정화조 화장실 슬라브 동바리 설치 - 5Span B1 2단벽체 방수, 7Span B1 슬라브 철근 조립 - 9Span B1 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/ 토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공 굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치,어스앵커 천공,주입,인장	양희석	서성일 김세현
	쉴드터널	- 컨베이어 벨트/세그먼트 호이스트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		박지현 홍동우

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	09.14일(월)	09.15일(화)	09.16일(수)	09.17일(목)	09.18일(금)
감리단	책임감리원	김완수		O	O
	보조감리원	유승필					O
	보조감리원	임승만	O
	보조감리원	백인기	O	O
	보조감리원	김선태			O	O
	보조감리원	양희석				O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신		O		O
	공사대리	박종현	O		O		O
	공사대리	이기상	O		O		O
	공사대리	김현규		O		O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길		O		O
	공사과장	박민주		O		O
	공사과장	서성일	O		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사주임	임희승		O		O
	터널대리	박지현	O	O	O	O	O
	터널대리	홍동우	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O	O	O	O	O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전주임	유대우	O		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	안전사원	박재원	O		O		O
	품질과장	김병호		O		O
	품질과장	김기태	O		O		O
	품질대리	전형준	O		O		O
	품질사원	신길호		O		O
합계			17명	16명	17명	16명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)