휴일 및 야간 작업계획

(`15.09.05 ~ `15.09.11)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
09월05일(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 쉴드터널 (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 지하1층 동바리 하부 보강, 상부 슬래브 철근조립	양희석	이현탁 정순길
	932 정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 - 9Span #1,2 연결통로 1단 버팀보 해체 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체 - #1,2,3,4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 및 버팀보 설치 - #1,2,3,4번 출입구 강재 토류판 설치		이태신 임희승
	933 정거장	- 2Span 반력대 잔여분 해체 및 접지 및 지열 시공부 바닥 깨기 - 3Span B3 1단벽체, 기둥 양생 - 6Span 상부슬래브 철근조립, 상수도 받침보 해체 및 인양, 동바리 보강 - 7Span B1 슬래브 동바리, 거푸집 설치, 거더부 철근 조립 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	백인기	박민주 김세현
	쉴드터널	- 반력대 설치 - 디스크 커터 설치 - 커터모터 설치 - 컨베이어 벨트 설치 - 지상설비 배관 - 토사피트 시공		김준철 박지웅
09월06일(일) 931S1환기구 932정거장 933정거장 쉴드터널 (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 지하1층 동바리 하부 보강, 상부 슬래브 철근조립	임승만	이기상 김현규
	932 정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 - 9Span #1,2 연결통로 1단 버팀보 해체 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체 - #1,2,3,4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장설치 및 버팀보 설치 - #1,2,3,4번 출입구 강재 토류판 설치		박종현 최동선
	933 정거장	- 2Span 반력대 잔여분 해체 및 접지 및 지열 시공부 바닥 깨기 - 3Span B3 1단벽체, 기둥 양생 - 6Span 상부슬래브 철근조립, 상수도 받침보 해체 및 인양, 동바리 보강 - 7Span B1 슬래브 동바리, 거푸집 설치, 거더부 철근 조립 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	유승필	서성일 박진정
	쉴드터널	- 반력대 설치 - 디스크 커터 설치 - 커터모터 설치 - 컨베이어 벨트 설치 - 지상설비 배관 - 토사피트 시공		김준철 홍동우

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.09.05(토)		2015.09.06(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	양희석	보조감리원	임승만
	보조감리원	백인기	보조감리원	유승필
시공사	현장대리인	서용범	현장소장	김용희
	공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁	공사대리	이기상
	공사주임	정순길	공사대리	김현규
	안전주임	이원규	안전과장	김태화
	품질과장	김병호	안전사원	박재원
	공사과장	박민주	공사과장	서성일
	공사대리	김세현	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구	공사주임	최동선
	공사주임	임희승	안전주임	염찬수
	안전대리	김성관	품질대리	전형준
	품질주임	신길호	쉴드차장	조광영
	쉴드과장	김준철	쉴드과장	권우형
	쉴드대리	김정연	쉴드과장	김준철
	쉴드대리	박지현	쉴드대리	박지현
	쉴드대리	이원욱	쉴드대리	홍동우
	쉴드주임	박지웅	안전과장	안병욱
	안전주임	유대우
	계	20명	계	19명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
09월07일(월) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 동바리 하부 보강, 상부 슬래브 철근조립	김완수	이기상 이현탁
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 최동선
	933정거장	- 2Span 반력대 잔여분 해체 및 깨기, 반출, 지열 천공, 접치 설치 - 3Span B3 벽체, 기둥 거푸집 해체, 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체, 동바리 보강 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 슬라브 철근조립 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	백인기	서성일 김세현
	쉴드터널	- 커터모터, 컨베이어 벨트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		이원욱 박지웅
09월08일(화) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 동바리 하부 보강, 상부 슬래브 철근조립	김선태	김현규 정순길
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 임희승
	933정거장	- 2Span 반력대 잔여분 해체 및 깨기, 반출, 지열 천공, 접치 설치 - 3Span B3 벽체, 기둥 거푸집 해체, 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체, 동바리 보강 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 슬라브 철근조립 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	김완수	박민주 박진정
	쉴드터널	- 커터모터, 컨베이어 벨트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		이원욱 박지웅
09월09일(수) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 동바리 하부 보강, 상부 슬래브 철근조립	양희석	이기상 이현탁
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치, 상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 최동선
	933정거장	- 2Span 반력대 잔여분 해체 및 깨기, 반출, 지열 천공, 접치 설치 - 3Span B3 벽체, 기둥 거푸집 해체, 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체, 동바리 보강 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 슬라브 철근조립 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기,토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	김선태	서성일 김세현
	쉴드터널	- 커터모터, 컨베이어 벨트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		이원욱 박지웅

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
09월10일(목) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 동바리 하부 보강, 상부 슬래브 철근조립	유승필	김현규 정순길
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치,상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		이태신 임희승
	933정거장	- 2Span 반력대 잔여분 해체 및 깨기, 반출, 지열 천공,접치 설치 - 3Span B3 벽체, 기둥 거푸집 해체, 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 슬라브 철근조립, 상수도받침보 해체, 동바리 보강 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 슬라브 철근조립 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/ 토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기, 토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	양희석	박민주 박진정
	쉴드터널	- 커터모터, 컨베이어 벨트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		이원욱 박지웅
09월11일(금) (18:00~21:00)	931S1환기구	- 지하1층 동바리 하부 보강, 상부 슬래브 철근조립	임승만	이기상 이현탁
	932정거장	- 5,6Span 파일박스 철근용접 거푸집 설치 - 5~9Span 2000mm 상수도 기둥 거푸집 설치 - 11Span 덕트 벽체 거푸집설치,상부슬래브 파일박스 방수 - 11~12Span 상부슬래브 되메우기 - 12Span 배기덕트 3단벽체 거푸집 해체, 벽체 철근조립 - #1~4번 출입구 토사굴착 및 반출, 띠장, 버팀보, 강재토류판 설치		박종현 최동선
	933정거장	- 2Span 반력대 잔여분 해체 및 깨기, 반출, 지열 천공,접치 설치 - 3Span B3 벽체, 기둥 거푸집 해체, 슬라브 동바리 설치 - 6Span B1 슬라브 Con’c 양생 - 7Span B1 슬라브 동바리, 거푸집 설치, 슬라브 철근조립 - #1,2번 출입구 토공굴착 및 상차, 버팀보/띠장/ㄷ형강/ 토류벽 설치 - #1,2번 출입구 ㄱ형강 보강, 기존 구조물 깨기, 어스앵커 천공,주입,인장 - #5,6번 출입구 기존구조물,토류벽깨기,지장물 매달기, 토공굴착 및 상차 - #5,6번 출입구 ㄷ형강/띠장/버팀보/토류판 설치	유승필	서성일 김세현
	쉴드터널	- 커터모터, 컨베이어 벨트 설치, 지상설비 배관, 토사피트 시공		이원욱 박지웅

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	09.07일(월)	09.08일(화)	09.09일(수)	09.10일(목)	09.11일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O	O
	보조감리원	유승필				O	O
	보조감리원	임승만					O
	보조감리원	백인기	O
	보조감리원	김선태		O	O
	보조감리원	양희석			O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신		O		O
	공사대리	박종현	O		O		O
	공사대리	이기상	O		O		O
	공사대리	김현규		O		O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길		O		O
	공사과장	박민주		O		O
	공사과장	서성일	O		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사주임	임희승		O		O
	터널대리	이원욱	O	O	O	O	O
	터널대리	박지웅	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O	O	O	O	O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전주임	유대우	O		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	안전사원	박재원	O		O		O
	품질과장	김병호		O		O
	품질과장	김기태	O		O		O
	품질대리	전형준	O		O		O
	품질사원	신길호		O		O
합계			17명	16명	17명	16명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)