휴일 및 야간 작업계획

(`16.1.23 ~ `16.1.29)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
1월23일(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~익일18시) 쉴드터널 (07시~익일06시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 전통+중통부 결합본체 위치 이동(후통부 결합 후속작업준비)	양희석	류주열 박재형
	932 정거장	- 1~2Span 바닥방수 및 몰탈타설 - 1~2Span 기초철근조립 - 3Span 벽체철근조립 - 9,10Span 보조파일설치 중앙파일절단 - E/V 1,2,3 버팀보해체 - E/V 4동바리설치 - 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로#1 기초시공이음부 치핑		이태신 김현규
	쉴드터널	- 갱내 수평 그라우팅(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		김준철 박지현 홍동우(야) 김양환(야)
	933 정거장	- 1Span B3 특별피난계단 거푸집 설치 - 1Span B3 슬라브 동바리 설치 및 거푸집 설치 - 2~3Span B2 2단벽체 되메우기 - 6,7Span 보조파일설치 - #1,2번 출입구 발코니 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 거푸집설치 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	백인기	서성일 김세현
1월24일(일) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~익일18시) 쉴드터널 (07시~익일06시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 전통+중통부 결합본체 위치 이동(후통부 결합 후속작업준비)	김완수	김정연 이기상
	932 정거장	- 1~2Span 바닥방수 및 몰탈타설 - 1~2Span 기초철근조립 - 3Span 벽체철근조립 - 9,10Span 보조파일설치 중앙파일절단 - E/V 1,2,3 버팀보해체 - E/V 4동바리설치 - 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로#1 기초시공이음부 치핑
				박종현 정순길
	쉴드터널	- 갱내 수평 그라우팅(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)
				김준철 이현탁 최민수(야) 이원욱(야)
	933 정거장	- 1Span B3 특별피난계단 거푸집 설치 - 1Span B3 슬라브 동바리 설치 및 거푸집 설치 - 2~3Span B2 2단벽체 되메우기 - 6,7Span 보조파일설치 - #1,2번 출입구 발코니 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 거푸집설치 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	임승만	박민주 최동선

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.1.23(토)		2016.1.24(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	양희석	책임감리원	김완수
	보조감리원	백인기	보조감리원	임승만
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	현장대리인	서용범	공사과장	박종현
	공사과장	이태신	공사주임	정순길
	공사대리	김현규	공사과장	박민주
	공사차장	박윤식	공사대리	박진정
	공사과장	서성일	공사주임	최동선
	공사대리	김세현	터널차장	조광영
	공사주임	이윤구	터널과장	김준철
	터널차장	조광영	터널대리	김정연
	터널과장	류주열	터널대리	이기상
	터널과장	김준철	터널대리	이현탁
	터널대리	박지현	터널대리(야간)	최민수
	터널대리	박재형	터널대리(야간)	이원욱
	터널주임	임희승	안전대리	김성관
	터널대리(야간)	홍동우	안전주임	이원규
	터널과장(야간)	김양환	품질과장	김기태
	안전과장	안병욱	품질대리	전형준
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	계	23명	계	19명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
1월25일(월) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 전통+중통부 결합본체 위치 이동(후통부 결합 후속작업준비)	김완수	류주열 박재형
	932정거장	- 1~2Span 기초철근조립 - 3Span 1단벽체철근조립 및 거푸집설치 - 8,9,10Span 보조파일 설치 중앙파일절단 - E/V 1,2,3 버팀보해체, 벽체조립 - E/V 4 동바리설치 - 출입구#1~2 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로#2 동바리설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- 갱내 수평 그라우팅 (2구간 하선) - 인버트 Con’c타설/거푸집,배관작업(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3슬라브 동바리 거푸집 설치. 철근조립 - 3Span 6단,7단 버팀보해체 - 정화조 화장실 슬라브 외벽 거푸집해체 - 6,7Span 보조파일설치 - 8Span 보강슬래브 방수 - 9Span 중간파일해체 - #1,2번 환승통로 거푸집해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근 조립	양희석	박민주 김세현
1월26일(화) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체용접을 위한 비계 설치	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1~2Span 기초철근조립 - 3Span 1단벽체철근조립 및 거푸집설치 - 8,9,10Span 보조파일 설치 중앙파일절단 - E/V 1,2,3 버팀보해체, 벽체조립 - E/V 4 동바리설치 - 출입구#1~2 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로#2 동바리설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- 갱내 수평 그라우팅 (2구간 하선) - 인버트 Con’c타설/거푸집,배관작업(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3슬라브 동바리 거푸집 설치. 철근조립 - 3Span 6단,7단 버팀보해체 - 정화조 화장실 슬라브 외벽 거푸집해체 - 6,7Span 보조파일설치 - 8Span 보강슬래브 방수 - 9Span 중간파일해체 - #1,2번 환승통로 거푸집해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근 조립	백인기	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
1월27일(수) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체용접을 위한 비계 설치	백인기	류주열 박재형
	932정거장	- 1~2Span 기초철근조립 - 3Span 1단벽체철근조립 및 거푸집설치 - 8,9,10Span 보조파일 설치 중앙파일절단 - E/V 1,2,3 버팀보해체, 벽체조립 - E/V 4 동바리설치 - 출입구#1~2 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로#2 동바리설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- 갱내 수평 그라우팅 (2구간 하선) - 인버트 Con’c타설/거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3슬라브 동바리 거푸집 설치. 철근조립 - 3Span 6단,7단 버팀보해체 - 정화조 화장실 슬라브 외벽 거푸집해체 - 6,7Span 보조파일설치 - 8Span 보강슬래브 방수 - 9Span 중간파일해체 - #1,2번 환승통로 거푸집해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 Con’c타설 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근 조립	임승만	박민주 최동선
1월28일(목) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체용접을 위한 비계 설치	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1~2Span 기초철근조립 - 3Span 1단벽체철근조립 및 거푸집설치 - 8,9,10Span 보조파일 설치 중앙파일절단 - E/V 1,2,3 버팀보해체, 벽체조립 - E/V 4 동바리설치 - 출입구#1~2 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로#2 동바리설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- 갱내 수평 그라우팅 (2구간 하선) - 인버트 Con’c타설/거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3슬라브 동바리 거푸집 설치. 철근조립 - 3Span 6단,7단 버팀보해체 - 정화조 화장실 슬라브 외벽 거푸집해체 - 6,7Span 보조파일설치 - 8Span 보강슬래브 방수 - 9Span 중간파일해체 - #1,2번 환승통로 거푸집해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 Con’c양생 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근 조립	김완수	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
1월29일(금) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체용접을 위한 비계 설치	양희석	류주열 박재형
	932정거장	- 1~2Span 기초철근조립 - 3Span 1단벽체철근조립 및 거푸집설치 - 8,9,10Span 보조파일 설치 중앙파일절단 - E/V 1,2,3 버팀보해체, 벽체조립 - E/V 4 동바리설치 - 출입구#1~2 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로#2 동바리설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- 갱내 수평 그라우팅 (2구간 하선) - 인버트 Con’c타설/거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3슬라브 동바리 거푸집 설치. 철근조립 - 3Span 6단,7단 버팀보해체 - 정화조 화장실 슬라브 외벽 거푸집해체 - 6,7Span 보조파일설치 - 8Span 보강슬래브 방수 - 9Span 중간파일해체 - #1,2번 환승통로 거푸집해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 Con’c양생 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 Con’c타설	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	1.25일(월)	1.26일(화)	1.27일(수)	1.28일(목)	1.29일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O			O	O
	보조감리원	임승만			O	O
	보조감리원	백인기		O	O
	보조감리원	양희석	O	O			O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O	O	O
	공사과장	박종현		O		O
	공사대리	김현규	O		O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드대리	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이기상		O		O
	쉴드대리	최민수
	쉴드대리	홍동우	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형	O		O		O
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			16명	16명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)