휴일 및 야간 작업계획

(`16.1.30 ~ `16.2.5)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
1월30일(토) 932정거장 933정거장 (07시~익일18시) 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일06시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 본체부 용접 및 커팅휠 용접, 유압호스 연결	양희석	류주열 박재형 이기상(야) 이성열(야)
	932 정거장	- 1Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 양생 - 8Span 파일박스 개구부 거푸집해체 및 방수 - 7,8,9Span 보조파일설치 및 중앙파일절단 - #1,2번 출입구 자전거주차장 토공 및 강재토류판설치 - E/V 4 동바리설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 연결통로#1 기초Con’c 양생		이태신 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 커터교체(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		김준철 임희승 홍동우(야) 김양환(야)
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 2,3Span B3 2단벽체 되메우기 - 6,7Span 보조파일설치 및 9,10Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 거푸집 해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 거푸집해체 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	백인기	서성일 박진정
1월31일(일) 932정거장 933정거장 (07시~익일18시) 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일06시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 본체부 용접 및 커팅휠 용접, 유압호스 연결	김완수	류주열 박재형 이기상(야) 이성열(야)
	932 정거장	- 1Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 양생 - 8Span 파일박스 개구부 거푸집해체 및 방수 - 7,8,9Span 보조파일설치 및 중앙파일절단 - #1,2번 출입구 자전거주차장 토공 및 강재토류판설치 - E/V 4 동바리설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 연결통로#1 기초Con’c 양생		박종현 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 커터교체(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		김준철 이현탁 최민수(야) 홍동우(야)
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 2,3Span B3 2단벽체 되메우기 - 6,7Span 보조파일설치 및 9,10Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 거푸집 해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 1단벽체 거푸집해체 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	임승만	박민주 김세현

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.1.30(토)		2016.1.31(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	양희석	책임감리원	김완수
	보조감리원	백인기	보조감리원	임승만
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	공사과장	이태신	현장대리인	서용범
	공사주임	정순길	공사과장	박종현
	공사과장	서성일	공사대리	김현규
	공사대리	박진정	공사과장	박민주
	공사주임	최동선	공사대리	김세현
	터널차장	조광영	공사주임	이윤구
	터널과장	류주열	터널차장	조광영
	터널과장	김준철	터널과장	류주열
	터널대리	김정연	터널과장	김준철
	터널대리	박재형	터널대리	박지현
	터널주임	임희승	터널대리	이현탁
	터널대리(야간)	홍동우	터널대리	박재형
	터널대리(야간)	이기상	터널대리(야간)	최민수
	터널반장(야간)	이성열	터널대리(야간)	홍동우
	터널과장(야간)	김양환	터널대리(야간)	이기상
	안전과장	안병욱	터널반장(야간)	이성열
	안전주임	이원규	안전과장	김태화
	안전주임	염찬수	안전대리	김성관
	품질과장	김기태	품질과장	김병호
	품질사원	신길호	품질대리	전형준
	계	23명	계	23명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월1일(월) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체부 용접 및 커팅휠 용접, 유압호스 연결	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1,2Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 버팀해체 - 7,8,9Span 보조파일설치 및 중앙파일절단 - #1,2번 출입구 자전거주차장 토류판설치 - E/V 1,2 벽체 철근조립 - E/V 4 동바리설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 연결통로#1 기초거푸집 해체		이태신 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 커터교체(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		최민수 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 3Span 6,7단 버팀보해체 - 6,7Span 보조파일설치, 9Span 중간파일 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 거푸집 해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 2단벽체 철근조립 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	김완수	박민주 김세현
2월2일(화) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체부 용접 및 커팅휠 용접, 유압호스 연결	김완수	류주열 이기상
	932정거장	- 1,2Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 버팀해체 - 7,8,9Span 보조파일설치 및 중앙파일절단 - #1,2번 출입구 자전거주차장 토류판설치 - E/V 1,2 벽체 철근조립 - E/V 4 동바리설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 연결통로#1 기초거푸집 해체		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 커터교체(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		최민수 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 3Span 6,7단 버팀보해체 - 6,7Span 보조파일설치, 9Span 중간파일 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 거푸집 해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 2단벽체 철근조립 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	임승만	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월3일(수) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체부 용접 및 커팅휠 용접, 유압호스 연결	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1,2Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 버팀해체 - 7,8,9Span 보조파일설치 및 중앙파일절단 - #1,2번 출입구 자전거주차장 토류판설치 - E/V 1,2 벽체 철근조립 - E/V 4 동바리설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 연결통로#1 기초거푸집 해체		이태신 정순길
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		최민수 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 3Span 6,7단 버팀보해체 - 6,7Span 보조파일설치, 9Span 중간파일 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 거푸집 해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 2단벽체 철근조립 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	양희석	박민주 최동선
2월4일(목) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체부 용접 및 커팅휠 용접, 유압호스 연결	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 기초철근조립 및 Con’c 타설, 2Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 버팀해체 - 7,8,9Span 보조파일설치 및 중앙파일절단 - #1,2번 출입구 자전거주차장 토류판설치 - E/V 1,2 벽체 철근조립 - E/V 4 동바리설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 연결통로#1 기초거푸집 해체		이태신 김현규
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		최민수 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 3Span 6,7단 버팀보해체 - 6,7Span 보조파일설치, 9Span 중간파일 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 거푸집 해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 2단벽체 철근조립 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	백인기	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월5일(금) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 본체부 용접 및 커팅휠 용접, 유압호스 연결	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 기초양생 및 2Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 버팀해체 - 7,8,9Span 보조파일설치 및 중앙파일절단 - #1,2번 출입구 자전거주차장 토류판설치 - E/V 1,2 벽체 철근조립 - E/V 4 동바리설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 연결통로#1 기초거푸집 해체		이태신 정순길
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버터 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		최민수 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 3Span 6,7단 버팀보해체 - 6,7Span 보조파일설치, 9Span 중간파일 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 거푸집 해체 및 벽체방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 2단벽체 철근조립 - #5,6번 출입구 외부E/V 기초 철근조립	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	2.1일(월)	2.2일(화)	2.3일(수)	2.4일(목)	2.5일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O	O			O
	보조감리원	임승만		O	O
	보조감리원	백인기	O			O	O
	보조감리원	양희석			O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O	O	O
	공사대리	김현규		O		O
	공사주임	정순길	O		O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드대리	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이기상	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱
	쉴드대리	홍동우	O	O	O	O	O
	쉴드대리	최민수	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			16명	16명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)