휴일 및 야간작업 계획서

▣ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

▣ 시 공 사 : (주)삼성물산, (주)쌍용건설, 매일종합건설(주)

▣ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

▣ 휴일 및 야간작업 시행기간 : 2016.11.01 ~ 2016.11.30 (30일)

▣ 휴일 및 야간작업 시행사유

- 휴일/야간작업을 통하여 932/933정거장 구조물공사와 쉴드 TBM 굴진 및 세그먼트 조립으로 공기를 단축하고자 함.

▣ 932정거장 휴일작업(주간) 예정일

구 분	2016년 11월								비 고
	5일(토)	6일(일)	12일(토)	13일(일)	19일(토)	20일(일)	26일(토)	27(일)
본체구조물									07:00 ~ 18:00
	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓
지장물복구
	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓
출입구구조물
	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓

▣ 933정거장 휴일작업(주간) 예정일

구 분	2016년 11월								비 고
	5일(토)	6일(일)	12일(토)	13일(일)	19일(토)	20일(일)	26일(토)	27(일)
본체구조물									07:00 ~ 18:00
	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓
지장물복구
	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓
출입구구조물
	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓

▣ 932/933정거장 야간작업 예정일

구 분	2016년 11월																			비 고
	1일	2일		3일		4일		5일		6일		7일		8일		9일		10일
구조물공사	◯	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 23:00
구 분	2016년 11월																			비 고
	11일	12일		13일		14일		15일		16일		17일		18일		19일		20일
구조물공사	◯	◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 23:00
구 분	2016년 11월																			비 고
	21일		22일		23일		24일		25일		26일		27일		28일		29일		30일
구조물공사	◯		◯		◯		◯		◯		◯		☓		◯		◯		◯	18:00 ~ 23:00

▣ 터널1,2구간 야간작업 예정일

구 분	2016년 11월																			비 고
	1일	2일		3일		4일		5일		6일		7일		8일		9일		10일
터널공사	◯	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 07:00
구 분	2016년 11월																			비 고
	11일	12일		13일		14일		15일		16일		17일		18일		19일		20일
터널공사	◯	◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 07:00
구 분	2016년 11월																			비 고
	21일		22일		23일		24일		25일		26일		27일		28일		29일		30일
터널공사	◯		◯		◯		◯		◯		◯		☓		◯		◯		◯	18:00 ~ 07:00

▣ 휴일작업 및 야간작업사항

- 별 첨 #1(휴일 작업사항)	- 별 첨 #2(야간 작업사항)

▣ 근무인원

- 별 첨 #3(휴일작업 근무자 명단)       - 별 첨 #4(야간작업 근무자 명단)

현장대리인 : 서 용 범  (인)

책임감리원 : 김 완 수  (인)

* 별 첨 #1

* 별 첨 #1

휴일작업사항(주간)

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시	작 업 사 항	비 고
	932 정거장
11.05(토)	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	07:00 ~ 18:00
11.06(일)	- #1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	07:00 ~ 18:00
11.12(토)	- #1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	07:00 ~ 18:00
11.13(일)	현장 휴무	-
11.19(토)	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	07:00 ~ 18:00
11.20(일)	- #1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	07:00 ~ 18:00
11.26(토)	- 정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	07:00 ~ 18:00
11.27(일)	현장 휴무	-

일 시	작 업 사 항	비 고
	933 정거장
11.05(토)	1Span 1단버팀 및 사보해체 자전거주차장 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 E/V #1,2번 철근조립 및 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
11.06(일)	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
11.12(토)	- 1Span 1단버팀 및 사보해체 자전거주차장 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 E/V #1,2번 철근조립 및 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
11.13(일)	현장 휴무	-
11.19(토)	1Span 1단버팀 및 사보해체 자전거주차장 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 E/V #1,2번 철근조립 및 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
11.20(일)	- 1Span 중앙파일 해체 자전거주차장 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 E/V #1,2번 철근조립 및 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
11.26(토)	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
11.27(일)	현장 휴무	-

일 시	작 업 사 항	비 고
	쉴드터널(1,2구간)
11.05(토)	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
11.06(일)	- 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
11.12(토)	- 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
11.13(일)	현장 휴무	-
11.19(토)	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
11.20(일)	- 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
11.26(토)	- 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
11.27(일)	현장 휴무	-

* 별 첨 #2

야간작업사항(휴일 및 평일)

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
11.01(화)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.02(수)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.03(목)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.04(금)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.05(토)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.06(일)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.07(월)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.08(화)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.09(수)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
11.10(목)	야간	#1~4 환기덕트 슬래브 동바리 설치 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1,2 통로 동바리설치, 벽체 및 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
11.11(금)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.12(토)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.13(일)		현장 휴무	18:00 ~ 23:00
11.14(월)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.15(화)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.16(수)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.17(목)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.18(금)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.19(토)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00
11.20(일)	야간	#1~4 환기덕트 기초철근 조립 자전거주차장 벽체, 슬래브 철근 조립 #1~4 출입구 성토 및 다짐	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
11.21(월)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.22(화)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.23(수)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.24(목)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.25(금)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.26(토)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.27(일)		현장 휴무	-
11.28(월)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.29(화)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00
11.30(수)	야간	정거장 환기구 줄파기 및 파일 천공, 토사 굴착 정거장 슬래브 되메우기 및 다짐 #1~4 출입구 기초 철근 조립	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
11.01(화)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.02(수)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.03(목)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.04(금)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.05(토)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.06(일)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.07(월)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.08(화)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.09(수)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.10(목)	야간	1Span B1 간벽 철근 조립, 슬래브 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #6 출입구 벽체 거푸집 설치, 슬래브 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
11.11(금)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.12(토)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.13(일)		현장 휴무	-
11.14(월)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.15(화)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 동바리 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.16(수)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.17(목)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.18(금)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.19(토)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.20(일)	야간	1Span B1 슬래브 철근 조립, 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 철근 조립 및 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
11.21(월)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.22(화)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.23(수)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.24(목)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.25(금)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.26(토)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.27(일)		현장 휴무	-
11.28(월)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.29(화)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
11.30(수)	야간	1Span B1 슬래브 외벽 거푸집 설치 2Span B1 슬래브 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #5,6 출입구 슬래브 및 캐노피 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴 드 터 널(1,2구간)
11.01(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.02(수)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.03(목)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.04(금)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.05(토)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.06(일)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.07(월)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.08(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.09(수)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.10(목)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴 드 터 널(1,2구간)
11.11(금)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.12(토)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.13(일)		현장 휴무	-
11.14(월)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.15(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.16(수)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.17(목)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.18(금)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.19(토)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.20(일)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴 드 터 널(1,2구간)
11.21(월)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.22(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.23(수)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.24(목)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.25(금)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.26(토)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.27(일)		현장 휴무	-
11.28(월)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.29(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
11.30(수)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 장비 해체작업(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00

* 별 첨 #3

휴일작업 근무자명단

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

구 분		2016년 11월
직 책	성 명	5일(토)	6일(일)	12일(토)	13일(일)	19일(토)	20일(일)	26일(일)	27일(일)
현장소장	이상도	O	O	O	현장휴무	O	O	O	현장휴무
현장대리인	서용범	O		O			O
터널팀장	조광영		O			O		O
터널과장	류주열	O		O			O
터널과장	이기상		O				O	O
터널대리	이원욱	O		O		O
터널과장	김준철		O			O	O
터널대리	김정연	O		O				O
터널대리	박지현		O				O	O
터널대리	홍동우	O		O		O
공사과장	이태신		O			O	O
공사과장	박종현	O		O				O
공사대리	이현탁	O		O		O
공사주임	정순길		O				O	O
공사과장	박민주		O	O			O
공사과장	서성일	O		O		O
공사대리	김세현		O				O	O
공사대리	박진정	O		O		O
공사주임	이윤구		O				O	O
공사주임	최동선	O		O		O
공사주임	임희승		O	O		O
안전팀장	노광선		O	O				O
안전과장	안병욱			O		O		O
안전대리	김성관	O				O
안전대리	이원규			O			O	O
안전주임	염찬수	O	O				O
품질팀장	김병호	O		O		O
품질과장	김기태		O				O	O
품질대리	전형준	O		O			O
품질주임	신길호		O			O		O
계		15명	15명	18명	2명	15명	15명	14명	2명

※ 작업사항에 따라 근무자가 변동될 수 있습니다.

* 별 첨 #4

야간작업 근무자명단

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

구 분		2016년 11월										비고
직 책	성 명	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일
공사 과장	박종현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	932
공사 대리	이현탁	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
공사 과장	서성일	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	933
공사 대리	박진정	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 과장	김준철	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 1호기
터널 대리	박지현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 과장	이기상	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 2호기
구 분		2016년 11월										비고
직 책	성 명	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
공사 과장	이태신	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	932
공사 주임	정순길	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
공사 대리	김세현	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	933
공사 주임	이윤구	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 대리	홍동우	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 1호기
터널 주임	임희승	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 대리	이원욱	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 2호기
구 분		2016년 11월										비고
직 책	성 명	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일
공사 과장	박종현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	932
공사 주임	정순길	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯
공사 대리	김세현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	933
공사 주임	최동선	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯
터널 대리	홍동우	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	쉴드 1호기
터널 대리	박지현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯
터널 대리	이원욱	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	쉴드 2호기

※ 작업사항에 따라 근무자가 변동될 수 있습니다.