휴일 및 야간 작업계획

(`16.2.13 ~ `16.2.19)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월13일(토) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 수전설비 반입	백인기	류주열 이기상 박재형(야) 유기영(야)
	932 정거장	- 1Span 벽체 및 마감벽 치핑, 사보해체 - 1Span 측벽채움타설 - 2Span 기초철근조립 - 3Span 띠장 해체 및 인양 - 3Span 측벽되메우기 - 9Span 빔개구부 치핑 및 거푸집해체 - 연결통로#2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		김준철 이원욱 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 보강, 2단벽체 거푸집 설치, 철근조립 - 2Span 6,7단 버팀보 해체 - 9,10Span 중간파일 해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 1Span B2 2단벽체 방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 벽체 방수	김완수	박민주 김세현
2월14일(일) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 수전설비 반입	임승만	이기상 홍동우 박재형(야) 차성탁(야)
	932 정거장	- 1Span 벽체 및 마감벽 치핑, 사보해체 - 2Span 기초철근조립 - 3Span 띠장 해체 및 인양 - 3Span 측벽되메우기 - 9Span 빔개구부 치핑 및 거푸집해체 - 연결통로#2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		김준철 김정연 박지현(야) 이현탁(야)
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 보강, 2단벽체 거푸집 설치, 철근조립 - 2Span 6,7단 버팀보 해체 - 9,10Span 중간파일 해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 1Span B2 2단벽체 방수 - #5,6번 출입구 내부E/V 벽체 방수	양희석	서성일 박진정

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.2.13(토)		2016.2.14(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	보조감리원	임승만
	보조감리원	백인기	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	공사과장	이태신	현장대리인	서용범
	공사대리	김현규	공사과장	박종현
	공사과장	박민주	공사주임	정순길
	공사차장	박윤식	공사차장	박윤식
	공사대리	김세현	공사과장	서성일
	공사주임	이윤구	공사대리	박진정
	터널차장	조광영	공사주임	최동선
	터널과장	류주열	터널차장	조광영
	터널과장	김준철	터널과장	김준철
	터널대리	최민수	터널대리	김정연
	터널대리	이기상	터널대리	이기상
	터널대리	이원욱	터널대리	홍동우
	터널대리(야간)	박지현	터널대리(야간)	박지현
	터널대리(야간)	박재형	터널대리(야간)	이현탁
	터널주임(야간)	임희승	터널대리(야간)	박재형
	터널차장(야간)	유기영	터널반장(야간)	차성탁
	안전과장	김태화	안전과장	김태화
	안전주임	이원규	안전과장	안병욱
	안전주임	염찬수	안전대리	김성관
	품질과장	김기태	품질과장	김병호
	품질대리	전형준	품질주임	신길호
	계	24명	계	24명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월15일(월) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	양희석	류주열 박재형
	932정거장	- 1Span 사보해체, 마감벽 거푸집설치 - 1Span B2 1단벽체 철근 및 거푸집 설치 - 3Span 측벽되메우기 - 8,9Span 빔개구부 철근 용접 및 거푸집설치 - E/V 1,2 벽체 거푸집설치 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 3Span 기초타설(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립, 동바리 보강, 2단벽체 거푸집설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 6,7Span 보조파일 설치 - 9Span 중간파일 해체 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 1Span 되메우기, 1,2Span 버팀보, 띠장해체 - #5,6번 출입구 어스앵커 띠장해체, 역무실 사버팀, 띠장해체	임승만	박민주 김세현
2월16일(화) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	임승만	류주열 박재형
	932정거장	- 1Span 사보해체, 마감벽 거푸집설치 - 1Span B2 1단벽체 철근 및 거푸집 설치 - 3Span 측벽되메우기 - 8,9Span 빔개구부 철근 용접 및 거푸집설치 - E/V 1,2 벽체 거푸집설치 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립, 동바리 보강, 2단벽체 거푸집설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 6,7Span 보조파일 설치 - 9Span 중간파일 해체 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 1Span 되메우기, 1,2Span 버팀보, 띠장해체 - #5,6번 출입구 어스앵커 띠장해체, 역무실 사버팀, 띠장해체	김완수	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월17일(수) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	양희석	류주열 박재형
	932정거장	- 1Span 사보해체, 마감벽 거푸집설치 - 1Span B2 1단벽체 철근 및 거푸집 설치 - 2Span 기초타설 - 3Span 측벽되메우기 - 8,9Span 빔개구부 철근 용접 및 거푸집설치 - E/V 1,2 벽체 거푸집설치 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 4Span 기초타설(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립, 동바리 보강, 2단벽체 거푸집설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 6,7Span 보조파일 설치 - 9Span 중간파일 해체 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 1Span 되메우기, 1,2Span 버팀보, 띠장해체 - #5,6번 출입구 어스앵커 띠장해체, 역무실 사버팀, 띠장해체	백인기	박민주 최동선
2월18일(목) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	백인기	류주열 박재형
	932정거장	- 1Span 사보해체, 마감벽 거푸집설치 - 1Span B2 1단벽체 철근 및 거푸집 설치 - 2Span 기초치핑 및 거더 헌치 거푸집설치 - 3Span 측벽되메우기 - 8,9Span 빔개구부 철근 용접 및 거푸집설치 - E/V 1,2 벽체 거푸집설치 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 거푸집 및 배관작업(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립, 동바리 보강, 2단벽체 거푸집설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 6,7Span 보조파일 설치 - 9Span 중간파일 해체 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 1Span 되메우기, 1,2Span 버팀보, 띠장해체 - #5,6번 출입구 어스앵커 띠장해체, 역무실 사버팀, 띠장해체 - #5,6번 출입구 내부, 외부 E/V 채움타설	임승만	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월19일(금) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	임승만	류주열 박재형
	932정거장	- 1Span 사보해체, 마감벽 거푸집설치 - 1Span B2 1단벽체 철근 및 거푸집 설치 - 2Span 기초치핑 및 거더 헌치 거푸집설치 - 3Span 측벽되메우기 - 8,9Span 빔개구부 철근 용접 및 거푸집설치 - E/V 1,2 벽체 거푸집설치 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 5Span 기초타설(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립, 동바리 보강, 2단벽체 거푸집설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 6,7Span 보조파일 설치 - 9Span 중간파일 해체 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 1Span 되메우기, 1,2Span 버팀보, 띠장해체 - #5,6번 출입구 어스앵커 띠장해체, 역무실 사버팀, 띠장해체	양희석	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	2.15일(월)	2.16일(화)	2.17일(수)	2.18일(목)	2.19일(금)
감리단	책임감리원	김완수		O
	보조감리원	임승만	O	O		O	O
	보조감리원	백인기			O	O
	보조감리원	양희석	O		O		O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O		O
	공사과장	박종현		O		O
	공사대리	김현규	O		O		O
	공사주임	정순길		O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드대리	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이기상
	쉴드대리	이원욱
	쉴드대리	박지현	O	O	O	O	O
	쉴드대리	최민수
	쉴드대리	박재형	O	O	O	O	O
	쉴드주임	임희승	O	O	O	O	O
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			16명	16명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)