휴일 및 야간 작업계획

(`16.2.20 ~ `16.2.26)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월20일(토) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장 (07시~18시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	백인기	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B2 1단벽체 철근조립 및 비계설치 - 2Span 기초양생 및 치핑, 거더헌치 거푸집설치 - 3Span 버팀보해체 - 7,8Span 빔개구부 거푸집해체 - 9Span KT맨홀 거푸집해체 - 연결통로#2 슬래브 거푸집 설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- TBM1호기 갱내 수평그라우팅(2구간 하선) - 인버트 Con’c 양생(2구간 상선)		김준철 이원욱
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립, 동바리 보강, 2단벽체 거푸집 설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립 - 3Span B2 1단벽체 거푸집 설치 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 굴착, 어스앵커 띠장, 버팀보해체 - #5,6번 출입구 어스앵커 띠장 해체	김완수	박민주 김세현
2월21일(일) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장	931S1 환기구	- 휴무(당직근무)	-	박지현 이윤구
	932 정거장
	쉴드터널
	933 정거장

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.2.20(토)		2016.2.21(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수
	보조감리원	백인기
시공사	현장소장	이상도	터널대리	박지현
	현장대리인	서용범	공사주임	이윤구
	공사과장	이태신
	공사과장	박종현
	공사대리	김현규
	공사주임	정순길
	공사과장	박민주
	공사대리	박진정
	공사대리	김세현
	공사주임	최동선
	터널과장	류주열
	터널과장	김준철
	터널대리	김정연
	터널대리	이기상
	터널대리	이원욱
	안전과장	김태화
	안전과장	안병욱
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	품질과장	김기태
	품질대리	전형준
	계	23명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월22일(월) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 1단벽체 철근조립 및 비계설치, 엔트란스링 설치 - 2Span B2 거더헌치 Con’c타설 - 3Span 버팀보해체 및 동바리설치 - 7Span 빔개구부 치핑, 보조파일 설치 - 연결통로#1 벽체철근조립 - 연결통로#2 슬래브 거푸집 설치 - E/V#1,2 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - E/V#4 슬래브 철근조립		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 Con’c타설 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 6,7Span 보조파일 설치 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 굴착, 버팀보 설치, 1Span 벽체되메우기, E/A 띠장해체 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체철근조립	김완수	박민주 김세현
2월23일(화) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 1단벽체 철근조립 및 비계설치, 엔트란스링 설치 - 3Span 버팀보해체 및 동바리설치 - 7Span 빔개구부 치핑, 보조파일 설치 - 연결통로#1 벽체철근조립 - 연결통로#2 슬래브 거푸집 설치 - E/V#1,2 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - E/V#4 슬래브 철근조립		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 Con’c양생 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 6,7Span 보조파일 설치 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 굴착, 버팀보 설치, 1Span 벽체되메우기, E/A 띠장해체 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체철근조립	임승만	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월24일(수) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 1단벽체 철근조립 및 비계설치, 엔트란스링 설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립 - 3Span 버팀보해체 및 동바리설치 - 7Span 빔개구부 치핑, 보조파일 설치 - 연결통로#1 벽체철근조립 - 연결통로#2 슬래브 거푸집 설치 - E/V#1,2 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - E/V#4 슬래브 철근조립		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 Con’c양생 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 1단벽체 Con’c타설 - 6,7Span 보조파일 설치 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 굴착, 버팀보 설치, 1Span 벽체되메우기, E/A 띠장해체 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체철근조립	양희석	박민주 최동선
2월25일(목) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 1단벽체 철근조립 및 비계설치, 엔트란스링 설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립 - 3Span 버팀보해체 및 동바리설치 - 7Span 빔개구부 치핑, 보조파일 설치 - 연결통로#1 벽체철근조립 - 연결통로#2 슬래브 거푸집 설치 - E/V#1,2 벽체 Con’c타설 - E/V#4 슬래브 철근조립		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 인버트 보도부 Con’c타설(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 Con’c양생 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 1단벽체 Con’c양생 - 6,7Span 보조파일 설치 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 굴착, 버팀보 설치, 1Span 벽체되메우기, E/A 띠장해체 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체철근조립	백인기	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월26일(금) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 설치, 문형크레인 레일 설치	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 1벽체 철근조립 및 비계설치, 엔트란스링 설치 - 2Span B2 1단벽체 철근조립 - 3Span 버팀보해체 및 동바리설치 - 7Span 빔개구부 치핑, 보조파일 설치 - 연결통로#1 벽체철근조립 - 연결통로#2 슬래브 거푸집 설치 - E/V#4 슬래브 철근조립		이태신 김현규
	쉴드터널	- TBM1호기 굴진재개 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 보도부 Con’c양생(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 Con’c양생 - 2Span B2 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 1단벽체 Con’c양생 - 6,7Span 보조파일 설치 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 굴착, 버팀보 설치, 1Span 벽체되메우기, E/A 띠장해체 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체철근조립	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	2.22일(월)	2.23일(화)	2.24일(수)	2.25일(목)	2.26일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O				O
	보조감리원	임승만		O	O
	보조감리원	백인기		O		O	O
	보조감리원	양희석	O		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O		O
	공사과장	박종현		O		O
	공사대리	김현규	O		O		O
	공사주임	정순길		O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드대리	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이기상	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱	O	O	O	O	O
	쉴드대리	홍동우	O	O	O	O	O
	쉴드대리	최민수	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			17명	17명	17명	17명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)