휴일 및 야간 작업계획

(`16.2.27 ~ `16.3.4)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월27일(토) 932정거장 (07시~18시) 933정거장 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 보강 - 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 레일 준비	양희석	류주열 박재형 이기상(야) 최승부(야)
	932 정거장	- 1Span B2 벽체철근조립 - 1Span 엔트란스링 설치 - 2Span 거더헌치 거푸집해체, 마감벽 거푸집해체 - 3Span 동발목 설치 - 7Span 중앙파일해체 및 인양 - 정화조 파일박스 거푸집 설치 - E/V #1,2 벽체거푸집 해체		이태신 정순길
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 내 청소 및 구심측량(2구간 상선)		김준철 김정연 이원욱(야) 최민수(야)
	933 정거장	- 1Span B3 2단벽체 거푸집 해체, 2Span B2 1단벽체 양생 - 3Span B2 1단벽체 거푸집 해체 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일해체 및 자재인양 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 919-920공구 경계부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 바닥정리, #5,6번 출입구 역무실 2Span 벽체거푸집 조립 - 석촌역 승강장 작업장 부설물 이동(철야)	백인기	박민주 박진정 서성일(야) 최동선(야)
2월28일(일) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 보강 - 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 레일 준비	김완수	류주열 김홍중 이기상(야) 최승부(야)
	932 정거장	- 1Span B2 벽체철근조립 - 1Span 엔트란스링 설치 - 2Span 거더헌치 거푸집해체, 마감벽 거푸집해체 - 3Span 동발목 설치 - 7Span 중앙파일해체 및 인양 - 정화조 파일박스 거푸집 설치 - E/V #1,2 벽체거푸집 해체		박종현 정순길
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 내 청소 및 구심측량(2구간 상선)		김준철 박지현 이원욱(야) 홍동우(야)
	933 정거장	- 1Span B3 2단벽체 거푸집 해체, 2Span B2 1단벽체 양생 - 3Span B2 1단벽체 거푸집 해체 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일해체 및 자재인양 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 919-920공구 경계부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 바닥정리, #5,6번 출입구 역무실 2Span 벽체거푸집 조립	임승만	박윤식 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월1일(화) 932정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 933정거장 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 보강 - 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 레일 준비	양희석	류주열 박재형 이기상(야) 이성열(야)
	932정거장	- 1Span B2 벽체철근조립, 비계설치 - 1Span 엔트란스링 설치 - 2Span 버팀보해체 - 3Span 동발목, 동바리 설치 및 기둥철근조립 - 7,8,9Span B2 중앙파일 해체 및 인양 - E/V #1,2 벽체 방수 - E/V #3 동바리 및 거푸집설치 - 연결통로#1 벽체 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 박지현 이원욱(야) 홍동우(야)
	933정거장	- 1Span B3 2단벽체 방수, 되메우기 - 2Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일해체 및 자재인양 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 바닥정리, 1스판 B1 동바리 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 보호벽타설 - 석촌역 승강장 작업장 천장 마감재 철거(철야)	백인기	박민주 박진정 서성일(야) 최동선(야)

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.2.27(토)		2016.2.28(일)		2016.3.1(화)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	백인기	책임감리원	김완수	보조감리원	백인기
	보조감리원	양희석	보조감리원	임승만	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	공사과장	이태신	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범
	공사주임	정순길	공사과장	박종현	공사과장	박종현
	공사과장	박민주	공사주임	정순길	공사주임	정순길
	공사과장(야간)	서성일	공사차장	박윤식	공사과장	박민주
	공사대리	박진정	공사과장	서성일	공사과장	박진정
	공사주임(야간)	최동선	공사대리	김세현	공사과장(야)	서성일
	터널차장	조광영	터널차장	조광영	공사대리	김세현
	터널과장	김준철	터널과장	김준철	공사주임(야)	최동선
	터널대리	김정연	터널대리	박지현	터널차장	조광영
	터널대리	박지현	터널대리(야간)	이원욱	터널과장	김준철
	터널대리(야간)	최민수	터널대리(야간)	홍동우	터널대리	박지현
	터널대리(야간)	이원욱	터널주임	임희승	터널대리(야간)	이원욱
	터널과장	류주열	터널과장	류주열	터널대리(야간)	홍동우
	터널대리(야간)	이기상	터널대리(야간)	이기상	터널주임	임희승
	터널과장(야간)	최승부	터널과장(야간)	최승부	터널과장	류주열
	터널대리	박재형	터널기장	김홍중	터널대리(야간)	이기상
	안전과장	김태화	안전대리	김성관	터널과장(야간)	이성열
	안전과장	안병욱	안전주임	염찬수	터널기장	김홍중
	안전주임	이원규	품질과장	김기태	터널대리	박재형
	품질과장	김병호	품질대리	전형준	안전과장	김태화
	품질사원	신길호			안전대리	김성관
					안전주임	이원규
					품질과장	김기태
					품질대리	전형준
	계	24명	계	23명	계	27명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월29일(월) 932정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 933정거장 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 보강 - 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 레일 준비	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 벽체철근조립, 비계설치 - 1Span 엔트란스링 설치 - 2Span 버팀보해체 - 3Span 동발목, 동바리 설치 및 기둥철근조립 - 7,8,9Span B2 중앙파일 해체 및 인양 - E/V #1,2 벽체 방수 - E/V #3 동바리 및 거푸집설치 - 연결통로#1 벽체 거푸집 설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- TBM1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 최민수
	933정거장	- 1Span B3 2단벽체 방수, 되메우기 - 2Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일해체 및 자재인양 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 바닥정리, 1스판 B1 동바리 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 보호벽타설 - 석촌역 승강장 작업장 천장 마감재 철거(철야)	양희석	박민주 서성일
3월2일(수) 932정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 933정거장 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 보강 - 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 레일 준비	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 벽체철근조립, 비계설치 - 1Span 엔트란스링 설치 - 2Span 버팀보해체 - 3Span 동발목, 동바리 설치 및 기둥철근조립 - 7,8,9Span B2 중앙파일 해체 및 인양 - E/V #1,2 벽체 방수 - E/V #3 동바리 및 거푸집설치 - 연결통로#1 벽체 거푸집 설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- TBM1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 최민수
	933정거장	- 1Span B3 2단벽체 방수, 되메우기 - 2Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일해체 및 자재인양 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 바닥정리, 1스판 B1 동바리 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 보호벽타설 - 석촌역 승강장 작업장 벽체 건축마감 철거(철야)	백인기	서성일 최동선

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월3일(목) 932정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 933정거장 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 보강 - 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 레일 준비	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 벽체철근조립, 비계설치 - 1Span 엔트란스링 설치 - 2Span 버팀보해체 - 3Span 동발목, 동바리 설치 및 기둥철근조립 - 7,8,9Span B2 중앙파일 해체 및 인양 - E/V #1,2 벽체 방수 - E/V #3 동바리 및 거푸집설치 - 연결통로#1 벽체 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 최민수
	933정거장	- 1Span B3 2단벽체 방수, 되메우기 - 2Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일해체 및 자재인양 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 바닥정리, 1스판 B1 동바리 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 보호벽타설 - 석촌역 승강장 작업장 벽체 건축마감 철거	임승만	서성일 김세현
3월4일(금) 932정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 933정거장 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 커팅휠 용접 및 반력대 보강 - 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 레일 준비	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 벽체철근조립, 비계설치 - 1Span 엔트란스링 설치 - 2Span 버팀보해체 - 3Span 동발목, 동바리 설치 및 기둥철근조립 - 7,8,9Span B2 중앙파일 해체 및 인양 - E/V #1,2 벽체 방수 - E/V #3 동바리 및 거푸집설치 - 연결통로#1 벽체 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- TBM1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 최민수
	933정거장	- 1Span B3 2단벽체 방수, 되메우기 - 2Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 3Span B2 1단벽체 거푸집해체, 방수 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일해체 및 자재인양 - 919-920공구 접속부 B3 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 환기덕트 바닥정리, 1스판 B1 동바리 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 보호벽타설 - 석촌역 승강장 작업장 벽체 건축마감 철거(철야)	김완수	서성일 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	2.29일(월)	3.2일(수)	3.3일(목)	3.4일(금)
감리단	책임감리원	김완수				O
	보조감리원	임승만	O		O	O
	보조감리원	백인기		O
	보조감리원	양희석	O	O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O
	공사과장	박종현	O	O	O	O
	공사주임	정순길			O	O
	공사과장	박민주	O
	공사과장	서성일	O	O	O	O
	공사대리	김세현			O
	공사대리	박진정				O
	공사주임	최동선		O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O
	쉴드대리	김준철	O	O	O	O
	쉴드대리	이기상	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱	O	O	O	O
	쉴드대리	박지현
	쉴드대리	최민수	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O	O		O
	안전과장	안병욱			O
	안전대리	김성관	O	O		O
	안전주임	이원규			O
	품질과장	김병호	O	O	O
	품질과장	김기태	O		O	O
	품질대리	전형준		O		O
합계			17명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)