휴일 및 야간 작업계획

(`16.2.6 ~ `16.2.12)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월6일(토) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장	931S1 환기구	휴무(당직근무)	양희석	류주열 이원규
	932 정거장
	쉴드터널
	933 정거장
		휴무(당직근무)	백인기	손현민 이원규
2월7일(일) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장	931S1 환기구
	932 정거장
	쉴드터널
	933 정거장
		휴무(당직근무)	김완수	신상훈 이원규
2월8일(월) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장	931S1 환기구
	932 정거장
	쉴드터널
	933 정거장
		휴무(당직근무)	임승만	신상훈 이원규
2월9일(화) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장	931S1 환기구
	932 정거장
	쉴드터널
	933 정거장
		휴무(당직근무)	양희석	정동훈 이원규
2월10일(수) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장	931S1 환기구
	932 정거장
	쉴드터널
	933정거장

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.2.6(토)		2016.2.7(일)		2016.2.8(월)		2016.2.9(화)		2016.2.10.(수)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	양희석	보조감리원	백인기	책임감리원	김완수	보조감리원	임승만	보조감리원	양희석
시공사	터널과장	류주열	측량대리	손현민	측량주임	신상훈	측량주임	신상훈	관리주임	정동훈
	안전주임	이원규	안전주임	이원규	안전주임	이원규	안전주임	이원규	안전주임	이원규
	계	3명	계	3명	계	3명	계	3명	계	3명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월11일(목) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 본체부 용접 및 용접테스트, 반력대 설치(2구간 상선)	임승만	류주열 박재형
	932정거장	- 1Span 9단 코너사보 해체 - 2Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 되메우기 및 버팀해체 - 7,8,9Span 보조파일설치, 중앙파일 제거 - E/V 1,2 벽체 철근조립 - 연결통로#2 E/V 4 슬래브 거푸집 설치		이태신 정순길
	쉴드터널	- 갱내 수평그라우팅 작업(2구간 하선)		박지현 김정연
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 2Span 6,7단 버팀보해체 - 6,7Span 보조파일설치, 9Span 중간파일 해체 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 B1 1단벽체 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 B2 2단벽체 방수 및 되메우기 - #5,6번 출입구 내부E/V 2단 채움, 역무실 기초 철근조립	김완수	박민주 김세현
2월12일(금) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (19시~익일06시)	931S1환기구	- 본체부 용접 및 용접테스트, 반력대 설치(2구간 상선)	백인기	류주열 박재형
	932정거장	- 1Span 외벽 채움 Con’c타설, 9단 코너사보 해체 - 2Span 기초철근조립 - 3Span B2 1단벽체 되메우기 및 버팀해체 - 7,8,9Span 보조파일설치, 중앙파일 제거 - 자전거주차장 버림타설 - E/V 1,2 벽체 철근조립 - 연결통로#2 E/V 4 슬래브 거푸집 설치		이태신 김현규
	쉴드터널	- 갱내 수평그라우팅 작업(2구간 하선)		박지현 김정연
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 철근조립 - 2Span B3 슬라브 동바리 거푸집해체 - 2Span 6,7단 버팀보해체 - 6,7Span 보조파일설치, 9Span 중간파일 해체 - 정화조 화장실 슬라브 동바리 해체 - #1,2번 출입구 환승통로 B1 1단벽체 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 B2 2단벽체 방수 및 되메우기 - #5,6번 출입구 내부E/V 2단 채움, 역무실 기초 철근조립	양희석	서성일 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	2.11일(목)	2.12일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O
	보조감리원	임승만	O
	보조감리원	백인기		O
	보조감리원	양희석		O
시공사	현장대리인	서용범	O	O
	공사과장	이태신	O	O
	공사대리	김현규		O
	공사주임	정순길	O
	공사과장	박민주	O
	공사과장	서성일		O
	공사대리	김세현	O
	공사대리	박진정		O
	공사주임	최동선
	쉴드과장	류주열	O	O
	쉴드대리	김준철	O	O
	쉴드대리	이기상
	쉴드대리	이원욱
	쉴드대리	박지현	O	O
	쉴드대리	김정연	O	O
	쉴드대리	박재형	O	O
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O	O
	안전과장	안병욱
	안전대리	김성관	O	O
	안전주임	이원규
	품질과장	김병호	O
	품질과장	김기태	O	O
	품질대리	전형준		O
합계			16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)