휴일 및 야간 작업계획

(`16.3.12 ~ `16.3.18)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월12일(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 설치	백인기	류주열 박재형
	932 정거장	- 1Span 버팀보 및 사보해체 - 2Span 외벽 되메우기 작업 - 3Span B2 동바리 및 거푸집 설치 - 7~11Span 빔개구부 치핑 및 철근용접 - E/V #4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 슬래브 철근조립		이태신 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 집수정 하부 수평그라우팅 작업(2구간 하선)		김준철 홍동우 박지현(야) 유기영(야)
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 거푸집 동바리 해체, 7단 버팀보 해체 - 2Span B2 1단벽체 방수 - 3Span B2 1단벽체 방수 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일 해체 및 자재인양 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 B1 1단벽체 방수 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 기초철근조립	김완수	박민주 김세현
3월13일(일) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 장비내 전기라인 연결, 문형크레인 설치	임승만	이기상 김정연
	932 정거장	- 1Span 버팀보 및 사보해체 - 2Span 외벽 되메우기 작업 - 3Span B2 동바리 및 거푸집 설치 - 7~11Span 빔개구부 치핑 및 철근용접 - E/V #4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 슬래브 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 집수정 하부 수평그라우팅 작업(2구간 하선)		김준철 이원욱 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 거푸집 동바리 해체, 7단 버팀보 해체 - 2Span B2 1단벽체 방수 - 3Span B2 1단벽체 방수 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일 해체 및 자재인양 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 B1 1단벽체 방수 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 기초철근조립	양희석	서성일 박진정

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.3.12(토)		2016.3.13(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	보조감리원	임승만
	보조감리원	백인기	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	현장대리인	서용범	공사과장	이태신
	공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사주임	정순길	공사과장	서성일
	공사과장	박민주	공사대리	박진정
	공사대리	김세현	공사주임	최동선
	공사주임	이윤구	터널차장	조광영
	터널과장	김준철	터널과장	김준철
	터널기장(야간)	유기영	터널대리	김정연
	터널대리(야간)	박지현	터널대리	최민수
	터널대리	홍동우	터널대리	이원욱
	터널과장	류주열	터널대리(야간)	박지현
	터널대리	박재형	터널주임(야간)	임희승
	안전과장	안병욱	터널과장	이기상
	안전주임	염찬수	안전과장	김태화
	품질과장	김병호	안전대리	김성관
	품질사원	신길호	안전주임	이원규
			품질과장	김기태
			품질대리	전형준
	계	19명	계	21명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월14일(월) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 지상 전기라인 및 TR세팅, 수배전설비 사용전 점검	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀해체, B2 2단벽체 철근조립 - 1Span 엔트란스링 2단설치 - 2Span 기둥철근조립, 5단버팀보 해체 - 3Span 미들 슬래브 철근조립 - 7~11Span 빔개구부 치핑, 철근 용접 - E/V 1,2 외벽방수 및 되메우기 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 슬래브 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 집수정 하부 수평그라우팅 작업(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집 설치 작업(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체 - 2Span B2 1단벽체 되메우기 - 3Span B2 1단벽체 되메우기 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일 해체 및 자재인양 - #1,2번 출입구 B1 2단벽체 및 슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 기초철근 조립	양희석	박민주 김세현
3월15일(화) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 지상 전기라인 및 TR세팅, 수배전설비 사용전 점검	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀해체, B2 2단벽체 철근조립 - 1Span 엔트란스링 2단설치 - 2Span 기둥철근조립, 5단버팀보 해체 - 3Span 미들 슬래브 철근조립 - 7~11Span 빔개구부 치핑, 철근 용접 - E/V 1,2 외벽방수 및 되메우기 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 슬래브 철근조립		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 집수정 하부 수평그라우팅 작업(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집 설치 작업(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체 - 2Span B2 1단벽체 되메우기 - 3Span B2 1단벽체 되메우기 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일 해체 및 자재인양 - #1,2번 출입구 B1 2단벽체 및 슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 기초철근 조립	백인기	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월16일(수) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 지상 전기라인 및 TR세팅, 수배전설비 사용전 점검	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀해체, B2 2단벽체 철근조립 - 1Span 엔트란스링 2단설치 - 2Span 기둥철근조립, 5단버팀보 해체 - 3Span 미들 슬래브 철근조립 - 7~11Span 빔개구부 치핑, 철근 용접 - E/V 1,2 외벽방수 및 되메우기 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 슬래브 철근조립		이태신 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 집수정 하부 수평그라우팅 작업(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집 설치 작업(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체 - 2Span B2 1단벽체 되메우기 - 3Span B2 1단벽체 되메우기 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일 해체 및 자재인양 - #1,2번 출입구 B1 2단벽체 및 슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 기초철근 조립	임승만	박민주 최동선
3월17일(목) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 지상 전기라인 및 TR세팅, 수배전설비 사용전 점검	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀해체, B2 2단벽체 철근조립 - 1Span 엔트란스링 2단설치 - 2Span 기둥철근조립, 5단버팀보 해체 - 3Span 미들 슬래브 철근조립 - 7~11Span 빔개구부 치핑, 철근 용접 및 Con’c타설 - E/V 1,2 외벽방수 및 되메우기 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 슬래브 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집 설치 작업(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체 - 2Span B2 1단벽체 되메우기 - 3Span B2 1단벽체 되메우기 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일 해체 및 자재인양 - #1,2번 출입구 B1 2단벽체 및 슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 기초철근 조립	양희석	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월18일(금) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 지상 전기라인 및 TR세팅, 수배전설비 사용전 점검	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀해체, B2 2단벽체 철근조립 - 1Span 엔트란스링 2단설치 - 2Span 기둥철근조립, 5단버팀보 해체 - 3Span 미들 슬래브 철근조립 - E/V 1,2 외벽방수 및 되메우기 - E/V 4 슬래브 철근조립 - 연결통로#2 슬래브 철근조립		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 보도부 거푸집 설치 작업(2구간 상선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체 - 2Span B2 1단벽체 되메우기 - 3Span B2 1단벽체 되메우기 - 6Span 보조파일 설치 - 7Span 중간파일 해체 및 자재인양 - #1,2번 출입구 B1 2단벽체 및 슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 기초 Con’c 타설	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	3.14(월)	3.15(화)	3.16(수)	3.17 (목)	3.18 (금)
감리단	책임감리원	김완수					O
	보조감리원	임승만	O		O	O
	보조감리원	백인기		O	O
	보조감리원	양희석	O	O		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O	O
	공사과장	박종현	O	O		O	O
	공사주임	정순길		O	O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드과장	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드과장	이기상	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박지현	O	O	O	O	O
	쉴드대리	홍동우
	쉴드대리	이현탁	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승	O	O	O	O	O
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			17명	17명	17명	17명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)