휴일 및 야간 작업계획

(`16.3.19 ~ `16.3.25)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월19일(토) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장 (07시~18시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 후방대차 반입 및 설치작업	백인기	류주열 박재형
	932 정거장	- 1Span 2단 엔트란스링 설치, B2 2단벽체 철근조립 및 비계설치 - 2Span B2 동바리 설치, 측벽 비계 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립 - 6Span 보조파일 설치 - 7~9Span 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로#2 2단벽체 거푸집 설치 - E/V #1,2 외벽방수, #3 벽체거푸집 설치, #4 벽체 및 슬래브 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 고압케이블연장(2구간 하선) - 인버트 헌치 거푸집 설치(2구간 상선)		김준철 홍동우
	933 정거장	- 1Span B3 슬라브 거푸집 동바리 해체, 환기덕트부 바닥면 정리 - 2,3Span B2 1단벽체 되메우기 - 4,5Span 보조파일 설치 - 9,10Span 파일박스 양생 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 B1 2단벽체 및 슬라브 동바리 설치 및 거푸집 설치	김완수	서성일 김세현
3월20일(일) 931S1환기구 932정거장 쉴드터널 933정거장	931S1 환기구	- 휴무(당직근무)	-	이기상 박진정
	932 정거장
	쉴드터널
	933 정거장

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.3.19(토)		2016.3.20(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수
	보조감리원	백인기
시공사	현장소장	이상도	터널과장	이기상
	현장대리인	서용범	공사대리	박진정
	공사과장	이태신
	공사과장	박종현
	공사주임	정순길
	공사과장	서성일
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선
	터널차장	조광영
	터널과장	김준철
	터널대리	김정연
	터널대리	최민수
	터널대리	홍동우
	터널과장	류주열
	터널대리	박재형
	안전과장	김태화
	안전과장	안병욱
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	품질과장	김기태
	품질사원	신길호
	계	24명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월21일(월) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블 설치작업	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 2Span B2 동바리 설치, 측벽 비계 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립 - 4Span 1단 버팀보 해체 - 6Span 중앙파일 절단 - 6~8Span 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로#1 벽체 거푸집 해체, 외벽방수 - 연결통로#2 2단벽체 거푸집 해체 및 외벽 방수 - E/V #1,2 되메우기, E/V #4 벽체 및 슬래브 거푸집 설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 헌치 거푸집 설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체, 환기덕트부 바닥면 정리 - 2,3Span B2 1단벽체 되메우기, 5단 버팀보 해체 - 4~5Span 보조파일 설치 - 8호선 상부 방수 - 10-1Span 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 B1 2단벽체 및 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체 거푸집 설치	임승만	박민주 김세현
3월22일(화) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블 설치작업	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 2Span B2 동바리 설치, 측벽 비계 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립 - 4Span 1단 버팀보 해체 - 6Span 중앙파일 절단 - 6~8Span 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로#1 벽체 거푸집 해체, 외벽방수 - 연결통로#2 2단벽체 거푸집 해체 및 외벽 방수 - E/V #1,2 되메우기, E/V #4 벽체 및 슬래브 거푸집 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 헌치 거푸집 설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체, 환기덕트부 바닥면 정리 - 2,3Span B2 1단벽체 되메우기, 5단 버팀보 해체 - 4~5Span 보조파일 설치 - 8호선 상부 방수 - 10-1Span 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 출입구 B1 2단벽체 및 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체 거푸집 설치	양희석	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월23일(수) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블 설치작업	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 2Span B2 동바리 설치, 측벽 비계 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립 - 4Span 1단 버팀보 해체 - 6Span 중앙파일 절단 - 6~8Span 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로#1 벽체 거푸집 해체, 외벽방수 - 연결통로#2 2단벽체 거푸집 해체 및 외벽 방수 - E/V #1,2 되메우기, E/V #4 벽체 및 슬래브 거푸집 설치		이태신 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 헌치 거푸집 설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체, 환기덕트부 바닥면 정리 - 2,3Span B2 1단벽체 되메우기, 5단 버팀보 해체 - 4~5Span 보조파일 설치 - 8호선 상부 방수 및 몰탈 타설 - 10-1Span 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 출입구 B1 2단벽체 및 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체 거푸집 설치	백인기	박민주 최동선
3월24일(목) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블 설치작업	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 2Span B2 동바리 설치, 측벽 비계 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립 - 4Span 1단 버팀보 해체 - 6Span 중앙파일 절단 - 6~8Span 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로#1 벽체 거푸집 해체, 외벽방수 - 연결통로#2 2단벽체 거푸집 해체 및 외벽 방수 - E/V #1,2 되메우기, E/V #4 벽체 및 슬래브 타설		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 헌치 거푸집 설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체, 환기덕트부 바닥면 정리 - 2,3Span B2 1단벽체 되메우기, 5단 버팀보 해체 - 4~5Span 보조파일 설치 - 10-1Span 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 출입구 B1 2단벽체 및 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체 거푸집 설치	임승만	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월25일(금) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블 설치작업	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 2Span B2 동바리 설치, 측벽 비계 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립 - 4Span 1단 버팀보 해체 - 6Span 중앙파일 절단 - 6~8Span 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로#1 벽체 거푸집 해체, 외벽방수 - 연결통로#2 2단벽체 거푸집 해체 및 외벽 방수 - E/V #1,2 되메우기, E/V #4 벽체 및 슬래브 양생		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선) - 인버트 헌치 거푸집 설치(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span B3 슬라브 동바리 해체, 환기덕트부 바닥면 정리 - 2,3Span B2 1단벽체 되메우기, 5단 버팀보 해체 - 4~5Span 보조파일 설치 - 10-1Span 외벽 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 출입구 B1 2단벽체 및 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 역무실 1Span 벽체 거푸집 설치	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	3.21일(월)	3.22일(화)	3.23(수)	3.24일(목)	3.25일(금)
감리단	책임감리원	김완수					O
	보조감리원	임승만	O	O		O	O
	보조감리원	백인기	O		O	O
	보조감리원	양희석		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O	O
	공사과장	박종현	O	O		O	O
	공사대리	이현탁
	공사주임	정순길		O	O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드과장	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드과장	이기상	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱	O	O	O	O	O
	쉴드대리	홍동우	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형	O	O	O	O	O
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			16명	16명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)