휴일 및 야간 작업계획

(`16.3.26 ~ `16.4.1)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월26일(토) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 문형크레인 전기배선작업, 초기굴진용 케이블/호스 설치 준비	임승만	류주열 최승부 박재형(야) 김홍중(야)
	932 정거장	- 1Span B2 비계설치, 2단벽체 철근조립 - 2Span B2 동바리보강 및 슬래브 거푸집 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 6Span 중앙파일 철근용접 - 6~8Span 중간슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 측벽 되메우기 - E/V #3 2단벽체 되메우기		이태신 이현탁
	쉴드터널	- 쉴드1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 쉴드 인버트 헌치 거푸집 해체(2구간 상선)		조광영 김정연 이원욱(야) 이성열(야)
	933 정거장	- 1Span 환기덕트부 보호벽 거푸집 설치 - 2,3Span B2 5단버팀보 해체 - 4,5Span 보조파일 절단 - 10-1Span B3 슬라브 동바리 거푸집 보강재 해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 1S 철근 마감 작업 - #5,6번 출입구 대합실통로 1S 벽체 및 슬라브 거푸집 및 동바리 설치	백인기	서성일 박진정
3월27일(일) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 931S1환기구 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 문형크레인 전기배선작업, 초기굴진용 케이블/호스 설치 준비	김완수	류주열 문동식 이기상(야) 박재형(야)
	932 정거장	- 1Span B2 비계설치, 2단벽체 철근조립 - 2Span B2 동바리보강 및 슬래브 거푸집 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 6Span 중앙파일 철근용접 - 6~8Span 중간슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 측벽 되메우기 - E/V #3 2단벽체 되메우기		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 쉴드 인버트 헌치 거푸집 해체(2구간 상선)		김준철 임희승 홍동우(야) 최민수(야)
	933 정거장	- 1Span 환기덕트부 보호벽 거푸집 설치 - 2,3Span B2 5단버팀보 해체 - 4,5Span 보조파일 절단 - 10-1Span B3 슬라브 동바리 거푸집 보강재 해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 1S 철근 마감 작업 - #5,6번 출입구 대합실통로 1S 벽체 및 슬라브 거푸집 및 동바리 설치	임승만	박민주 김세현

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.3.26(토)		2016.3.27(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	임승만	책임감리원	김완수
	보조감리원	백인기	보조감리원	임승만
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	현장대리인	서용범	공사과장	박종현
	공사과장	이태신	공사주임	정순길
	공사대리	이현탁	공사과장	박민주
	공사과장	서성일	공사대리	김세현
	공사대리	박진정	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선	터널차장	조광영
	터널차장	조광영	터널과장	류주열
	터널과장	류주열	터널과장	김준철
	터널대리	김정연	터널대리(야간)	이기상
	터널대리	최민수	터널대리(야간)	최민수
	터널대리(야간)	이원욱	터널대리(야간)	홍동우
	터널대리(야간)	박재형	터널기장	이성열
	터널기장	최승부	터널주임	임희승
	터널기장(야간)	김홍중	터널대리(야)	박재형
	터널기장(야간)	이성열	터널기장	문동식
	안전과장	김태화	안전과장	안병욱
	안전대리	이원규	안전대리	이원규
	품질과장	김기태	품질과장	김병호
	품질사원	신길호	품질대리	전형준
	계	22명	계	22명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월28일(월) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블/호스 설치 준비	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 비계설치, 2단벽체 철근조립 및 거푸집설치 - 1Span 2단갱문 철근조립 - 2Span B2 동바리보강 및 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 6Span 중앙파일 해체 - 6~8Span 중간슬래브 빔개구부 타설 - 9~11Span 보조파일 해체, 원파일 설치 - E/V #1~3 버팀보해체 및 상부슬래브 동바리 설치 - E/V #4 거푸집 해체, 벽체 및 상부슬래브 방수		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 쉴드 인버트 헌치 거푸집 해체(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기덕트부 보호벽 거푸집 설치 - 2,3Span B2 5단버팀보 해체 - 4,5Span 보조파일 절단 - 10-1Span B3 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 1S 철근 마감 작업 - #5,6번 출입구 대합실통로 1S 벽체 및 슬라브 거푸집 및 동바리 설치	백인기	박민주 김세현
3월29일(화) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블/호스 설치 준비	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 비계설치, 2단벽체 철근조립 및 거푸집설치 - 1Span 2단갱문 철근조립 - 2Span B2 동바리보강 및 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 6Span 중앙파일 해체 - 9~11Span 보조파일 해체, 원파일 설치 - E/V #1~3 버팀보해체 및 상부슬래브 동바리 설치 - E/V #4 거푸집 해체, 벽체 및 상부슬래브 방수		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 쉴드 인버트 헌치 거푸집 해체(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기덕트부 보호벽 거푸집 설치 - 2,3Span B2 5단버팀보 해체 - 4,5Span 보조파일 절단 - 10-1Span B3 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 1S 철근 마감 작업 - #5,6번 출입구 대합실통로 1S 벽체 및 슬라브 거푸집 및 동바리 설치	임승만	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월30일(수) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블/호스 설치 준비	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 비계설치, 2단벽체 철근조립 및 거푸집설치 - 1Span 2단갱문 철근조립 - 2Span B2 동바리보강 및 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 3Span B2 동바리 보강, 2단벽체 및 중간슬래브 타설 - 6Span 중앙파일 해체 - 9~11Span 보조파일 해체, 원파일 설치 - E/V #1~3 버팀보해체 및 상부슬래브 동바리 설치 - E/V #4 거푸집 해체, 벽체 및 상부슬래브 방수		이태신 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 쉴드 인버트 헌치 거푸집 해체(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기덕트부 보호벽 거푸집 설치 - 2,3Span B2 5단버팀보 해체 - 4,5Span 보조파일 절단 - 10-1Span B3 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 1S 철근 마감 작업 - #5,6번 출입구 대합실통로 1S 벽체 및 슬라브 거푸집 및 동바리 설치	양희석	박민주 최동선
3월31일(목) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블/호스 설치 준비	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 비계설치, 2단벽체 철근조립 및 거푸집설치 - 1Span 2단갱문 철근조립 - 2Span B2 동바리보강 및 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 6Span 중앙파일 해체 - 9~11Span 보조파일 해체, 원파일 설치 - E/V #1~3 버팀보해체 및 상부슬래브 동바리 설치 - E/V #4 거푸집 해체, 벽체 및 상부슬래브 방수		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 쉴드 인버트 헌치 거푸집 해체(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기덕트부 보호벽 거푸집 설치 - 2,3Span B2 5단버팀보 해체 - 4,5Span 보조파일 절단 - 10-1Span B3 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 1S 철근 마감 작업 - #5,6번 출입구 대합실통로 1S 벽체 및 슬라브 거푸집 및 동바리 설치	김완수	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월1일(금) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 931S1환기구 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 초기굴진용 케이블/호스 설치 준비	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span B2 비계설치, 2단벽체 철근조립 및 거푸집설치 - 1Span 2단갱문 철근조립 - 2Span B2 동바리보강 및 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 6Span 중앙파일 해체 - 9~11Span 보조파일 해체, 원파일 설치 - E/V #1~3 버팀보해체 및 상부슬래브 동바리 설치 - E/V #4 거푸집 해체, 벽체 및 상부슬래브 방수		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 디스크커터 교체(2구간 하선) - 쉴드 인버트 헌치 거푸집 해체(2구간 상선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기덕트부 보호벽 거푸집 설치 - 2,3Span B2 5단버팀보 해체 - 4,5Span 보조파일 절단 - 10-1Span B3 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 1S 철근 마감 작업 - #5,6번 출입구 대합실통로 1S 벽체 및 슬라브 거푸집 및 동바리 설치	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	3.28(월)	3.29(화)	3.30(수)	3.31 (목)	4.1 (금)
감리단	책임감리원	김완수				O	O
	보조감리원	임승만		O	O
	보조감리원	백인기	O	O			O
	보조감리원	양희석	O		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O	O
	공사과장	박종현	O	O		O	O
	공사대리	이현탁
	공사주임	정순길		O	O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드과장	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드과장	이기상	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱	O	O	O	O	O
	쉴드대리	홍동우	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승	O	O	O	O	O
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			17명	17명	17명	17명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)