휴일 및 야간 작업계획

(`16.4.16 ~ `16.4.22)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월16일(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 쉴드터널 (07시~18시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 시운전 및 가설링 조립	백인기	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체 - 2Span 미들슬래브 철근조립 - 3Span 피난계단 보호벽 거푸집 설치, 측벽 되메우기 - 7~11Span 미들슬래브 빔개구부 거푸집 해체 - E/V #3 슬래브 거푸집 해체 - E/V #4 버팀해체 및 상부슬래브 되메우기		박종현 이현탁
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 김정연
	933 정거장	- 1Span 환기구 벽체 철근 조립 - 3Span B2 슬래브 동바리 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근 조립, 토공굴착 및 집토/반출 - #5,6번 보호벽 거푸집 설치	김완수	서성일 박진정
4월17일(일) 931S1환기구 932정거장 933정거장 쉴드터널	931S1 환기구	- 휴무(당직근무)	-	김정연 신길호
	932 정거장
	쉴드터널
	933 정거장

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.4.16(토)		2016.4.17(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수
	보조감리원	백인기
시공사	현장소장	이상도	터널대리	김정연
	현장대리인	서용범	품질사원	신길호
	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁
	공사주임	정순길
	공사과장	서성일
	공사대리	김세현
	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선
	터널차장	조광영
	터널과장	김준철
	터널대리	김정연
	터널대리	이원욱
	터널과장	류주열
	터널과장	이기상
	안전과장	김태화
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호
	품질대리	전형준
	계	23명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월18일(월) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 시운전	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체, B2 동바리 설치 - 2Span 미들슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span 버팀보 해체/인양 - 3Span B1 1단벽체 비계설치 및 철근조립 - 7~11Span 거더부 미들슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 동바리 거푸집 설치 및 벽체 철근조립 - E/V #3 슬래브 거푸집 해체 및 벽체방수 - E/V #4 버팀해체/인양 - 연결통로 #2 동바리 설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 철근 조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 슬래브 철근 조립 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 보호벽 거푸집 설치	양희석	박민주 김세현
4월19일(화) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 시운전	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체, B2 동바리 설치 - 2Span 미들슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span 버팀보 해체/인양 - 3Span B1 1단벽체 비계설치 및 철근조립 - 7~11Span 거더부 미들슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 동바리 거푸집 설치 및 벽체 철근조립 - E/V #3 슬래브 거푸집 해체 및 벽체방수 - E/V #4 버팀해체/인양 - 연결통로 #2 동바리 설치		박종현 이현탁
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 철근 조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 슬래브 철근 조립 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 보호벽 거푸집 설치	백인기	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월20일(수) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 시운전	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체, B2 동바리 설치 - 2Span 미들슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span 버팀보 해체/인양 - 3Span B1 1단벽체 비계설치 및 철근조립 - 7~11Span 거더부 미들슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 동바리 거푸집 설치 및 벽체 철근조립 - E/V #3 슬래브 거푸집 해체 및 벽체방수 - E/V #4 버팀해체/인양 - 연결통로 #2 동바리 설치		이현탁 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 철근 조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 슬래브 철근 조립 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 보호벽 타설	임승만	박민주 최동선
4월21일(목) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 시운전	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체, B2 동바리 설치 - 2Span 미들슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span 버팀보 해체/인양 - 3Span B1 1단벽체 비계설치 및 철근조립 - 7~11Span 거더부 미들슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 동바리 거푸집 설치 및 벽체 철근조립 - E/V #3 슬래브 거푸집 해체 및 벽체방수 - E/V #4 버팀해체/인양 - 연결통로 #2 동바리 설치		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 철근 조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 슬래브 철근 조립 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 보호벽 양생	김완수	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월22일(금) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 시운전	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체, B2 동바리 설치 - 2Span 미들슬래브 철근조립, 거푸집 설치 - 3Span 버팀보 해체/인양 - 3Span B1 1단벽체 비계설치 및 철근조립 - 7~11Span 거더부 미들슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 동바리 거푸집 설치 및 벽체 철근조립 - E/V #3 슬래브 거푸집 해체 및 벽체방수 - E/V #4 버팀해체/인양 - 연결통로 #2 동바리 설치		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 철근 조립, 거푸집 설치 - 3Span B2 슬래브 철근 조립 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 보호벽 양생	백인기	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	4.18(월)	4.19(화)	4.20(수)	4.21 (목)	4.22 (금)
감리단	책임감리원	김완수				O
	보조감리원	임승만	O		O	O
	보조감리원	백인기		O	O		O
	보조감리원	양희석	O	O			O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O			O
	공사과장	박종현	O	O		O	O
	공사대리	이현탁		O	O
	공사주임	정순길			O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드과장	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드과장	이기상	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱	O	O	O	O	O
	쉴드대리	홍동우	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			16명	16명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)