휴일 및 야간 작업계획

(`16.4.23~ `16.4.29)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월23(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 로코모티브, 토사함 하역	양희석	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 버팀보 해체, 2단벽체 방수보강 - 2Span 동바리 설치 및 보강, 슬래브 철근보강 - 3Span B1 버팀보해체, 측벽 되메우기 - 7Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 설치 - E/V #1,2 벽체 및 슬래브 철근조립 - E/V #3 3단벽체 외벽 거푸집 해체 및 방수, E/V #4 측벽 되메우기 다짐정리		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립 (2구간 하선)		김준철 김정연 홍동우(야) 최민수(야)
	933 정거장	- 1Span B2 환기구 1단벽체 양생 - 3Span B2 슬라브 철근조립 - 4,5Span 승강장 철근조립 - 4~7Span 탑슬라브 파일박스 철근조립, 거푸집 설치 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 바닥면정리 - #5,6번 출입구 보호몰탈 양생	백인기	서성일 박진정
4월24일(일) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 로코모티브, 토사함 하역	김완수	류주열 박재형
	932 정거장	- 1Span 버팀보 해체, 2단벽체 방수보강 - 2Span 동바리 설치 및 보강, 슬래브 철근보강 - 3Span B1 버팀보해체, 측벽 되메우기 - 7Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 설치 - E/V #1,2 벽체 및 슬래브 철근조립 - E/V #3 3단벽체 외벽 거푸집 해체 및 방수, E/V #4 측벽 되메우기 다짐정리		이현탁 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립 (2구간 하선)		김준철 박지현 이원욱(야) 최민수(야)
	933 정거장	- 1Span B2 환기구 1단벽체 양생 - 3Span B2 슬라브 철근조립 - 4,5Span 승강장 철근조립 - 4~7Span 탑슬라브 파일박스 철근조립, 거푸집 설치 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 바닥면정리 - #5,6번 출입구 보호몰탈 양생	임승만	박민주 김세현

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.4.23(토)		2016.4.24(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	백인기	책임감리원	김완수
	보조감리원	양희석	보조감리원	임승만
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	현장대리인	서용범	공사대리	이현탁
	공사과장	이태신	공사주임	정순길
	공사과장	박종현	공사과장	박민주
	공사과장	서성일	공사대리	김세현
	공사대리	박진정	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선	터널차장	조광영
	터널차장	조광영	터널과장	김준철
	터널과장	김준철	터널대리	박지현
	터널대리	김정연	터널대리(야간)	최민수
	터널대리	박지현	터널대리(야간)	이원욱
	터널대리(야간)	최민수	터널주임	임희승
	터널대리(야간)	홍동우	터널과장	류주열
	터널과장	류주열	터널대리	박재형
	터널과장	이기상	안전과장	김태화
	안전과장	안병욱	안전대리	김성관
	안전주임	이원규	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호	품질과장	김기태
	품질대리	전형준	품질사원	신길호
	계	21명	계	21명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월25일(월) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 동바리 설치, 3단벽체 철근조립 - 2Span 동바리 보강 - 3Span B1 버팀보 해체, 1단벽체 철근조립 - 7Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 벽체 및 슬래브 철근조립 - E/V #3 3단벽체 방수 및 되메우기 - E/V #4 상부슬래브 방수 - 연결통로 #2 슬래브 방수		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 해체, 방수, 되메우기 - 3Span B2 슬라브 철근조립 - 4,5Span 승강장 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	김완수	박민주 김세현
4월26일(화) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 동바리 설치, 3단벽체 철근조립 - 2Span 슬래브 타설 - 3Span B1 버팀보 해체, 1단벽체 철근조립 - 7Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 벽체 및 슬래브 철근조립 - E/V #3 3단벽체 방수 및 되메우기 - E/V #4 상부슬래브 방수 - 연결통로 #2 슬래브 방수		박종현 이현탁
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 해체, 방수, 되메우기 - 3Span B2 슬라브 철근조립 - 4,5Span 승강장 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	양희석	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월27일(수) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 동바리 설치, 3단벽체 철근조립 - 2Span 슬래브 양생 - 3Span B1 버팀보 해체, 1단벽체 철근조립 - 7Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 벽체 및 슬래브 철근조립 - E/V #3 3단벽체 방수 및 되메우기 - E/V #4 상부슬래브 방수 - 연결통로 #2 슬래브 방수		이현탁 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 해체, 방수, 되메우기 - 3Span B2 슬라브 철근조립 - 4,5Span 승강장 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	백인기	박민주 최동선
4월28일(목) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 동바리 설치, 3단벽체 철근조립 - 2Span 슬래브 양생 - 3Span B1 버팀보 해체, 1단벽체 철근조립 - 7Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 벽체 및 슬래브 철근조립 - E/V #3 3단벽체 방수 및 되메우기 - E/V #4 상부슬래브 방수 - 연결통로 #2 슬래브 방수		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 해체, 방수, 되메우기 - 3Span B2 슬라브 철근조립 - 4,5Span 승강장 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	임승만	서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월29일(금) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	임승만	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 동바리 설치, 3단벽체 철근조립 - 2Span 슬래브 양생 - 3Span B1 버팀보 해체, 1단벽체 철근조립 - 7Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 벽체 및 슬래브 철근조립 - E/V #3 3단벽체 방수 및 되메우기 - E/V #4 상부슬래브 방수 - 연결통로 #2 슬래브 방수		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		이원욱 홍동우
	933 정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 해체, 방수, 되메우기 - 3Span B2 슬라브 철근조립 - 4,5Span 승강장 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	4.25(월)	4.26(화)	4.27 (목)	4.28 (목)	4.29 (금)
감리단	책임감리원	김완수	O				O
	보조감리원	임승만		O		O	O
	보조감리원	양희석		O	O
	보조감리원	백인기	O		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O			O
	공사과장	박종현	O	O		O	O
	공사대리	이현탁		O	O
	공사주임	정순길			O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	서성일		O		O
	공사대리	김세현	O			O
	공사대리	박진정		O			O
	공사주임	최동선			O
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O	O
	쉴드과장	김준철	O	O	O	O	O
	쉴드과장	이기상	O	O	O	O	O
	쉴드대리	이원욱	O	O	O	O	O
	쉴드대리	홍동우	O	O	O	O	O
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승
	안전과장	김태화	O		O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O		O
	안전주임	이원규		O		O
	품질과장	김병호	O		O	O
	품질과장	김기태	O	O		O	O
	품질대리	전형준		O	O		O
합계			16명	16명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)