휴일 및 야간 작업계획

(`16.4.30 ~ `16.5.6)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월30일(토) 쉴드터널 1구간 932정거장 쉴드터널 2구간 933정거장 (07시~18시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	임승만	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 사버팀 및 버팀보해체, B2 동바리 설치 - 2Span 중간슬래브 외벽거푸집 해체 및 방수 - 3Span B1 1단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - 7~9Span 상부슬래브 빔개구부 치핑, 철근용접 - E/V #1,2 벽체거푸집 설치 - E/V #3 되메우기, E/V #4 버팀보해체, 슬래브 방수 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 및 철근조립		이태신 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 김정연
	933 정거장	- 1Span B2 환기구 1단벽체 방수 - 3Span B2 슬라브 거푸집 설치 - 4~6Span 배수콘크리트 거푸집해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 보호벽 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 기초 철근하역 및 운반, 조립	양희석	박민주 김세현
5월1일(일) 쉴드터널 1구간 932정거장 쉴드터널 2구간 933정거장	쉴드터널 1구간	- 휴무(당직근무)	-	서성일 최민수
	932 정거장
	쉴드터널 2구간
	933 정거장

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
5월5일(목) 932정거장 933정거장 (07시~21시) 쉴드터널1구간 (07시~24시) 쉴드터널2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	김완수	류주열 박재형
	932 정거장	- 1Span B2 동바리 설치, 3단벽체 철근조립, 엔트란스링 설치 - 2Span 2단벽체 외벽방수 - 3Span B1 1단벽체 거푸집 설치 - 7~9Span 상부슬래브 빔개구부 치핑 - E/V #3 3단벽체 되메우기 - E/V #4 슬래브 방수 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 설치 및 철근조립		이태신 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 홍동우 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 되메우기, 가시설해체 - 3Span B2 슬라브 양생 - 8~10Span 승강장 동바리 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 양생, 보호벽 Con’c 타설 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	임승만	박민주 서성일
5월6일(금) 932정거장 933정거장 (07시~21시) 쉴드터널1구간 (07시~24시) 쉴드터널2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	양희석	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B2 동바리 설치, 3단벽체 철근조립, 엔트란스링 설치 - 2Span 2단벽체 외벽방수 - 3Span B1 1단벽체 Con’c 타설 - 7~9Span 상부슬래브 빔개구부 치핑 - E/V #3 3단벽체 되메우기 - E/V #4 슬래브 방수 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 설치 및 철근조립		박종현 정순길
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 홍동우 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 되메우기, 가시설해체 - 3Span B2 슬라브 양생 - 8~10Span 승강장 동바리 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 양생, 보호벽 양생 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	백인기	박민주 박진정

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.4.30(토)		2016.5.1(일)		2016.5.5(목)		2016.5.6(금)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	임승만			책임감리원	김완수	보조감리원	양희석
	보조감리원	양희석			보조감리원	임승만	보조감리원	백인기
시공사	현장소장	이상도	공사과장	서성일	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	현장대리인	서용범	터널대리	최민수	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신			공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁			공사대리	이현탁	공사대리	정순길
	공사주임	정순길			공사주임	정순길	공사주임	박민주
	공사과장	박민주			공사과장	박민주	공사과장	박진정
	공사대리	김세현			공사과장	서성일	공사과장	김세현
	공사대리	박진정			공사대리	박진정	공사대리	최동선
	공사주임	이윤구			공사주임	최동선	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선			터널차장	조광영	터널차장	조광영
	터널차장	조광영			터널과장	김준철	터널과장	김준철
	터널과장	김준철			터널대리	홍동우	터널대리	홍동우
	터널대리	김정연			터널대리	이원욱	터널대리	김정연
	터널주임	임희승			터널대리(야간)	박지현	터널대리(야간)	박지현
	터널과장	류주열			터널대리(야간)	임희승	터널대리(야간)	임희승
	터널과장	이기상			터널과장	류주열	터널과장	류주열
	안전과장	안병욱			터널대리	박재형	터널대리	이기상
	안전대리	김성관			안전과장	김태화	안전과장	김태화
	안전주임	이원규			안전주임	이원규	안전주임	이원규
	품질과장	김기태			품질과장	김병호	품질과장	김병호
	품질대리	전형준			품질사원	신길호	품질사원	신길호
	계	21	계	2	계	21명	계	21명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
5월2일(월) 932정거장 933정거장 (07시~21시) 쉴드터널1구간 (07시~24시) 쉴드터널2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	양희석	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B2 동바리 설치, 3단벽체 철근조립, 엔트란스링 설치 - 2Span 2단벽체 외벽방수 - 3Span B1 1단벽체 거푸집 설치 - 7~9Span 상부슬래브 빔개구부 치핑 - E/V #3 3단벽체 되메우기 - E/V #4 슬래브 방수 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 설치 및 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 되메우기, 가시설해체 - 3Span B2 슬라브 Con’c 타설 - 8~10Span 승강장 동바리 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근 조립, 보호벽 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	백인기	박민주 김세현
5월3일(화) 932정거장 933정거장 (07시~21시) 쉴드터널1구간 (07시~24시) 쉴드터널2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	백인기	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B2 동바리 설치, 3단벽체 철근조립, 엔트란스링 설치 - 2Span 2단벽체 외벽방수 - 3Span B1 1단벽체 거푸집 설치 - 7~9Span 상부슬래브 빔개구부 치핑 - E/V #3 3단벽체 되메우기 - E/V #4 슬래브 방수 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 설치 및 철근조립		박종현 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 되메우기, 가시설해체 - 3Span B2 슬라브 양생 - 8~10Span 승강장 동바리 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근 조립, 보호벽 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	김완수	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
5월4일(수) 932정거장 933정거장 (07시~21시) 쉴드터널1구간 (07시~24시) 쉴드터널2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 하선)	김완수	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B2 동바리 설치, 3단벽체 철근조립, 엔트란스링 설치 - 2Span 2단벽체 외벽방수 - 3Span B1 1단벽체 거푸집 설치 - 7~9Span 상부슬래브 빔개구부 치핑 - E/V #3 3단벽체 되메우기 - E/V #4 슬래브 방수 - 연결통로 #1 슬래브 거푸집 설치 및 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span 환기구 벽체 거푸집 되메우기, 가시설해체 - 3Span B2 슬라브 양생 - 8~10Span 승강장 동바리 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 Con’c 타설, 보호벽 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 및 1Span 기초 철근조립	임승만	서성일 김세현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	5.2(월)	5.3(화)	5.4 (수)
감리단	책임감리원	김완수		O	O
	보조감리원	임승만			O
	보조감리원	백인기	O	O
	보조감리원	양희석	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O
	공사과장	박종현	O	O	O
	공사대리	이현탁		O
	공사주임	정순길
	공사과장	박민주	O
	공사과장	서성일		O	O
	공사대리	김세현	O		O
	공사대리	박진정		O
	공사주임	최동선
	쉴드과장	류주열	O	O	O
	쉴드과장	김준철	O	O	O
	쉴드과장	이기상	O	O	O
	쉴드대리	박지현	O	O	O
	쉴드대리	홍동우
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승	O	O	O
	안전과장	김태화	O
	안전과장	안병욱		O	O
	안전대리	김성관	O
	안전주임	이원규		O	O
	품질과장	김병호	O		O
	품질과장	김기태	O	O	O
	품질대리	전형준		O
합계			14명	14명	14명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)