휴일 및 야간 작업계획

(`16.4.9 ~ `16.4.15)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월9일(토) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 케이블, 호스 연결 및 PLC 수정 - 토류벽 철거	양희석	류주열 박재형
	932 정거장	- 1Span B2 2단벽체 Con’c 타설 - 2Span 중간슬래브 철근조립 - 3Span B2 2단벽체 외벽방수 및 되메우기 - 5,6Span 중앙파일 해체, 인양 - 7~11Span 중간슬래브 빔개구부치핑, 철근보강 - 9Span 보조파일 설치 - E/V #1,2 슬래브 동바리 거푸집 설치, E/V #3 슬래브 철근조립 - E/V #4 2단벽체 거푸집 해체, 외벽 방수 및 되메우기		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 홍동우 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span 환기구 기초 철근 조립 - 3Span B2 슬라브 동바리 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 환기덕트 슬라브 외벽 거푸집 해체 - #5,6번 출입구 바닥면정리	임승만	서성일 김세현
4월10일(일) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 케이블, 호스 연결 및 PLC 수정 - 쉴드2호기 굴진 및 가설세그 설치 - 토사피트 벽체 철근조립 및 거푸집 설치	백인기	이기상 김정연
	932 정거장	- 1Span B2 2단벽체 Con’c 양생 - 2Span 중간슬래브 철근조립 - 3Span B2 2단벽체 외벽방수 및 되메우기 - 5,6Span 중앙파일 해체, 인양 - 7~11Span 중간슬래브 빔개구부치핑, 철근보강 - 9Span 보조파일 설치 - E/V #1,2 슬래브 동바리 거푸집 설치, E/V #3 슬래브 철근조립 - E/V #4 2단벽체 거푸집 해체, 외벽 방수 및 되메우기		이태신 이현탁
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 이원욱 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span 환기구 기초 철근 조립 - 3Span B2 슬라브 동바리 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - 정화조 B1 슬라브 동바리 거푸집 해체 - #1,2번 출입구 환기덕트 슬라브` 외벽 거푸집 해체 - #5,6번 출입구 바닥면정리	김완수	박민주 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월13일(수) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널 (07시~익일07시)	931S1 환기구	- 쉴드2호기 케이블, 호스 연결 및 PLC 수정 - 쉴드2호기 굴진 및 가설세그 설치 - 토사피트 벽체 철근 조립 및 거푸집 설치	임승만	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체 - 2Span 중간슬래브 철근조립 - 5,6Span 중앙파일 해체, 인양 - 9Span 보조파일 설치 - E/V #1,2 슬래브 동바리 거푸집 설치 및 벽체철근 조립 - E/V #3 슬래브 철근조립, E/V #4 버팀해체 및 상부슬래브 방수, 되메우기		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 홍동우 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span 환기구 기초 철근 조립 - 3Span B2 슬라브 동바리 거푸집 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 환기덕트 방수, 되메우기 - #5,6번 출입구 바닥면정리, 파일면갈이, 방수철판 설치	양희석	박민주 최동선

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.4.9(토)		2016.4.10(일)		2016.4.13(수)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	임승만	책임감리원	김완수	보조감리원	임승만
	보조감리원	양희석	보조감리원	백인기	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	현장대리인	서용범	공사과장	이태신	현장대리인	서용범
	공사과장	박종현	공사대리	이현탁	공사과장	이태신
	공사주임	정순길	공사과장	박민주	공사과장	박종현
	공사과장	서성일	공사대리	박진정	공사주임	정순길
	공사대리	김세현	공사주임	최동선	공사과장	박민주
	공사주임	이윤구	터널차장	조광영	공사과장	서성일
	터널과장	김준철	터널과장	김준철	공사대리	김세현
	터널대리(야)	박지현	터널대리	이원욱	공사주임	최동선
	터널주임(야)	임희승	터널대리	김정연	터널차장	조광영
	터널대리	홍동우	터널대리	최민수	터널과장	김준철
	터널대리	최민수	터널대리(야)	박지현	터널과장	류주열
	터널과장	류주열	터널주임(야)	임희승	터널과장	이기상
	터널대리	박재형	터널과장	이기상	터널대리	홍동우
	안전과장	김태화	안전대리	김성관	터널대리	이원욱
	안전과장	안병욱	안전주임	염찬수	터널주임(야)	임희승
	안전주임	이원규	품질과장	김병호	터널대리(야)	박지현
	품질과장	김기태	품질사원	신길호	품질과장	김병호
	품질대리	전형준			품질과장	김기태
					품질사원	신길호
					안전과장	김태화
					안전과장	안병욱
					안전대리	김성관
	계	21명	계	20명	계	25명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월11일(월) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 케이블, 호스 연결 및 PLC 수정 - 쉴드2호기 굴진 및 가설세그 설치 - 토사피트 벽체 철근 조립 및 거푸집 설치	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체 - 2Span 중간슬래브 철근조립 - 3Span 측벽 채움타설 및 피난계단 버림타설 - 5,6Span 중앙파일 해체, 인양 - 7~11Span 중간슬래브 빔개구부 타설 - 9Span 보조파일 설치 - E/V #1,2 슬래브 동바리 거푸집 설치 및 벽체철근 조립 - E/V #3 슬래브 철근조립, E/V #4 버팀해체 및 상부슬래브 방수, 되메우기		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span 환기구 기초 철근 조립 - 3Span B2 슬라브 동바리 거푸집 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 환기덕트 방수, 되메우기 - #5,6번 출입구 바닥면정리, 파일면갈이, 방수철판 설치	임승만	박민주 김세현
4월12일(화) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 케이블, 호스 연결 및 PLC 수정 - 쉴드2호기 굴진 및 가설세그 설치 - 토사피트 벽체 철근 조립 및 거푸집 설치	임승만	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체 - 2Span 중간슬래브 철근조립 - 5,6Span 중앙파일 해체, 인양 - 9Span 보조파일 설치 - E/V #1,2 슬래브 동바리 거푸집 설치 및 벽체철근 조립 - E/V #3 슬래브 철근조립, E/V #4 버팀해체 및 상부슬래브 방수, 되메우기		박종현 이현탁
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span 환기구 기초 철근 조립 - 3Span B2 슬라브 동바리 거푸집 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 환기덕트 방수, 되메우기 - #5,6번 출입구 바닥면정리, 파일면갈이, 방수철판 설치	양희석	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월14일(목) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 케이블, 호스 연결 및 PLC 수정 - 쉴드2호기 굴진 및 가설세그 설치 - 토사피트 벽체 철근 조립 및 거푸집 설치	양희석	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체 - 2Span 중간슬래브 철근조립 - 5,6Span 중앙파일 해체, 인양 - 9Span 보조파일 설치 - E/V #1,2 슬래브 동바리 거푸집 설치 및 벽체철근 조립 - E/V #3 슬래브 철근조립, E/V #4 버팀해체 및 상부슬래브 방수, 되메우기		이태신 박종현
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span 환기구 기초 철근 조립 - 3Span B2 슬라브 동바리 거푸집 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 환기덕트 방수, 되메우기 - #5,6번 출입구 바닥면정리, 파일면갈이, 방수철판 설치	백인기	서성일 김세현
4월15일(금) 931S1환기구 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 (18시~익일07시)	931S1환기구	- 쉴드2호기 케이블, 호스 연결 및 PLC 수정 - 쉴드2호기 굴진 및 가설세그 설치 - 토사피트 벽체 철근 조립 및 거푸집 설치	백인기	류주열 이기상
	932정거장	- 1Span 사보 및 버팀보 해체 - 2Span 중간슬래브 철근조립 - 5,6Span 중앙파일 해체, 인양 - 9Span 보조파일 설치 - E/V #1,2 슬래브 동바리 거푸집 설치 및 벽체철근 조립 - E/V #3 슬래브 철근조립, E/V #4 버팀해체 및 상부슬래브 방수, 되메우기		박종현 정순길
	쉴드터널	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		박지현 임희승
	933정거장	- 1Span 환기구 기초 철근 조립 - 3Span B2 슬라브 동바리 거푸집 설치 - 4,5Span 중앙파일 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 철근조립, 환기덕트 방수, 되메우기 - #5,6번 출입구 바닥면정리, 파일면갈이, 방수철판 설치	김완수	박민주 박진정

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	4.11(월)	4.12(화)	4.14 (목)	4.15 (금)
감리단	책임감리원	김완수				O
	보조감리원	임승만	O	O
	보조감리원	백인기	O		O	O
	보조감리원	양희석		O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O
	공사과장	박종현	O	O	O	O
	공사대리	이현탁		O
	공사주임	정순길				O
	공사과장	박민주	O			O
	공사과장	서성일		O	O
	공사대리	김세현	O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	최동선
	쉴드과장	류주열	O	O	O	O
	쉴드과장	김준철	O	O	O	O
	쉴드과장	이기상	O	O	O	O
	쉴드대리	박지현	O	O	O	O
	쉴드대리	홍동우
	쉴드대리	박재형
	쉴드주임	임희승	O	O	O	O
	안전과장	김태화	O			O
	안전과장	안병욱		O	O
	안전대리	김성관	O			O
	안전주임	이원규		O	O
	품질과장	김병호	O		O
	품질과장	김기태	O	O	O	O
	품질대리	전형준		O		O
합계			16명	16명	16명	16명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)