휴일 및 야간 작업계획

(`16.6.4~ `16.6.10)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
6월4일(토) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널1,2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립	양희석	박재형 이원욱 이기상(야) 김홍중(야)
	932 정거장	- 1Span 버팀보, 사보 및 띠장 해체 - 2Span B1 1단벽체 외벽방수 - 3Span B1 동바리 설치 - 6Span 빔개구부 방수 - 8Span 상수도복구공 기초철근조립, 기초거푸집 설치 - E/V #1 슬래브방수, E/V #2 슬래브 철근조립 - E/V #3,4 피트실 방수, E/V #4 보조파일 설치 - 연결통로 #1 슬래브철근조립, 거푸집 설치 - 연결통로 #2 2구간 벽체철근조립		박종현 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		김준철 홍동우 박지현(야) 최민수(야)
	933 정거장	- 1Span B2 환기구 1단벽체 버팀보, 띠장 해체/인양, 기둥철근 조립 - 2Span B2 슬라브 철근조립 - 4~6Span 파일박스 양생 - 9,10Span B3 승강장 거푸집 동바리 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 거푸집 동바리 해체 - #5,6번 출입구 외부 E/V 연결통로 버팀보 해체, 종합사무실 2단 레이커 및 띠장해체	김완수	서성일 김세현
6월5일(일) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널1,2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립	백인기	박재형 이원욱 류주열(야) 이기상(야)
	932 정거장	- 1Span 버팀보, 사보 및 띠장 해체 - 2Span B1 1단벽체 외벽방수 - 3Span B1 동바리 설치 - 6Span 빔개구부 방수 - 8Span 상수도복구공 기초철근조립, 기초거푸집 설치 - E/V #1 슬래브방수, E/V #2 슬래브 철근조립 - E/V #3,4 피트실 방수, E/V #4 보조파일 설치 - 연결통로 #1 슬래브철근조립, 거푸집 설치 - 연결통로 #2 2구간 벽체철근조립		이태신 정순길
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		김준철 최민수 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span B2 환기구 1단벽체 버팀보, 띠장 해체/인양, 기둥철근 조립 - 2Span B2 슬라브 철근조립 - 4~6Span 파일박스 양생 - 9,10Span B3 승강장 거푸집 동바리 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 거푸집 동바리 해체 - #5,6번 출입구 외부 E/V 연결통로 버팀보 해체, 종합사무실 2단 레이커 및 띠장해체	임승만	박민주 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
6월6일(월) 932정거장 933정거장 (07시~18시) 쉴드터널1,2구간 (07시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립	양희석	박재형 홍동우 류주열(야) 이기상(야)
	932 정거장	- 1Span 버팀보, 사보 및 띠장 해체, B1 1단벽체 철근조립 - 2Span B1 측벽채움 Con’c타설 - 3Span B1 동바리 설치 - 6Span 빔개구부 방수, 보조파일 해체 - 8Span 상수도복구공 기초 Con’c타설 - E/V #1 슬래브방수, E/V #2 슬래브철근조립 - E/V #3,4 피트실 방수 및 되메우기, E/V #4 보조파일 설치 - 연결통로 #1 슬래브거푸집 설치 - 연결통로 #2 2구간 벽체 철근조립		이태신 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		김준철 최민수 박지현(야) 임희승(야)
	933 정거장	- 1Span B2 기둥 거푸집 설치 및 2단벽체, 마감벽 철근조립 - 2Span B2 슬라브 철근 조립, 거푸집 설치 - 4~6Span 파일박스 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 거푸집 동바리 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 2Span 슬라브 외벽거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 4~6Span 1단벽체 철근 조립 - #5,6번 출입구 외부E/V, 연결통로, 1,2Span 1단벽체 철근조립	백인기	박민주 서성일

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.6.4(토)		2016.6.5(일)		2016.6.6(월)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	보조감리원	백인기	보조감리원	백인기
	보조감리원	양희석	보조감리원	임승만	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	이상도	현장소장	이상도	현장소장	이상도
	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범	공사과장	이태신
	공사과장	박종현	공사과장	이태신	공사대리	이현탁
	공사대리	이현탁	공사주임	정순길	공사주임	정순길
	공사과장	서성일	공사과장	박민주	공사과장	박민주
	공사대리	김세현	공사대리	박진정	공사과장	서성일
	공사주임	이윤구	공사주임	최동선	공사대리	박진정
	터널차장	조광영	터널과장	김준철	공사대리	김세현
	터널과장	김준철	터널대리	최민수	공사주임	이윤구
	터널대리(야)	최민수	터널대리	이원욱	공사주임	최동선
	터널대리(야)	박지현	터널대리(야)	박지현	터널차장	조광영
	터널대리	이원욱	터널주임(야)	임희승	터널과장	김준철
	터널대리	홍동우	터널과장(야)	류주열	터널대리	최민수
	터널과장(야)	이기상	터널과장(야)	이기상	터널대리	홍동우
	터널기장(야)	김홍중	터널대리	박재형	터널대리(야)	박지현
	터널대리	박재형	안전과장	안병욱	터널주임(야)	임희승
	안전대리	김성관	안전주임	염찬수	터널과장(야)	류주열
	안전주임	이원규	품질과장	김기태	터널과장(야)	이기상
	품질과장	김병호	품질대리	전형준	터널대리	박재형
	품질주임	신길호			안전과장	안병욱
					안전주임	이원규
					안전주임	염찬수
					품질과장	김기태
					품질대리	전형준
	계	18명	계	19명	계	24명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
6월7일(화) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립	임승만	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 버팀보, 사보 및 띠장 해체, B1 1단벽체 철근조립 - 3Span B1 동바리 설치 - 6Span 빔개구부 방수, 보조파일 해체 - E/V #1 슬래브방수, E/V #2 슬래브철근조립 - E/V #3,4 피트실 방수 및 되메우기, E/V #4 보조파일 설치 - 연결통로 #1 슬래브 Con’c타설 - 연결통로 #2 2구간 벽체 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		이원욱 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 기둥 거푸집 설치 및 2단벽체, 마감벽 철근조립 - 2Span B2 슬라브 철근 조립, 거푸집 설치 - 4~6Span 파일박스 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 거푸집 동바리 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 2Span 슬라브 외벽거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 4~6Span 1단벽체 철근 조립 - #5,6번 출입구 외부E/V, 연결통로, 1,2Span 1단벽체 철근조립	양희석	박민주 김세현
6월8일(수) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립	양희석	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 버팀보, 사보 및 띠장 해체, B1 1단벽체 철근조립 - 3Span B1 동바리 설치 - 6Span 빔개구부 방수, 보조파일 해체 - E/V #1 슬래브방수, E/V #2 슬래브철근조립 - E/V #3,4 피트실 방수 및 되메우기, E/V #4 보조파일 설치 - 연결통로 #2 2구간 벽체 철근조립		박종현 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		이원욱 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 기둥 거푸집 설치 및 2단벽체, 마감벽 철근조립 - 2Span B2 슬라브 철근 조립, 거푸집 설치 - 4~6Span 파일박스 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 거푸집 동바리 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 2Span 슬라브 외벽거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 4~6Span 1단벽체 철근 조립 - #5,6번 출입구 외부E/V, 연결통로, 1,2Span 1단벽체 철근조립	백인기	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
6월9일(목) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립	백인기	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 버팀보, 사보 및 띠장 해체, B1 1단벽체 철근조립 - 3Span B1 동바리 설치 - 6Span 빔개구부 방수, 보조파일 해체 - E/V #1 슬래브방수, E/V #2 슬래브철근조립 - E/V #3,4 피트실 방수 및 되메우기, E/V #4 보조파일 설치 - 연결통로 #2 2구간 벽체 철근조립		이현탁 정순길
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		이원욱 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 기둥 거푸집 설치 및 2단벽체, 마감벽 철근조립 - 2Span B2 슬라브 철근 조립, 거푸집 설치 - 4~6Span 파일박스 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 거푸집 동바리 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 2Span 슬라브 외벽거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 4~6Span 1단벽체 철근 조립 - #5,6번 출입구 외부E/V, 연결통로, 1,2Span 1단벽체 철근조립	임승만	박민주 최동선
6월10일(금) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 굴진 및 세그먼트 조립	임승만	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span 버팀보, 사보 및 띠장 해체, B1 1단벽체 철근조립 - 3Span B1 동바리 설치 - 6Span 빔개구부 방수, 보조파일 해체 - E/V #1 슬래브방수, E/V #2 슬래브철근조립 - E/V #3,4 피트실 방수 및 되메우기, E/V #4 보조파일 설치 - 연결통로 #2 2구간 벽체 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		이원욱 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 기둥 Con’c타설 및 2단벽체, 마감벽 철근조립 - 2Span B2 슬라브 철근 조립, 거푸집 설치 - 4~6Span 파일박스 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 슬라브 동바리 거푸집 설치, 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 1Span 슬라브 거푸집 동바리 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 2Span 슬라브 외벽거푸집 해체 - #1,2번 출입구 연결통로 4~6Span 1단벽체 철근 조립 - #5,6번 출입구 외부E/V, 연결통로, 1,2Span 1단벽체 철근조립	김완수	서성일 김세현

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)