휴일 및 야간 작업계획

(`16.7.23 ~ `16.7.29)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월23일(토) 쉴드터널 1구간 932정거장 쉴드터널 2구간 933정거장 (07시~18시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 하역 및 조립, 케이블 및 호스 연결	임승만	류주열 김홍중
	932 정거장	- 1Span B1 상부슬래브 동바리 거푸집 설치 - 2Span B1 벽체 및 상부슬래브 철근조립 - 3Span B1 상부슬래브 시공이음부 거푸집해체 - 5Span 하수박스 지장물복구공 기둥거푸집 설치 - 10Span 연결통로 #1번구간 상부 되메우기 - 자전거주차장 토공굴착 - 연결통로 #2번 2구간 2단벽체 철근조립, 거푸집 설치 - E/V #1,2번 슬래브 되메우기 다짐정리 - E/V #3,4번 피트실 내벽거푸집 설치, 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		김준철 김정연
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 동바리 보강, 철근조립 - 3Span B1 1단벽체 거푸집 설치 - 4~7Span 정화조 2단 버팀보, 보조파일 해체 - 6~8Span 승강장 슬라브 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 철근조립 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리 보강, 슬라브 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리거푸집 설치, 차수벽 거푸집 해체	양희석	박민주 박진정
7월24일(일) 쉴드터널 1구간 932정거장 쉴드터널 2구간 933정거장	쉴드터널 1구간	- 휴무(당직근무)	-	정동훈 신상훈
	932 정거장
	쉴드터널 2구간
	933 정거장

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.7.23(토)		2016.7.24(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	임승만
	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	이상도	관리주임	정동훈
	현장대리인	서용범	측량주임	신상훈
	공사과장	이태신
	공사과장	박종현
	공사주임	정순길
	공사과장	박민주
	공사대리	박진정
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선
	터널차장	조광영
	터널과장	김준철
	터널대리	김정연
	터널과장	류주열
	터널기장	김홍중
	안전과장	노광선
	안전과장	안병욱
	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호
	품질주임	신길호
	계	22명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월25일(월) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 하역 및 조립, 케이블 및 호스 연결, - 고압 판넬 및 케이블 연결	양희석	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B1 상부슬래브 동바리거푸집 설치 - 2Span B1 벽체 및 상부슬래브 철근조립 - 3Span B1 외벽거푸집 해체 및 방수 되메우기 - 4,5Span 하수박스 지장물 복구공기둥 거푸집 설치 - 10Span 연결통로 #1번 구간 상부 되메우기 - 자전거주차장 보호벽철근조립, 버림타설 준비 - 연결통로 #2번 2구간 2단벽체 철근조립, 거푸집설치 - E/V #1,2번 슬래브 되메우기 다짐정리, 보조파일 설치 - E/V #3,4번 피트실 내벽거푸집 설치, 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 철근조립 - 3Span B1 1단 벽체 거푸집 설치 - 6~8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 철근조립, 벽체 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리 보강, 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 철근조립, 2~3Span 바닥면 정리		박민주 김세현
7월26일(화) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 하역 및 조립, 케이블 및 호스 연결, - 고압 판넬 및 케이블 연결	백인기	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B1 상부슬래브 동바리거푸집 설치 - 2Span B1 벽체 및 상부슬래브 철근조립 - 3Span B1 외벽거푸집 해체 및 방수 되메우기 - 4,5Span 하수박스 지장물 복구공기둥 Con’c 타설 - 10Span 연결통로 #1번 구간 상부 되메우기 - 자전거주차장 보호벽철근조립, 버림타설 준비 - 연결통로 #2번 2구간 2단벽체 철근조립, 거푸집설치 - E/V #1,2번 슬래브 되메우기 다짐정리, 보조파일 설치 - E/V #3,4번 피트실 내벽거푸집 설치, 철근조립		박종현 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 철근조립 - 3Span B1 1단 벽체 거푸집 설치 - 6~8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 철근조립, 벽체 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리 보강, 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 철근조립, 2~3Span 바닥면 정리		서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월27일(수) 932정거장 (18시~21시) 933정거장 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 하역 및 조립, 케이블 및 호스 연결, - 고압 판넬 및 케이블 연결	김완수	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B1 상부슬래브 동바리거푸집 설치 - 2Span B1 벽체 및 상부슬래브 철근조립 - 3Span B1 외벽거푸집 해체 및 방수 되메우기 - 4,5Span 하수박스 지장물 복구공기둥 양생 - 10Span 연결통로 #1번 구간 상부 되메우기 - 자전거주차장 보호벽철근조립, 버림타설 준비 - 연결통로 #2번 2구간 2단벽체 철근조립, 거푸집설치 - E/V #1,2번 슬래브 되메우기 다짐정리, 보조파일 설치 - E/V #3,4번 피트실 내벽거푸집 설치, 철근조립		이현탁 정순길
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 철근조립 - 3Span B1 1단 벽체 Con’c 타설 - 6~8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 철근조립, 벽체 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리 보강, 철근조립 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 철근조립, 2~3Span 바닥면 정리		박민주 최동선
7월28일(목) 932정거장 (18시~21시) 933정거장 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 하역 및 조립, 케이블 및 호스 연결, - 고압 판넬 및 케이블 연결	양희석	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B1 상부슬래브 동바리거푸집 설치 - 2Span B1 벽체 및 상부슬래브 철근조립 - 3Span B1 외벽거푸집 해체 및 방수 되메우기 - 4,5Span 하수박스 지장물 복구공기둥 양생 - 10Span 연결통로 #1번 구간 상부 되메우기 - 자전거주차장 보호벽철근조립, 버림타설 준비 - 연결통로 #2번 2구간 2단벽체 철근조립, 거푸집설치 - E/V #1,2번 슬래브 되메우기 다짐정리, 보조파일 설치 - E/V #3,4번 피트실 내벽거푸집 설치, 철근조립		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 철근조립 - 3Span B1 1단 벽체 양생 - 6~8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 철근조립, 벽체 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 Con’c 타설 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 철근조립, 2~3Span 바닥면 정리		서성일 김세현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월29일(금) 932정거장 (18시~21시) 933정거장 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 하역 및 조립, 케이블 및 호스 연결, - 고압 판넬 및 케이블 연결	백인기	류주열 이기상
	932 정거장	- 1Span B1 상부슬래브 동바리거푸집 설치 - 2Span B1 벽체 및 상부슬래브 철근조립 - 3Span B1 외벽거푸집 해체 및 방수 되메우기 - 4,5Span 하수박스 지장물 복구공기둥 양생 - 10Span 연결통로 #1번 구간 상부 되메우기 - 자전거주차장 보호벽철근조립, 버림타설 준비 - 연결통로 #2번 2구간 2단벽체 철근조립, 거푸집설치 - E/V #1,2번 슬래브 되메우기 다짐정리, 보조파일 설치 - E/V #3,4번 피트실 내벽거푸집 설치, 철근조립		박종현 정순길
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립		박지현 임희승
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 철근조립 - 3Span B1 1단 벽체 양생 - 6~8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 철근조립, 벽체 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 양생 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 철근조립, 2~3Span 바닥면 정리		박민주 박진정

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)