휴일 및 야간 작업계획

(`16.7.9 ~ `16.7.15)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월9일(토) 쉴드터널 1구간 932정거장 쉴드터널 2구간 933정거장 (07시~18시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 개조 및 하역(1구간 하선)	양희석	류주열 이원욱
	932 정거장	- 1Span 매몰버팀보 녹제거 홀천공 - 1Span B1 1단벽체 거푸집 설치 - 2Span B1 동바리 설치보강 - 3Span B1 슬래브 철근조립 - 연결통로 #2번 상부슬래브 되메우기 - 연결통로 #2번 버팀보 및 띠장해체		박종현 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 굴진 및 세그먼트 조립(2구간 하선)		김준철 김정연
	933 정거장	- 1Span B2 1단 비내력벽 거푸집 설치, 슬라브 동바리 설치 - 2,3Span B2 4단 버팀보 해체 - 4~7Span 정화조 2단 버팀보, 보조파일 해체 - 6~8Span 승강장 슬라브 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 동바리 설치, 파일 면정리 - #1,2번 출입구 연결통로 3,4Span 슬라브 철근조립, 5Span 슬라브 동바리 설치 - #5,6번 출입구 외부 E/V 슬라브 벽체 거푸집 설치	백인기	박민주 김세현
7월10일(일) 쉴드터널 1구간 932정거장 쉴드터널 2구간 933정거장	쉴드터널 1구간	- 휴무(당직근무)	-	엄태영 임희승
	932 정거장
	쉴드터널 2구간
	933 정거장

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.7.9(토)		2016.7.10(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	백인기
	보조감리원	양희석
시공사	현장소장	이상도	건축과장	엄태영
	현장대리인	서용범	터널주임	임희승
	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁
	공사주임	정순길
	공사과장	박민주
	공사대리	김세현
	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구
	터널차장	조광영
	터널과장	김준철
	터널대리	김정연
	터널대리	최민수
	터널주임	임희승
	터널과장	류주열
	터널과장	이원욱
	안전과장	노광선
	안전과장	안병욱
	안전대리	이원규
	품질과장	김기태
	품질대리	전형준
	계	23명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월11일(월) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 개조 및 하역(1구간 하선)	양희석	류주열 이원욱
	932 정거장	- 1Span B1 1단벽체 거푸집 설치 - 2Span B1 동바리 설치보강 - 2Span 기둥 거푸집 해체, 상부슬래브 거푸집설치 - 3Span B1 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 7Span D2000상수도 복구공기둥 거푸집 설치 - 편의시설 상부슬래브 되메우기 - 연결통로 #1번 슬래브 방수 - 연결통로 #1,2번 보조파일 설치 - 연결통로 #2번 버팀보 및 띠장 해체/인양 - E/V #1,2번 슬래브 방수		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 챔버 점검 및 커터교체(2구간 하선)		박지현 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 2단 간벽 철근 조립, 거푸집 설치, 슬라브 동바리 설치 - 2,3Span B2 1단 벽체 철근 조립 - 7,8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 동바리 설치, 파일 면정리 - #1,2번 출입구 연결통로 3,4Span 슬라브 철근조립, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 외부 E/V 슬라브 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 차수벽 거푸집 설치	임승만	박민주 김세현
7월12일(화) 932정거장 933정거장 (18시~21시) 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 개조 및 하역(1구간 하선)	백인기	류주열 이원욱
	932 정거장	- 1Span B1 1단벽체 Con’c 타설 - 2Span B1 동바리 설치보강 - 2Span 기둥 거푸집 해체, 상부슬래브 거푸집설치 - 3Span B1 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 7Span D2000상수도 복구공기둥 거푸집 설치 - 편의시설 상부슬래브 되메우기 - 연결통로 #1번 슬래브 방수 - 연결통로 #1,2번 보조파일 설치 - 연결통로 #2번 버팀보 및 띠장 해체/인양 - E/V #1,2번 슬래브 방수		박종현 이현탁
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 챔버 점검 및 커터교체(2구간 하선)		박지현 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 2단 간벽 Con’c 타설 - 2,3Span B2 1단 벽체 철근 조립 - 7,8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 동바리 설치, 파일 면정리 - #1,2번 출입구 연결통로 3,4Span 슬라브 철근조립, 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 외부 E/V 슬라브 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 차수벽 Con’c 타설	김완수	서성일 박진정

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월13일(수) 932정거장 (18시~21시) 933정거장 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 개조 및 하역(1구간 하선)	김완수	류주열 이원욱
	932 정거장	- 1Span B1 1단벽체 양생 - 2Span B1 동바리 설치보강 - 2Span 기둥 거푸집 해체, 상부슬래브 거푸집설치 - 3Span B1 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 7Span D2000상수도 복구공기둥 거푸집 설치 - 편의시설 상부슬래브 되메우기 - 연결통로 #1번 슬래브 방수 - 연결통로 #1,2번 보조파일 설치 - 연결통로 #2번 버팀보 및 띠장 해체/인양 - E/V #1,2번 슬래브 방수		이현탁 정순길
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 챔버 점검 및 커터교체(2구간 하선)		박지현 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 동바리 설치 - 2,3Span B2 1단 벽체 철근 조립 - 7,8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 동바리 설치, 파일 면정리 - #1,2번 출입구 연결통로 3,4Span 슬라브 Con’c 타설 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 외부 E/V 슬라브 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 차수벽 양생 - #1,2,5,6번 출입구 동바리 설치작업(철야)	임승만	박민주 최동선 서성일(야) 이윤구(야)
7월14일(목) 932정거장 (18시~21시) 933정거장 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 개조 및 하역(1구간 하선)	임승만	류주열 이원욱
	932 정거장	- 1Span B1 1단벽체 양생 - 2Span B1 동바리 설치보강 - 2Span 기둥 거푸집 해체, 상부슬래브 거푸집설치 - 3Span B1 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 7Span D2000상수도 복구공기둥 거푸집 설치 - 편의시설 상부슬래브 되메우기 - 연결통로 #1번 슬래브 방수 - 연결통로 #1,2번 보조파일 설치 - 연결통로 #2번 버팀보 및 띠장 해체/인양 - E/V #1,2번 슬래브 방수		이태신 박종현
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 챔버 점검 및 커터교체(2구간 하선)		박지현 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 슬라브 동바리 설치 - 2,3Span B2 1단 벽체 철근 조립 - 7,8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 동바리 설치, 파일 면정리 - #1,2번 출입구 연결통로 3,4Span 슬라브 양생 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 외부 E/V 슬라브 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 차수벽 양생 - #1,2,5,6번 출입구 동바리 설치작업(철야)	양희석	서성일 김세현 서성일(야) 이윤구(야)

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월15일(금) 932정거장 (18시~21시) 933정거장 쉴드터널 1,2구간 (18시~익일07시)	쉴드터널 1구간	- 쉴드2호기 후방대차 개조 및 하역(1구간 하선)	양희석	류주열 이원욱
	932 정거장	- 1Span B1 1단벽체 양생 - 2Span B1 동바리 설치보강 - 2Span 기둥 거푸집 해체, 상부슬래브 거푸집설치 - 3Span B1 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 7Span D2000상수도 복구공기둥 거푸집 설치 - 편의시설 상부슬래브 되메우기 - 연결통로 #1번 슬래브 방수 - 연결통로 #1,2번 보조파일 설치 - 연결통로 #2번 버팀보 및 띠장 해체/인양 - E/V #1,2번 슬래브 방수		박종현 정순길
	쉴드터널 2구간	- 쉴드1호기 챔버 점검 및 커터교체(2구간 하선)		박지현 최민수
	933 정거장	- 1Span B2 2단 슬라브 동바리 설치 - 2,3Span B2 1단 벽체 철근 조립 - 7,8Span 승강장 슬라브 동바리 거푸집 해체 - 종합사무실 B1 1Span 슬라브 동바리 설치, 파일 면정리 - #1,2번 출입구 연결통로 3,4Span 슬라브 양생 - #1,2번 출입구 연결통로 5Span 슬라브 동바리, 거푸집 설치 - #5,6번 출입구 연결통로 슬라브 동바리 설치, 외부 E/V 슬라브 Con’c 타설 - #5,6번 출입구 연결통로 차수벽 양생 - #1,2,5,6번 출입구 동바리 설치작업(철야)	백인기	박민주 박진정 서성일(야) 이윤구(야)

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)