휴일 및 야간작업 계획서

▣ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

▣ 시 공 사 : (주)삼성물산, (주)쌍용건설, 매일종합건설(주)

▣ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

▣ 휴일 및 야간작업 시행기간 : 2016.09.01 ~ 2016.09.30 (30일)

▣ 휴일 및 야간작업 시행사유

- 휴일/야간작업을 통하여 932/933정거장 구조물공사와 쉴드 TBM 굴진 및 세그먼트 조립으로 공기를 단축하고자 함.

▣ 932정거장 휴일작업(주간) 예정일

구 분	2016년 09월									비 고
	3일(토)	4일(일)	10일(토)	11일(일)	14일(수)~16일(금)	17일(토)	18일(일)	24일(토)	25일(일)
본체구조물	◯	☓	◯	◯	☓(추석)	☓	☓	◯	◯	07:00 ~ 18:00
지장물복구	◯	☓	◯	◯	☓(추석)	☓	☓	◯	◯
출입구구조물	◯	☓	◯	◯	☓(추석)	☓	☓	◯	◯

▣ 933정거장 휴일작업(주간) 예정일

구 분	2016년 09월									비 고
	3일(토)	4일(일)	10일(토)	11일(일)	14일(수)~16일(금)	17일(토)	18일(일)	24일(토)	25일(일)
본체구조물	◯	☓	◯	◯	☓(추석)	☓	☓	◯	◯	07:00 ~ 18:00
지장물복구	◯	☓	◯	◯	☓(추석)	☓	☓	◯	◯
출입구구조물	◯	☓	◯	◯	☓(추석)	☓	☓	◯	◯

▣ 932/933정거장 야간작업 예정일

구 분	2016년 09월										비 고
	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일
구조물공사	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	◯	◯	◯	18:00 ~ 23:00
구 분	2016년 09월										비 고
	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
구조물공사	◯	◯	◯	☓	☓	☓	☓	☓	◯	◯	18:00 ~ 23:00
구 분	2016년 09월										비 고
	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일
구조물공사	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	18:00 ~ 23:00

▣ 터널1,2구간 야간작업 예정일

구 분	2016년 09월										비 고
	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일
구조물공사	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	◯	◯	◯	18:00 ~ 07:00
구 분	2016년 09월										비 고
	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
구조물공사	◯	◯	◯	☓	☓	☓	☓	☓	◯	◯	18:00 ~ 07:00
구 분	2016년 09월										비 고
	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일
구조물공사	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	18:00 ~ 07:00

▣ 휴일작업 및 야간작업사항

- 별 첨 #1(휴일 작업사항)	- 별 첨 #2(야간 작업사항)

▣ 근무인원

- 별 첨 #3(휴일작업 근무자 명단)     - 별 첨 #4(야간작업 근무자 명단)

현장대리인 : 서  용  범  (인)

책임감리원 : 김  완  수  (인)

* 별 첨 #1

* 별 첨 #1

휴일작업사항(주간)

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시	작 업 사 항	비 고
	932 정거장
09.03(토)	1Span B1 상부슬래브 양생 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	07:00 ~ 18:00
09.04(일)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.10(토)	1Span B1 상부슬래브 외부거푸집 해체 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	07:00 ~ 18:00
09.11(일)	1Span B1 동바리 해체 3Span 154kV, 상수도 D2000 지장물 복구공	07:00 ~ 18:00
09.14(수)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.15(목)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.16(금)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.17(토)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.18(일)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.24(토)	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	07:00 ~ 18:00
09.25(일)	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	07:00 ~ 18:00

일 시	작 업 사 항	비 고
	933 정거장
09.03(토)	- 1Span B1 4단 가시설 해체 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 동바리 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
09.04(일)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.10(토)	- 1Span B1 1단 벽체 철근조립 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	07:00 ~ 18:00
09.11(일)	- 1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	07:00 ~ 18:00
09.14(수)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.15(목)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.16(금)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.17(토)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.18(일)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.24(토)	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	07:00 ~ 18:00
09.25(일)	1Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	07:00 ~ 18:00

일 시	작 업 사 항	비 고
	쉴 드 터 널(1,2구간)
09.03(토)	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
09.04(일)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.10(토)	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
09.11(일)	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
09.14(수)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.15(목)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.16(금)	- 추석 휴무	07:00 ~ 18:00
09.17(토)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.18(일)	- 현장 휴무	07:00 ~ 18:00
09.24(토)	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00
09.25(일)	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	07:00 ~ 18:00

* 별 첨 #2

야간작업사항(휴일 및 평일)

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
09.01(목)	야간	1Span B1 상부슬래브 양생 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.02(금)	야간	1Span B1 상부슬래브 양생 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.03(토)	야간	1Span B1 상부슬래브 양생 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.04(일)		현장 휴무	-
09.05(월)	야간	1Span B1 상부슬래브 양생 및 외부거푸집 해체 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.06(화)	야간	1Span B1 상부슬래브 양생 및 외부거푸집 해체 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.07(수)	야간	1Span B1 상부슬래브 외부거푸집 해체 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.08(목)	야간	1Span B1 상부슬래브 외부거푸집 해체 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.09(금)	야간	1Span B1 상부슬래브 외부거푸집 해체 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.10(토)	야간	1Span B1 상부슬래브 외부거푸집 해체 2Span 보조파일 설치 및 B1 동바리 해체 자전거주차장 기초 철근조립	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
09.11(일)	야간	1Span B1 동바리 해체 3Span 154kV, 상수도 D2000 지장물 복구공	18:00 ~ 23:00
09.12(월)	야간	1Span B1 동바리 해체 3Span 154kV, 상수도 D2000 지장물 복구공	18:00 ~ 23:00
09.13(화)	야간	1Span B1 동바리 해체 3Span 154kV, 상수도 D2000 지장물 복구공	18:00 ~ 23:00
09.14(수)		추석 휴무	-
09.15(목)		추석 휴무	-
09.16(금)		추석 휴무	-
09.17(토)		현장 휴무	-
09.18(일)		현장 휴무	-
09.19(월)	야간	1Span B1 동바리 해체 3Span 154kV, 상수도 D2000 지장물 복구공	18:00 ~ 23:00
09.20(화)	야간	1Span B1 동바리 해체 3Span 154kV, 상수도 D2000 지장물 복구공	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
09.21(수)	야간	1Span B1 동바리 해체 3Span 154kV, 상수도 D2000 지장물 복구공	18:00 ~ 23:00
09.22(목)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.23(금)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.24(토)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.25(일)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.26(월)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.27(화)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.28(수)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.29(목)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00
09.30(금)	야간	자전거주차장 벽체 철근조립 10Span 덕트 우측 줄파기 및 파일 천공	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
09.01(목)	야간	1Span B1 4단 가시설 해체 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 동바리 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
09.02(금)	야간	1Span B1 4단 가시설 해체 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 동바리 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
09.03(토)	야간	1Span B1 4단 가시설 해체 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 동바리 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
09.04(일)		현장 휴무	-
09.05(월)	야간	1Span B1 4단 가시설 해체 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 동바리 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
09.06(화)	야간	1Span B1 4단 가시설 해체 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 동바리 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
09.07(수)	야간	1Span B1 4단 가시설 해체 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 동바리 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
09.08(목)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.09(금)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.10(토)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 2Span B1 1단벽체 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
09.11(일)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.12(월)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.13(화)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.14(수)		추석 휴무	-
09.15(목)		추석 휴무	-
09.16(금)		추석 휴무	-
09.17(토)		현장 휴무	-
09.18(일)		현장 휴무	-
09.19(월)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.20(화)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
09.21(수)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.22(목)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.23(금)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.24(토)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.25(일)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.26(월)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.27(화)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.28(수)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.29(목)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00
09.30(금)	야간	1Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 3Span B1 슬래브 철근조립	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴 드 터 널(1,2구간)
09.01(목)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.02(금)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.03(토)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.04(일)		현장 휴무	-
09.05(월)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.06(화)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.07(수)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.08(목)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.09(금)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.10(토)	야간	수평그라우팅 및 커터교체(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴 드 터 널(1,2구간)
09.11(일)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.12(월)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.13(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.14(수)		추석 휴무	-
09.15(목)		추석 휴무	-
09.16(금)		추석 휴무	-
09.17(토)		현장 휴무	-
09.18(일)		현장 휴무	-
09.19(월)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.20(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴 드 터 널(1,2구간)
09.21(수)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.22(목)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.23(금)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.24(토)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.25(일)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.26(월)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.27(화)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.28(수)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.29(목)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00
09.30(금)	야간	굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM2호기) TBM 및 후방대차 해체, 지상설비 해체 및 반출(2구간 TBM1호기)	18:00 ~ 07:00

* 별 첨 #3

휴일작업 근무자명단

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

구 분		2016년 09월
직 책	성 명	3일(토)	4일(일)	10일(토)	11일(일)	14일(수)~16일(금)	17일(토)	18일(일)	24일(토)	25일(일)
현장소장	이상도	O	현장휴무	O	O	추석휴무	현장휴무	현장휴무	O	O
현장대리인	서용범	O		O						O
터널팀장	조광영				O				O
터널과장	류주열	O			O					O
터널과장	이기상	O		O					O	O
터널대리	이원욱			O	O				O
터널과장	김준철	O		O						O
터널대리	김정연								O	O
터널대리	박지현	O		O					O	O
터널대리	홍동우	O		O	O
터널주임	임희승			O	O				O
공사과장	이태신				O				O
공사과장	박종현	O		O	O				O	O
공사대리	이현탁	O		O
공사주임	정순길	O			O				O	O
공사과장	박민주			O	O					O
공사과장	서성일	O		O	O
공사대리	김세현				O				O	O
공사대리	박진정	O		O						O
공사주임	이윤구				O
공사주임	최동선	O		O					O	O
안전팀장	노광선	O		O	O				O	O
안전과장	안병욱			O					O
안전대리	김성관	O							O
안전대리	이원규			O	O					O
안전주임	염찬수	O			O					O
품질팀장	김병호			O					O
품질과장	김기태	O			O					O
품질대리	전형준	O		O						O
품질주임	신길호				O				O
계		18명	2명	19명	18명	2명	2명	2명	17명	18명

※ 작업사항에 따라 근무자가 변동될 수 있습니다.

* 별 첨 #4

야간작업 근무자명단

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

구 분		2016년 09월										비고
직 책	성 명	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일
공사 과장	박종현	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	932
공사 대리	이현탁	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯
공사 과장	서성일	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	933
공사 대리	박진정	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 과장	김준철	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 1호기
터널 대리	박지현	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 과장	이기상	◯	◯	◯	-	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 2호기
구 분		2016년 09월										비고
직 책	성 명	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
공사 과장	이태신	◯	◯	◯	-	-	-	-	-	◯	◯	932
공사 주임	정순길	◯	◯	◯	-	-	-	-	-	◯	◯
공사 대리	김세현	◯	◯	◯	-	-	-	-	-	◯	◯	933
공사 주임	이윤구	◯	◯	◯	-	-	-	-	-	◯	◯
터널 대리	홍동우	◯	◯	◯	-	-	-	-	-	◯	◯	쉴드 1호기
터널 주임	임희승	◯	◯	◯	-	-	-	-	-	◯	◯
터널 대리	이원욱	◯	◯	◯	-	-	-	-	-	◯	◯	쉴드 2호기
구 분		2016년 09월										비고
직 책	성 명	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일
공사 과장	박종현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	932
공사 주임	정순길	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
공사 대리	김세현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	933
공사 주임	최동선	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 대리	김정연	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 1호기
터널 대리	박지현	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
터널 대리	이기상	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	쉴드 2호기

※ 작업사항에 따라 근무자가 변동될 수 있습니다.