휴일 및 야간작업 계획서

▣ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

▣ 시 공 사 : (주)삼성물산, (주)쌍용건설, 매일종합건설(주)

▣ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

▣ 휴일 및 야간작업 시행기간 : 2017.03.01 ~ 2017.03.31 (31일)

▣ 휴일 및 야간작업 시행사유

- 휴일/야간작업을 통하여 932/933정거장 구조물공사와 쉴드 TBM 굴진 및 세그먼트 조립으로 공기를 단축하고자 함.

▣ 932/933정거장 휴일작업(주간) 예정일

구 분	2017년 03월									비 고
	1일(수)	4일(토)	5일(일)	11일(토)	12일(일)	18일(토)	19일(일)	25일(토)	26일(일)
										07:00 ~ 18:00
본체구조물	◯	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓
지장물복구	◯	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓
출입구구조물	◯	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓

▣ 터널1,2구간 휴일작업(주간) 예정일

구 분	2017년 03월									비 고
	1일(수)	4일(토)	5일(일)	11일(토)	12일(일)	18일(토)	19일(일)	25일(토)	26일(일)
										07:00 ~ 18:00
1구간2호기	◯	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓
2구간1호기	◯	◯	◯	◯	☓	◯	◯	◯	☓

▣ 932/933정거장, 터널2구간 야간작업 예정일

구 분	2017년 03월																				비 고
	1일		2일		3일		4일		5일		6일		7일		8일		9일		10일
구조물공사	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 23:00
터널공사	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
구 분	2017년 03월																				비 고
	11일		12일		13일		14일		15일		16일		17일		18일		19일		20일
구조물공사	◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 23:00
터널공사	◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
구 분	2017년 03월																				비 고
	21일	22일		23일		24일		25일		26일		27일		28일		29일		30일		31일
구조물공사	◯	◯		◯		◯		◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯	18:00 ~ 23:00
터널공사	◯	◯		◯		◯		◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯

▣ 터널1구간 야간작업 예정일

구 분	2017년 03월																				비 고
	1일		2일		3일		4일		5일		6일		7일		8일		9일		10일
터널공사	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 07:00
구 분	2017년 03월																				비 고
	11일		12일		13일		14일		15일		16일		17일		18일		19일		20일
터널공사	◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		18:00 ~ 07:00
구 분	2017년 03월																				비 고
	21일	22일		23일		24일		25일		26일		27일		28일		29일		30일		31일
터널공사	◯	◯		◯		◯		◯		☓		◯		◯		◯		◯		◯	18:00 ~ 07:00

▣ 휴일작업 및 야간작업사항

- 별 첨 #1(휴일 작업사항)	- 별 첨 #2(야간 작업사항)

▣ 근무인원

- 별 첨 #3(휴일작업 근무자 명단)     - 별 첨 #4(야간작업 근무자 명단)

현장대리인 : 이 현 구  (인)

책임감리원 : 김 완 수  (인)

* 별 첨 #1

* 별 첨 #1

휴일작업사항(주간)

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시	작 업 사 항	비 고
	932 정거장
03.01(수)	931E2, 931S2 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
03.04(토)	931E2 외벽 거푸집 설치, 931S2 외벽 타설 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
03.05(일)	931E2 외벽 거푸집 설치, 931S2 거푸집 해체, 방수 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
03.11(토)	931E2 외벽 거푸집 해체 및 방수 특별피난계단 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 1단 외벽 되메우기	07:00 ~ 18:00
03.12(일)	현장 휴무	-
03.18(토)	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 외벽 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
03.19(일)	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 외벽 거푸집 설치	07:00 ~ 18:00
03.25(토)	#1 연결통로 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 외벽 되메우기	07:00 ~ 18:00
03.26(일)	현장 휴무	-

일 시	작 업 사 항	비 고
	933 정거장
03.01(수)	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 1단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	07:00 ~ 18:00
03.04(토)	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 1단 벽체 양생 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	07:00 ~ 18:00
03.05(일)	1Span 승강장 철근 조립 및 콘크리트 타설 932E2, 932S2 기초 철근 조립 8호선 구조물 보강	07:00 ~ 18:00
03.11(토)	#1,2 자전거보관소 벽체 되메우기 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	07:00 ~ 18:00
03.12(일)	현장 휴무	-
03.18(토)	#1,2 자전거보관소 가시설 해체 932E2 1,2단 가시설 해체 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	07:00 ~ 18:00
03.19(일)	#1,2 자전거보관소 가시설 해체 932E2 1,2단 가시설 해체 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	07:00 ~ 18:00
03.25(토)	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	07:00 ~ 18:00
03.26(일)	현장 휴무	-

일 시	작 업 사 항	비 고
	쉴드터널(1,2구간)
03.01(수)	라이닝 거푸집 해체(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	07:00 ~ 18:00
03.04(토)	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	07:00 ~ 18:00
03.05(일)	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	07:00 ~ 18:00
03.11(토)	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	07:00 ~ 18:00
03.12(일)	현장 휴무	-
03.18(토)	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	07:00 ~ 18:00
03.19(일)	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	07:00 ~ 18:00
03.25(토)	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	07:00 ~ 18:00
03.26(일)	현장 휴무	-

* 별 첨 #2

야간작업사항(휴일 및 평일)

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
03.01(수)	야간	931E2, 931S2 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.02(목)	야간	931E2, 931S2 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.03(금)	야간	931E2, 931S2 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.04(토)	야간	931E2 외벽 거푸집 설치, 931S2 외벽 타설 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.05(일)	야간	931E2 외벽 거푸집 설치, 931S2 거푸집 해체, 방수 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.06(월)	야간	931E2 외벽 거푸집 설치, 931S2 거푸집 해체, 방수 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 타설	18:00 ~ 23:00
03.07(화)	야간	931E2 외벽 거푸집 설치, 931S2 거푸집 해체, 방수 특별피난계단 철근 조립, 외벽 거푸집 설치 #3 덕트 1단 외벽거푸집 해체 및 방수	18:00 ~ 23:00
03.08(수)	야간	931E2 외벽 콘크리트 타설 특별피난계단 외벽 콘크리트 타설 #3 덕트 1단 외벽거푸집 해체 및 방수	18:00 ~ 23:00
03.09(목)	야간	931E2 외벽 거푸집 해체 및 방수 특별피난계단 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 1단 외벽거푸집 해체 및 방수	18:00 ~ 23:00
03.10(금)	야간	931E2 외벽 거푸집 해체 및 방수 특별피난계단 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 1단 외벽 되메우기	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
03.11(토)	야간	931E2 외벽 거푸집 해체 및 방수 특별피난계단 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 1단 외벽 되메우기	18:00 ~ 23:00
03.12(일)		현장 휴무	-
03.13(월)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 2단벽체 내벽 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00
03.14(화)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 2단벽체 내벽 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00
03.15(수)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 2단벽체 내벽 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00
03.16(목)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 내벽 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00
03.17(금)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 외벽 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.18(토)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 외벽 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.19(일)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 설치 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 외벽 거푸집 설치	18:00 ~ 23:00
03.20(월)	야간	#1 연결통로 외벽 콘크리트 타설 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 콘크리트 타설	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		932정거장
03.21(화)	야간	#1 연결통로 외벽 콘크리트 양생 특별피난계단 외벽 되메우기 #3 덕트 2단벽체 콘크리트 양생	18:00 ~ 23:00
03.22(수)	야간	#1 연결통로 외벽 콘크리트 양생 #3 덕트 외벽 되메우기	18:00 ~ 23:00
03.23(목)	야간	#1 연결통로 외벽 콘크리트 양생 #3 덕트 외벽 되메우기	18:00 ~ 23:00
03.24(금)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 외벽 되메우기	18:00 ~ 23:00
03.25(토)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 외벽 되메우기	18:00 ~ 23:00
03.26(일)		현장 휴무	-
03.27(월)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 외벽 되메우기	18:00 ~ 23:00
03.28(화)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 3단 벽체 내부 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00
03.29(수)	야간	#1 연결통로 외벽 거푸집 해체 및 방수 #3 덕트 3단 벽체 내부 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00
03.30(목)	야간	#1 연결통로 외벽 되메우기 #3 덕트 3단 벽체 내부 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00
03.31(금)	야간	#1 연결통로 외벽 되메우기 #3 덕트 3단 벽체 내부 거푸집 설치, 철근 조립	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
03.01(수)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 1단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.02(목)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 1단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.03(금)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 1단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.04(토)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 1단 벽체 콘크리트 타설 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.05(일)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 1단 벽체 양생 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.06(월)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.07(화)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.08(수)	야간	#1 자전거보관소 기초 철근 조립 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.09(목)	야간	#1 자전거보관소 기초 콘크리트 타설 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00
03.10(금)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 되메우기 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 파일 항타 및 인발	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
03.11(토)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 되메우기 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.12(일)		현장 휴무	-
03.13(월)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 되메우기 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.14(화)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 되메우기 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.15(수)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 되메우기 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.16(목)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 되메우기 932E2 방수 및 되메우기 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.17(금)	야간	#1,2 자전거보관소 가시설 해체 932E2 1,2단 가시설 해체 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.18(토)	야간	#1,2 자전거보관소 가시설 해체 932E2 1,2단 가시설 해체 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.19(일)	야간	#1,2 자전거보관소 가시설 해체 932E2 1,2단 가시설 해체 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.20(월)	야간	#1,2 자전거보관소 가시설 해체 932E2 1,2단 가시설 해체 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		933정거장
03.21(화)	야간	#1,2 자전거보관소 가시설 해체 932E2 1,2단 가시설 해체 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.22(수)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.23(목)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.24(금)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.25(토)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.26(일)		현장 휴무	-
03.27(월)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.28(화)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.29(수)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.30(목)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00
03.31(금)	야간	#1,2 자전거보관소 벽체 거푸집 설치 932E2 2단 벽체 거푸집 설치 #7,8 출입구 주형보 및 복공 설치	18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴드터널(1,2구간)
03.01(수)	야간	라이닝 거푸집 해체(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.02(목)	야간	보도헌치 철근 조립(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.03(금)	야간	보도헌치 콘크리트 타설(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.04(토)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.05(일)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.06(월)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.07(화)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.08(수)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.09(목)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.10(금)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴드터널(1,2구간)
03.11(토)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.12(일)		현장 휴무	-
03.13(월)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.14(화)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03. 15(수)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.16(목)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.17(금)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.18(토)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.19(일)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.20(월)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00

일 시		작 업 사 항	비 고
		쉴드터널(1,2구간)
03.21(화)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.22(수)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.23(목)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.24(금)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.25(토)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.26(일)		현장 휴무	-
03.27(월)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.28(화)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.29(수)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.30(목)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00
03.31(금)	야간	상선 도달부 갱문 보강(2구간 TBM 1호기) 굴진 및 세그먼트 조립(1구간 TBM 2호기)	18:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 23:00

* 별 첨 #3

휴일작업 근무자명단

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

구 분		2017년 03월
직 책	성 명	1일(수)	4일(토)	5일(일)	11일(토)	12일(일)	18일(토)	19일(일)	25일(토)	26일(일)
현장소장	이상도	O	O	O	O	현 장 휴 무 (홍동우 김성관)	O	O	O	현 장 휴 무 (서성일 정순길)
현장부소장	정승범	O	O	O	O		O	O	O
현장대리인	이현구	O			O		O	O
터널팀장	조광영		O	O					O
터널과장	류주열	O			O		O	O
터널대리	이원욱		O		O		O
터널과장	김준철		O	O				O
터널대리	김정연	O			O		O		O
터널대리	박지현			O				O	O
터널기장	이성열	O	O				O		O
터널기장	김홍중			O				O	O
공사과장	이기상	O	O	O				O
공사차장	서용범		O	O			O
공사과장	박을섭	O	O				O		O
공사과장	박종현	O		O				O	O
공사대리	홍동우				O		O		O
공사대리	이현탁		O		O		O
공사주임	정순길	O		O				O	O
공사과장	서성일		O		O		O
공사대리	박진정		O		O		O
공사주임	이윤구	O		O				O	O
공사주임	최동선		O		O		O
공사주임	임희승	O	O	O	O
안전팀장	노광선			O	O				O
안전과장	안병욱		O		O				O
안전대리	김성관	O	O				O
안전대리	이원규	O			O			O	O
안전주임	염찬수			O			O	O
품질팀장	김병호	O	O		O		O
품질과장	김기태			O				O	O
품질대리	전형준	O			O		O	O
품질주임	신길호		O	O					O
계		16명	18명	16명	17명	2명	18명	15명	17명	2명

※ 작업사항에 따라 근무자가 변동될 수 있습니다.

* 별 첨 #4

야간작업 근무자명단

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

구 분		2017년 03월																				비고
직 책	성 명	1일		2일		3일		4일		5일		6일		7일		8일		9일		10일
공사 과장	박종현	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		932
공사 대리	이현탁	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
공사 과장	서성일	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		933
공사 대리	박진정	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
터널 과장	김준철	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		쉴드 1호기
터널 대리	김정연	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
터널 과장	이원욱	◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		쉴드 2호기
구 분		2017년 03월																				비고
직 책	성 명	11일		12일		13일		14일		15일		16일		17일		18일		19일		20일
공사 과장	박종현	◯		-		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		932
공사 주임	정순길	◯		-		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
공사 대리	홍동우	◯		-		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		933
공사 주임	이윤구	◯		-		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
터널 과장	김준철	◯		-		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		쉴드 1호기
터널 기장	이성열	◯		-		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
터널 대리	이원욱	◯		-		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		쉴드 2호기
구 분		2017년 03월																				비고
직 책	성 명	21일	22일		23일		24일		25일		26일		27일		28일		29일		30일		31일
공사 과장	이현탁	◯	◯		◯		◯		◯		-		◯		◯		◯		◯		◯	932
공사 주임	정순길	◯	◯		◯		◯		◯		-		◯		◯		◯		◯		◯
공사 대리	홍동우	◯	◯		◯		◯		◯		-		◯		◯		◯		◯		◯	933
공사 주임	최동선	◯	◯		◯		◯		◯		-		◯		◯		◯		◯		◯
터널 대리	김정연	◯	◯		◯		◯		◯		-		◯		◯		◯		◯		◯	쉴드 1호기
터널 기장	김홍중	◯	◯		◯		◯		◯		-		◯		◯		◯		◯		◯
터널 대리	박지연	◯	◯		◯		◯		◯		-		◯		◯		◯		◯		◯	쉴드 2호기

※ 작업사항에 따라 근무자가 변동될 수 있습니다.