휴일 및 야간 작업계획

(’14.08.30 ~ ’14.09.05)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
08월30일(토) (07:00~18:00)	931S1 환기구	6단 버팀보, 사버팀보 설치 토류벽 설치 및 거푸집 해체 토사 굴착 및 상차	백인기	이기상 정순길
	932 정거장	12Span B1 외벽 거푸집 해체 및 양생 12Span B2 오픈부 보강 동바리 해체 12Span 지장물 받침보 보강 및 해체 11Span 1단 버팀보 해체 10Span KT 맨홀 코아 천공 및 부재 인양 9Span B1 #1 연결통로 1단벽체 거푸집 설치 및 보강 8,9Span 2단 렉카 설치 및 렉카 간섭부 사보 및 띠장 해체 6Span B1 벽체 철근조립 및 동바리 내부보강 5Span B1 1단 벽체 거푸집 설치 및 보강 4Span B2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		박종현 조태승
	933 정거장	6Span B2 슬래브 철근조립 7-1Span B2 2단 벽체 및 슬래브 동바리 설치 9-1Span B3 슬래브 철근조립 10Span 7,8단 버팀보 해체 #5,6번 출입구 파일천공	김선태	김학준 서성일
08월31일(일) (07:00~18:00)	931S1 환기구	6단 버팀보, 사버팀보 설치 토류벽 설치 및 거푸집 해체 토사 굴착 및 상차	양희석	이기상 김현규
	932 정거장	12Span B1 외벽 거푸집 해체 및 양생 12Span B2 오픈부 보강 동바리 해체 12Span 지장물 받침보 보강 및 해체 11Span 1단 버팀보 해체 10Span KT 맨홀 코아 천공 및 부재 인양 9Span B1 #1 연결통로 1단벽체 거푸집 설치 및 보강 6Span B1 벽체 및 슬래브 철근조립 5Span B1 1단 벽체 거푸집 설치 및 보강 4Span B2 동바리 및 슬래브 거푸집 설치		이태신 조태승
	933 정거장	6Span B2 슬래브 철근조립 7-1Span B2 2단 벽체 및 슬래브 동바리 설치 9-1Span B3 슬래브 철근조립 10Span 7,8단 버팀보 해체 #5,6번 출입구 파일천공	하송호	박민주 박진정

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2014.08.30(토)			2014.08.31(일)
	직 책	성 명	비 고	직 책	성 명	비 고
감리단	보조감리원	백인기		보조감리원	양희석
	보조감리원	김선태		보조감리원	하송호
시공사
	현장소장	공민석		현장소장	공민석
	현장대리인	서용범		현장대리인	서용범
	공사대리	박종현		공사과장	이태신
	공사대리	조태승		공사대리	조태승
	공사대리	이기상		공사대리	이기상
	공사사원	정순길		공사대리	김현규
	공사과장	김학준		공사과장	박민주
	공사대리	서성일		공사대리	서성일
	공사대리	김세현		공사대리	박진정
	공사대리	이현탁		공사사원	최동선
	공사주임	이윤구		공사사원	임희승
	안전과장	김태화		안전과장	안병욱
	안전대리	김성관		안전주임	유대우
	안전대리	이원규		안전주임	오영은
	품질대리	전형준		안전주임	염찬수
	품질대리	김용석		품질과장	김병호
	터널과장	권우형		품질사원	신길호
	터널과장	김준철		터널과장	권우형
	터널대리	김정연		터널과장	김준철
	터널주임	박지현		터널대리	박영생
	합 계	22명		합 계	22명

▣ 야간 작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
				시공사
09월01일(월) 18:00~21:00	931S1 환기구	토류벽 설치	연규범	박종현 정순길
	932 정거장	12Span 지장물 받침보 보강 및 해체 12Span 지하 1층 상부 중앙 거더 돌출부 철근조립		이태신 김현규
09월02일(화) 18:00~21:00	931S1 환기구	토류벽 설치	임승만	이기상 정순길
	932 정거장	12Span 지장물 받침보 보강 및 해체 12Span 지하 1층 상부 중앙 거더 돌출부 철근조립		이태신 조태승
09월03일(수) 18:00~21:00	931S1 환기구	토류벽 설치	백인기	이기상 정순길
	932 정거장	12Span B1 상부 중앙 거더 돌출부 철근조립 및 거푸집설치 12Span B1 상부 중앙 거더 돌출부 철근 조립 12Span B1 2단 벽체 채움 거푸집 설치		박종현 김현규
09월04일(목) 18:00~21:00	931S1 환기구	토류벽 설치	김선태	이기상 조태승
	932 정거장	12Span B1 2단 벽체 1단 버팀보 매몰부 절단 작업 12Span B1 상부 중앙 거더 돌출부 철근조립 및 거푸집설치		이태신 박종현
09월05일(금) 18:00~21:00	931S1 환기구	토류벽 설치	양희석	조태승 정순길
	932 정거장	12Span B1 2단 벽체 1단 버팀보 매몰부 절단 작업 12Span B1 상부 중앙 거더 돌출부 철근조립 및 거푸집설치		박종현 김현규

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	09.01일(월)	09.02일(화)	09.03일(수)	09.04일(목)	09.05일(금)
감리단	책임감리원	연규범	ㅇ
	보조감리원	임승만		ㅇ
	보조감리원	백인기			ㅇ
	보조감리원	김선태				ㅇ
	보조감리원	양희석					ㅇ
	보조감리원	하송호
시공사	현장소장	공민석		ㅇ		ㅇ
	현장대리인	서용범	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	공사과장	이태신	ㅇ	ㅇ		ㅇ
	공사대리	박종현	ㅇ		ㅇ	ㅇ	ㅇ
	공사대리	이기상		ㅇ	ㅇ	ㅇ
	공사대리	김현규	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	공사대리	조태승		ㅇ		ㅇ	ㅇ
	공사기사	정순길	ㅇ	ㅇ	ㅇ		ㅇ
	공사기사	임희승		ㅇ		ㅇ
	공사기사	최동선	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	안전팀장	김태화		ㅇ		ㅇ
	안전과장	안병욱	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	안전대리	김성관		ㅇ		ㅇ
	안전대리	유대우	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	안전주임	이원규		ㅇ		ㅇ
	안전주임	오영은	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	안전주임	염찬수		ㅇ		ㅇ
	품질과장	김병호	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	품질대리	전형준		ㅇ		ㅇ
	품질기사	신길호	ㅇ		ㅇ		ㅇ
	품질기사	김용석		ㅇ		ㅇ
합계			12명	13명	12명	13명	12명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   연  규  범   (인)