휴일 및 야간 작업계획

(`14.11.29 ~ `14.12.05)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
11월29일(토) (07:00~18:00)	931S1 환기구	사보 및 버팀보 브레이싱설치 어스앙카 띠장설치 암파쇄 작업	김선태	이기상 정순길
	932 정거장	4Span B1 1단 벽체 거푸집설치 및 Con`c타설 5Span 외벽 거푸집 해체 9Span #1 연결통로 상부슬라브 철근조립 10Span 동바리설치, 1단 버팀보 해체 12Span 하수박스받침 거푸집 설치, 철근 하역 및 운반 1번 출입구 주형보 보공설치 2번 출입구 보도복구		이태신 김현규
	933 정거장	7-1Span B2 경사슬래브 1단 벽체 Con`c타설 9Span B2 슬래브 동바리 설치 10Span B2 2단 벽체 철근조립 #1,2번 출입구 주형보 및 피스브라켓 설치 #5,6번 출입구 파일천공	백인기	박민주 김학준
11월30일(일) (07:00~18:00)	931S1 환기구	현장휴무	-	우정우 최민수
	932 정거장	현장휴무
	933 정거장	현장휴무

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2014.11.29(토)			2014.11.30(일)
	직 책	성 명	비 고	직 책	성 명	비 고
감리단	보조감리원	백인기
	보조감리원	김선태
시공사	현장대리인	서용범		공무대리	우정우
	공사과장	이태신		관리대리	최민수
	공사대리	이현탁
	공사대리	이기상
	공사대리	김현규
	공사대리	정순길
	공사과장	박민주
	공사과장	김학준
	공사대리	박진정
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	공사사원	임희승
	안전과장	김태화
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	품질사원	김용석
	합 계	20명		합 계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
12월01일(월) 18:00~익일06:00	932 정거장	4Span 편의시설, 정화조 동바리 해체(야간) 10Span 1단 버팀해체 및 동바리 설치(야간) #1,4번 출입구 주형보 및 복공설치(철야)	양희석	박종현 김현규
12월02일(화) 18:00~익일06:00	932 정거장	4Span 편의시설, 정화조 동바리 해체(야간) 10Span 1단 버팀해체 및 동바리 설치(야간) #1,4번 출입구 주형보 및 복공설치(철야)	연규범	이태신 이기상
12월03일(수) 18:00~익일06:00	932 정거장	4Span 편의시설, 정화조 동바리 해체(야간) 10Span 1단 버팀해체 및 동바리 설치(야간) #1,4번 출입구 주형보 및 복공설치(철야)	임승만	박종현 김현규
12월04일(목) 18:00~익일06:00	932 정거장	4Span 편의시설, 정화조 동바리 해체(야간) 10Span 1단 버팀해체 및 동바리 설치(야간) #1,4번 출입구 주형보 및 복공설치(철야)	김선태	이태신 이기상
12월05일(금) 18:00~익일06:00	932 정거장	4Span 편의시설, 정화조 동바리 해체(야간) 10Span 1단 버팀해체 및 동바리 설치(야간) #1,4번 출입구 주형보 및 복공설치(철야)	양희석	박종현 김현규

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	12.01일(월)	12.02일(화)	12.03일(수)	12.04일(목)	12.05일(금)
감리단	책임감리원	연규범		O
	보조감리원	임승만			O
	보조감리원	백인기
	보조감리원	김선태				O
	보조감리원	양희석	O				O
	보조감리원	하송호
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신		O		O
	공사대리	박종현	O		O		O
	공사대리	이기상		O		O
	공사대리	김현규	O		O		O
	공사대리	이현탁		O		O
	공사기사	정순길	O		O		O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전대리	박제현		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
	품질기사	김용석		O		O
합계			9명	10명	9명	10명	9명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   연  규  범   (인)