휴일 작업 계획

(14.8.9, 14.8.10)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
8월9일(토)	935정거장	1,2SPAN 중간슬라브 철근 및 거푸집 조립 1,2SPAN 확폭부 바닥방수 6SPAN,8SPAN 지하1층 1단벽체 철근 및 거푸집 조립 환기구 부지정리 및 주형보 설치 준비 환기구 도시가스 이설 현장 자재정리	이병철 이사	박진철 기사
	936정거장	- 토공굴착, 집토, 암B/K 깨기 - 종점부 환기구 ㄷ-형강 및 L-형강 설치 - 종점부 환기구 암 천공 및 발파 - TYPE-J~N 락볼트 작업 4-6span 바닥방수 작업	박성찬 단장	이성규 과장
	쉴드터널	- 테일브러쉬 용접 설치 갱내 레일 및 레일받침대 해체 갱내 슬라임 청소 주형보 제작 및 문형크레인 설치 준비		이관일 차장
8월10일(일)	935정거장	1,2SPAN 중간슬라브 철근 및 거푸집 조립 1,2SPAN 확폭부 바닥방수 6SPAN,8SPAN 지하1층 1단벽체 철근 및 거푸집 조립 환기구 부지정리 및 주형보 설치 준비 환기구 도시가스 이설 현장 자재정리	문성공 이사	이태우 과장
	936정거장	- 토공굴착, 집토, 암B/K 깨기 - 종점부 환기구 ㄷ-형강 및 L-형강 설치 - 종점부 환기구 암 천공 - TYPE-J~N 락볼트 작업 4-6span 바닥방수 작업	이명환 이사	이규언 대리
	쉴드터널	- 테일브러쉬 용접 설치 갱내 레일 및 레일받침대 해체 갱내 슬라임 청소 주형보 제작 및 문형크레인 설치 준비		최규훈 기사

3. 휴일 근무자 명단

2014.8.9.(토)				2014.8.10.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리단장	박 성 찬		감리단	감리원	문 성 공
	감리원	이 병 철			감리원	이 명 환
시공사	공사팀	이 관 일	총괄책임자	시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자
		이 성 규
						이 태 우
		박 진 철
						이 규 언
	공무팀	정 시 권
						최 규 훈
		이 용 광
					공무팀	김 태 모
	안전팀	권 용 진
					안전팀	권 용 진
		박 정 수
						박 정 수
	품질팀	한 예 석
					품질팀	한 예 석
	관리팀	송 대 훈

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
굴삭기	02LC	서울02카5858
굴삭기	02LC	서울02파5918
굴삭기	06LC	서울02차7237
굴삭기	06LC	서울02파6534
굴삭기	06LC	서울02타6487
앵글크레인	25ton	서울07가7669
카고크레인	18ton	경기90자2140
유압드릴	10ton	서울22-5334

○ 쉴드 터널 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
굴삭기	08W	서울02파8353
문형크레인	30ton	-
문형크레인	10ton	-

○ 휴일 작업사유

- 935정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 936정거장 토공 및 가시설 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드터널  : 07:00~18:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.

작성자 : 현장대리인   윤 두 원   (인)

확인자 : 책임감리원   박 성 찬   (인)