휴일 작업 계획

(15.8.8, 15.8.9)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
8월8일(토)	935정거장	3span 상부슬라브 방수작업 4span 보조파일 설치 및 절단 인양 작업 4span 승강장 거푸집 설치 작업 5span 지역난방관 상부슬라브 철근조립 환기구 바닥 방수(면정리) 작업	이명환 이사	이태우 과장
	936정거장	4span 지하1층 벽체 거푸집 해체 6span 지하1층 벽체 거푸집 작업 정화조#1 벽체 거푸집 해체설치 자전거주차장 철근조립 작업 NTR 강관내 토압지지대 설치 - NATM터널 하행선 라이닝 콘크리트 타설		조희진 대리
	쉴드터널	쉴드터널 굴진 및 조립 현장 정리정돈		최규훈 대리
8월9일(일)	935정거장	○ 작업사항 없음 - 현장휴무에 따른 관리내용 ․ 토공, 가시설, 구조물등 이상유무 확인 ․ 양수기 작동상태 확인 ․ 전기시설 이상유무 확인 ․ 화재예방 순찰 ․ 작업장 폐쇄 이상유무 확인 ․ 공사구간 시민불편사항 확인 ․ 야간 교통시설물 이상유무 확인 ․ 현장민원 해결 등	-	이성규 과장 박정수 대리
	936정거장
	쉴드터널

3. 휴일 근무자 명단

2015.8.8.(토)				2015.8.9.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	이 명 환		감리단	감리원	-
시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자	시공사	공사팀	이 성 규	당 직 자
		이 태 우			안전팀	박 정 수	당 직 자
		조 희 진
		최 규 훈
	공무팀	이 우 기
		김 태 모
	안전팀	박 정 수
	품질팀	윤 석 준

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
앵글크레인	25ton	서울07가7669
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- NATM터널 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- NATM 터널 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~18:00(주간),18:00 ~ 익일07:00 (야간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.

작성자 : 현장대리인   윤 두 원   (인)

확인자 : 책임감리원   박 성 찬   (인)

야간 작업계획서

○ 공구명 : 서울지하철 921공구

○ 야간작업일 : 2015.8.8 ~ 2015.8.14

○ 야간근무자

일 시	시 공 사	감 리 단
2015.08.08(토)	- 작업없음	-
2015.08.09(일)	- 작업없음	-
2015.08.10(월)	안전 : 박정수 기사	이 병 철
	공사 : 강형석 팀장, 김혁기 대리
2015.08.11(화)	안전 : 강형석 팀장	문 성 공
	공사 : 윤석준 실장, 이태우 과장
2015.08.12(수)	안전 : 박정수 기사	이 명 환
	공사 : 강형석 팀장, 이성규 과장
2015.08.13(목)	안전 : 강형석 팀장	이 병 철
	공사 : 윤두원 부장, 박진철 대리
2015.08.14(금)	안전 : 박정수 기사	김 병 균
	공사 : 정시권 팀장, 조희진 대리

○ 야간 작업내용(쉴드터널)

일 시	작 업 내 용	자 재	장 비	인 원
2015.08.08(토)	야간 작업없음	-	-	-
2015.08.09(일)	야간 작업없음	-	-	-
2015.08.10(월)	쉴드터널 : 쉴드 굴진 및 세그먼트 조립	세그먼트	문형크레인,백호	관리자: 2명 근로자: 30명
2015.08.11(화)	쉴드터널 : 쉴드 굴진 및 세그먼트 조립	세그먼트	문형크레인,백호	관리자: 2명 근로자: 30명
2015.08.12(수)	쉴드터널 : 쉴드 굴진 및 세그먼트 조립	세그먼트	문형크레인,백호	관리자: 2명 근로자: 30명
2015.08.13(목)	쉴드터널 : 쉴드 굴진 및 세그먼트 조립	세그먼트	문형크레인,백호	관리자: 2명 근로자: 30명
2015.08.14(금)	쉴드터널 : 쉴드 굴진 및 세그먼트 조립	세그먼트	문형크레인,백호	관리자: 2명 근로자: 30명

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-

○ 야간 작업사유

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 쉴드터널 : 18:00 ~ 익일07:00 (야간작업)

작성자 : 현장대리인   윤 두 원   (인)

확인자 : 책임감리원   박 성 찬   (인)