휴일 작업 계획

(16.6.11, 16.6.12)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
6월11일(토)	935정거장	1~3스판 지장물받침 거푸집 설치작업 1~3스판 중앙파일 개구부 방수 마감작업 외부 E/V 터파기 및 주형보 설치 출입구#1 터파기 및 주형보 설치 천공기 해체 작업	이병철 이사	이태우 과장
	936정거장	- NTR #11,12 방수철판 및 토압지지대 설치 - 1스판 B2슬라브 철근조립작업 - 10스판 보강빔 설치 준비 - 12스판 강관버팀보 및 거푸집 동바리 해체작업 - 내부계단 동바리 및 거푸집 설치 - 환기구#2 거푸집 해체작업		이규언 대리
	쉴드터널	- 하행선 인버트 헌치폼 설치, 철근 조립 - 횡갱 #1 접속부 방수 작업 - 횡갱 #2 라이닝 철근 조립 - 935 수직구 바닥 슬라임 청소 작업		최규훈 대리
6월12일(일)	935정거장	○ 작업사항 없음 - 현장휴무에 따른 관리내용 ․ 토공, 가시설, 구조물등 이상유무 확인 ․ 양수기 작동상태 확인 ․ 전기시설 이상유무 확인 ․ 화재예방 순찰 ․ 작업장 폐쇄 이상유무 확인 ․ 공사구간 시민불편사항 확인 ․ 야간 교통시설물 이상유무 확인 ․ 현장민원 해결 등	-	이성규 과장 김혁기 대리
	936정거장
	쉴드터널

3. 휴일 근무자 명단

2016.6.11.(토)				2016.6.12.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	이 병 철		감리단	감리원	-
시공사	공무팀장	정 시 권	총괄책임자	시공사	품질팀	이 성 규	당 직 자
		이 태 우
	공사팀
					공사팀	김 혁 기	당 직 자
		이 규 언
		최 규 훈
	설비팀	강 상 우
	공무팀	김 혁 기
	안전팀	이 영 오
		이 현 희
	품질팀	윤 석 준

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바 7063
백호	06W	서울02타 5572
백호	015	서울02하 7463

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 휴일 작업시간

- 935정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~12:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.

야간 작업계획서

○ 공구명 : 서울지하철 921공구

○ 야간작업일 : 2016.6.11. ~ 2016.6.17

○ 야간근무자

일 시	시 공 사	감 리 단
2016.06.11(토)	작업없음	-
2016.06.12(일)	작업없음	-
2016.06.13(월)	안전 : 이영오 과장	이 병 철
	공사 : 정시권 팀장, 이우기 과장
2016.06.14(화)	안전 : 강형석 팀장	문 성 공
	공사 : 윤석준 실장, 최규훈 대리
2016.06.15(수)	안전 : 이영오 과장	송 인 섭
	공사 : 정시권 팀장, 이현희 기사
2016.06.16(목)	안전 : 강형석 팀장	이 병 철
	공사 : 윤석준 실장, 박진철 대리
2016.06.17(금)	안전 : 이영오 과장	문 성 공
	공사 : 윤두원 부장, 이태우 과장

○ 야간 작업내용(935정거장 외부E/V)

일 시	작 업 내 용	자 재	장 비	인 원
2016.06.11(토)	935정거장 외부 E/V: 작업없음	-	-	-
2016.06.12(일)	935정거장 외부 E/V: 작업없음	-	-	-
2016.06.13(월)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.14(화)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.15(수)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.16(목)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.17(금)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명

○ 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바 7063
백호	06W	서울02타 5572
백호	015	서울02하 7463

○ 야간 작업사유

- 935정거장 외부E/V 주형보 설치 작업시 올림픽공원 남4문 출입문 저촉으로 인하여

진출입 차량 통제시간인(23:00 ~ 익일06:00) 야간에 작업 시행함.

○ 작업시간

- 935정거장 외부E/V : 23:00 ~ 익일06:00 (야간작업)

○ 기타

- 야간작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.