휴일 주간작업 계획

(16.6.18, 16.6.19)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
6월18일(토)	935정거장	1~3스판 지장물받침 거푸집 설치작업 10스판 승강장 슬라브 철근 및 거푸집 설치 중앙파일 개구부 방수 마감작업 외부 E/V 터파기 및 주형보 설치 출입구#1 터파기 및 주형보 설치 출입구#2,환기구#3 터파기 및 토류판 설치	문성공 이사	이성규 과장
	936정거장	- NTR #11,12 방수철판 및 토압지지대 설치 - 연결통로 받침빔 제작작업 - 1스판 B2벽체 1단 철근조립 - 내부계단1 철근조립 - 11스판 B2벽체1단 철근조립 - 환기구#2 외벽방수		박진철 대리
	쉴드터널	- 하행선 인버트 철근 조립 - 횡갱#1 접속부 방수 작업 - 횡갱#2 라이닝 철근 조립		윤두원 부장
6월19일(일)	935정거장	1~3스판 지장물받침 거푸집 설치작업 10스판 승강장 슬라브 철근 및 거푸집 설치 중앙파일 개구부 방수 마감작업 외부 E/V 터파기 및 주형보 설치 출입구#1 터파기 및 주형보 설치 출입구#2,환기구#3 터파기 및 토류판 설치	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	- NTR #11,12 방수철판 및 토압지지대 설치 - 연결통로 받침빔 제작작업 - 1스판 B2벽체 1단 철근조립 - 내부계단1 철근조립 - 11스판 B2벽체1단 철근조립 - 환기구#2 외벽방수		이규언 대리
	쉴드터널	- 하행선 인버트 철근 조립 - 횡갱#1 접속부 방수 작업 - 횡갱#2 라이닝 철근 조립		정시권 팀장

3. 휴일 근무자 명단

2016.6.18.(토)				2016.6.19.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	문 성 공		감리단	감리원	송 인 섭
시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자	시공사	공무팀장	정 시 권	총괄책임자
		이 성 규			공사팀	이 태 우
		박 진 철				이 규 언
	공무팀	김 태 모			공무팀	이 우 기
	안전팀	이 영 오			안전팀	이 영 오
		이 현 희				이 현 희
	품질팀	손 석 준			품질팀	손 석 준
	관리팀	이 희 성			관리팀	송 대 훈

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바 7063
백호	06W	서울02타 5572
백호	015	서울02하 7463

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 935정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~12:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.

평일 야간작업 계획서

○ 공구명 : 서울지하철 921공구

○ 야간작업일 : 2016.6.18. ~ 2016.6.24

○ 야간근무자

일 시	시 공 사	감 리 단
2016.06.18(토)	작업없음	송 인 섭
2016.06.19(일)	작업없음	문 성 공
2016.06.20(월)	안전 : 이영오 과장	이 병 철
	공사 : 정시권 팀장, 강상우 과장
2016.06.21(화)	안전 : 강형석 팀장	송 인 섭
	공사 : 윤석준 실장, 이우기 과장
2016.06.22(수)	안전 : 이영오 과장	문 성 공
	공사 : 정시권 팀장, 김태모 과장
2016.06.23(목)	안전 : 강형석 팀장	이 병 철
	공사 : 윤석준 실장, 최규훈 대리
2016.06.24(금)	안전 : 이영오 과장	송 인 섭
	공사 : 윤두원 부장, 이태우 과장

○ 야간 작업내용(935정거장 외부E/V)

일 시	작 업 내 용	자 재	장 비	인 원
2016.06.18(토)	935정거장 외부 E/V: 작업없음	-	-	-
2016.06.19(일)	935정거장 외부 E/V: 작업없음	-	-	-
2016.06.20(월)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.21(화)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.22(수)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.23(목)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명
2016.06.24(금)	935정거장 외부 E/V: 터파기 및 주형보설치	-	카고크레인 백호	관리자: 1명 근로자: 5명

○ 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바 7063
백호	06W	서울02타 5572
백호	015	서울02하 7463

○ 야간 작업사유

- 935정거장 외부E/V 주형보 설치 작업시 올림픽공원 남4문 출입문 저촉으로 인하여

진출입 차량 통제시간인(23:00 ~ 익일06:00) 야간에 작업 시행함.

○ 작업시간

- 935정거장 외부E/V : 23:00 ~ 익일06:00 (야간작업)