휴일 작업 계획

(14.5.24, 14.5.25)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
5월24일(토)	935정거장	- 구조물 : 1~2SPAN 원형기둥 철근 및 거푸집 조립 1~2SPAN 지하2층 동바리 설치 1~2SPAN 좌측 확폭부 합벽 거푸집 설치 10SPAN 중간슬라브 동바리 및 거푸집 보강 10SPAN 확폭부 기초 및 중간슬라브 철근조립 - 가시설 : 3SPAN 강관버팀보 해체 및 인양	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	○ 작업사항 없음 - 현장휴무에 따른 관리내용 ․ 토공, 가시설, 구조물등 이상유무 확인 ․ 양수기 작동상태 확인 ․ 전기시설 이상유무 확인 ․ 화재예방 순찰 ․ 작업장 폐쇄 이상유무 확인 ․ 공사구간 시민불편사항 확인 ․ 야간 교통시설물 이상유무 확인 ․ 현장민원 해결 등	이명환 이사	이성규 과장
	쉴드터널	- 쉴드터널 굴진 및 세그먼트 조립 - 도달부 갱문 지지용 가시설 설치		최규훈 기사
5월25일(일)	935정거장	○ 작업사항 없음 - 현장휴무에 따른 관리내용 ․ 토공, 가시설, 구조물등 이상유무 확인 ․ 양수기 작동상태 확인 ․ 전기시설 이상유무 확인 ․ 화재예방 순찰 ․ 작업장 폐쇄 이상유무 확인 ․ 공사구간 시민불편사항 확인 ․ 야간 교통시설물 이상유무 확인 ․ 현장민원 해결 등	-	김태모 과장 이규언 대리
	936정거장		-
	쉴드터널

3. 휴일 근무자 명단

2014.5.24.(토)				2014.5.25.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	송 인 섭		감리단	감리원	-
	감리원	이 명 환			감리원	-
시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자	시공사	공사팀	김 태 모	총괄책임자
		이 성 규
					공무팀	이 규 언
		이 태 우
		최 규 훈
	기계팀	장 삼 봉
	공무팀	이 용 광
		김 혁 기
	안전팀	권 용 진
		박 정 수
	품질팀	윤 석 준
	관리팀	이 희 성

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
굴삭기	02LC	서울02카5858
굴삭기	02LC	서울02파5918
굴삭기	06LC	서울02차7237
굴삭기	06LC	서울02파6534
굴삭기	06LC	서울02타6487
굴삭기	06W	광주02라8581
앵글크레인	25ton	서울07가7669
카고크레인	18ton	경기90자2140
유압드릴	10ton	서울22-5334

○ 쉴드 터널 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
굴삭기	08W	서울02파8353
문형크레인	30ton	-
문형크레인	10ton	-

○ 휴일 작업사유

- 935정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드터널 : 07:00~12:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.

작성자 : 현장대리인   윤 두 원   (인)

확인자 : 책임감리원   박 성 찬   (인)

야간 작업계획서

○ 공구명 : 서울지하철 921공구

○ 야간작업일 : 2014.5.24 ~ 5.30

○ 야간근무자

일 시	시 공 사	감 리 단
2014.5.24(토)	- 야간 작업없음	-
2014.5.25(일)	- 야간 작업없음	-
2014.5.26(월)	공사 : 윤두원 부장, 박진철 기사	문 성 공
	안전 : 박정수 기사
2014.5.27(화)	공사 : 이관일 차장, 이태우 과장	이 명 환
	안전 : 권용진 대리
2014.5.28(수)	공사 : 윤두원 부장, 최규훈 기사	이 병 철
	안전 : 박정수 기사
2014.5.29(목)	공사 : 정시권 팀장, 한예석 대리	문 성 공
	안전 : 권용진 대리
2014.5.30(금)	공사 : 강형석 팀장, 김혁기 대리	이 명 환
	안전 : 박정수 기사

○ 야간 작업내용(쉴드터널 굴진)

일 시	작 업 내 용	자 재	장 비	인 원
2014.5.24(토)	야간 작업없음	-	-	-
2014.5.25(일)	야간 작업없음	-	-	-
2014.5.26(월)	쉴드터널 굴진 및 세그먼트조립	세그먼트,레일 레일받침대,지수재	백호 1대 문형크레인 2대 디젤기관차 2대 천공기	관리자:9명 근로자:36명
2014.5.27(화)	쉴드터널 굴진 및 세그먼트조립	세그먼트,레일 레일받침대,지수재	백호 1대 문형크레인 2대 디젤기관차 2대 천공기	관리자:9명 근로자:36명
2014.5.28(수)	쉴드터널 굴진 및 세그먼트조립	세그먼트,레일 레일받침대,지수재	백호 1대 문형크레인 2대 디젤기관차 2대 천공기	관리자:9명 근로자:36명
2014.5.29(목)	쉴드터널 굴진 및 세그먼트조립	세그먼트,레일 레일받침대,지수재	백호 1대 문형크레인 2대 디젤기관차 2대 천공기	관리자:9명 근로자:36명
2014.5.30(금)	쉴드터널 굴진 및 세그먼트조립	세그먼트,레일 레일받침대,지수재	백호 1대 문형크레인 2대 디젤기관차 2대 천공기	관리자:9명 근로자:36명

○ 쉴드 터널 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
굴삭기	08W	서울02파8353
문형크레인	30ton	-
문형크레인	10ton	-

○ 야간작업 사유

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 쉴드터널 : 18:00 ~ 익일07:00 (야간작업)

작성자 : 현장대리인   윤 두 원   (인)

확인자 : 책임감리원   박 성 찬   (인)