휴일 및 야간작업 계획서 추가분

▣ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

▣ 시 공 사 : (주)삼성물산, (주)쌍용건설, 매일종합건설(주)

▣ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

▣ 추가 휴일 및 야간작업 시행기간 : 4/9, 4/23(총 2일 추가)

▣ 추가 휴일 및 야간작업 시행사유

- 공기 단축을 위한 932, 933정거장 휴일 및 야간작업 시행

▣ 933정거장 휴일 및 야간작업 예정일(추가분)

구 분			2017년 04월_추가분		비고
			9일(일)	23일(일)
932정거장	본체구조물 /지장물복구	당초	-	-
		변경(07:00~23:00)	◯	◯
	출입구구조물 /가시설	당초	-	-
		변경(07:00~23:00)	◯	◯
933정거장	피난계단 /자전거주차장 /지장물복구	당초	-	-
		변경(07:00~익일07:00)	◯	◯
	출입구구조물 /가시설	당초	-	-
		변경(07:00~익일07:00)	◯	◯

▣ 휴일작업 및 야간작업사항

- 별 첨 #1(휴일 및 야간 작업사항)

▣ 근무인원

- 별 첨 #2(휴일, 야간 작업 근무자 명단)

현장대리인 : 이 현 구  (인)

책임감리원 : 김 완 수  (인)

* 별 첨 #1

* 별 첨 #1

휴일 및 야간 작업사항

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시	작 업 사 항	비 고
	932 정거장
04.09(일)	931S2,E2 중간 슬라브 동바리 설치 및 철근 조립	07:00 ~ 23:00
04.23(일)	8~10Span 복공 및 주형보 해체 8~12Span 지장물 복구공	07:00 ~ 23:00
일 시	작 업 사 항	비 고
	933 정거장
04.09(일)	특별피난계단 동바리 설치, 벽체 철근 및 거푸집 설치 #1 자전거보관소, #1 공조덕트 토공굴착, 토류판 설치	07:00 ~ 익일 07:00
04.23(일)	#3,4 출입구 2단계 주형보, 복공 설치 #1 공조덕트, 자전거보관소 벽체 방수 및 되메우기	07:00 ~ 익일 07:00

* 별 첨#2

휴일, 야간 작업 근무자명단

▣현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

구 분		2017년 04월		비고
직 책	성 명	9일(일)	23일(일)
공사차장	김준철	◯	◯	932(주/야간) (07:00~23:00)
공사차장	서용범	◯	◯	933(주간) (07:00~18:00)
공사과장	박종현	◯	◯	933(야간) (18:00~익일07:00)

※ 18:00~익일07:00 야간근무자는 주간근무 없이 야간 근무 시행.

※ 작업사항에 따라 근무자가 변동될 수 있습니다.

▣감리단 근무 현황

구 분		2017년 04월		비고
직 책	성 명	9일(일)	23일(일)
보조감리원	김수봉		◯
보조감리원	양희석	◯