휴일 작업 계획

(16.2.27, 16.2.28, 16.3.1)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
2월27일(토)	935정거장	1~2스판 지장물(상수도,도시가스)받침 철근 및 거푸집 설치 5스판 상부슬라브 되메우기 5~7스판 승강장 철근 및 거푸집 조립 출입구#1 파일 시험천공 출입구#3,4 주형보 설치준비 환기구#4 강관버팀보 해체	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	- NTR #9,10 강관 압입 및 굴착작업 - 토공굴착 및 5단가시설 설치작업(환기구#2) - 상부슬라브 방수(4~5스판) - 지하1층 상부슬라브 동바리 설치작업(9스판) - 종점집수정 벽체2단 철근 가공 및 조립작업(12스판)		이성규 과장
	쉴드터널	935정거장 지상 및 지하 자재정리 및 청소 하행선 곡볼트 박스 슬라임 청소		조희진 대리
2월28일(일)	935정거장	1~2스판 지장물(상수도,도시가스)받침 철근 및 거푸집 설치 5스판 상부슬라브 되메우기 5~7스판 승강장 철근 및 거푸집 조립 출입구#1 파일천공 출입구#3,4 주형보 설치준비 환기구#4 강관버팀보 해체	이명환 이사	박진철 대리
	936정거장	- NTR #9,10 강관 압입 및 굴착작업 - 토공굴착 및 5단가시설 설치작업(환기구#2) - 상부슬라브 방수(4~5스판) - 지하1층 상부슬라브 동바리 설치작업(9스판) - 종점집수정 벽체2단 철근 가공 및 조립작업(12스판)		이규언 대리
	쉴드터널	935정거장 지상 및 지하 자재정리 및 청소 하행선 곡볼트 박스 슬라임 청소		최규훈 대리
3월1일(화)	935정거장	1~2스판 지장물(상수도,도시가스)받침 철근 및 거푸집 설치 5스판 상부슬라브 되메우기 5~7스판 승강장 철근 및 거푸집 조립 출입구#1 파일천공 출입구#3,4 주형보 설치준비 환기구#4 강관버팀보 해체	박성찬 단장	박진철대리
	936정거장	- NTR #9,10 강관 압입 및 굴착작업 - 토공굴착 및 5단가시설 설치작업(환기구#2) - 상부슬라브 방수(4~5스판) - 지하1층 상부슬라브 동바리 설치작업(9스판) - 종점집수정 벽체2단 철근 가공 및 조립작업(12스판)		이성규 과장
	쉴드터널	- 935정거장 지상,지하 자재정리		조희진 대리

3. 휴일 근무자 명단

2016.2.27.(토)				2016.2.28.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	송 인 섭		감리단	감리원	이 명 환
시공사	공사팀	정 시 권	총괄책임자	시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자
		이 성 규
						이 규 언
		이 태 우
						최 규 훈
		조 희 진
						박 진 철
		허 만 혁
	건축팀
					공무팀	이 우 기
	공무팀	김 혁 기
					안전팀	강 형 석
	안전팀	이 영 오
					품질팀	손 석 준
		이 현 희
					관리팀	이 희 성
	관리팀	송 대 훈

2016.3.1.(화)
구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	책임감리원	박 성 찬
시공사	공사팀	정 시 권	총괄책임자
		이 성 규
		조 희 진
		박 진 철
	건축팀	허 만 혁
	공무팀	이 용 광
	안전팀	이 영 오
		이 현 희
	관리팀	송 대 훈

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장,쉴드터널 : 07:00~18:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.