휴일 작업 계획

(16.3.5, 16.3.6)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
3월5일(토)	935정거장	1~2스판 지장물(상수도,도시가스)받침 철근 및 거푸집 설치 5~7스판 승강장 철근 및 거푸집 조립 중앙파일 해체 및 인양 출입구#1 파일천공 출입구#3,4 주형보 설치준비 환기구#4 되메우기 현장 자재정리	이병철 이사	이태우 과장
	936정거장	- 굴착 및 5단가시설 설치작업(환기구#2) - 지하1층 상부슬라브 거푸집 해체작업(8스판) - 지하1층 동바리 설치작업(9스판) - 지하3층 종점집수정 동바리설치 및 버림방수작업(12스판) - 지하1층 정화조 보조파일 설치 작업 - NTR 강관 반력대해체 및 #11,12 강관압입 준비작업(환승통로)		이규언 대리
	쉴드터널	작업없음		정시권 팀장
3월6일(일)	935정거장	○ 작업사항 없음 - 현장휴무에 따른 관리내용 ․ 토공, 가시설, 구조물등 이상유무 확인 ․ 양수기 작동상태 확인 ․ 전기시설 이상유무 확인 ․ 화재예방 순찰 ․ 작업장 폐쇄 이상유무 확인 ․ 공사구간 시민불편사항 확인 ․ 야간 교통시설물 이상유무 확인 ․ 현장민원 해결 등	-	이우기 과장 박진철 대리
	936정거장
	쉴드터널

3. 휴일 근무자 명단

2016.3.5.(토)				2016.3.6.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	이 병 철		감리단	감리원	-
시공사	공사팀	정 시 권	총괄책임자	시공사	공무팀	이 우 기	당 직 자
					공사팀	박 진 철	당 직 자
		이 태 우
		이 규 언
	설비팀	강 상 우
	공무팀	김 태 모
	안전팀	이 영 오
	품질팀	손 석 준
	관리팀	이 희 성

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-

○ 휴일작업 사유

- 935정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 935정거장 : 07:00~18:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.