휴일 작업 계획

(‘16.5.14 )

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
5월14일(토)	935정거장	1~3스판 지장물 받침 거푸집 설치작업 1~3스판 1단버팀 해체 및 보조파일 설치 출입구#3,4 주형보 설치 및 포장준비 출입구#2 파일제작 환기구#4 버팀 해체 및 인양	이병철 이사	이태우 과장
	936정거장	- 지하3층 1단벽체 외벽 거푸집 해체(1스판) - 지하3층 승강장 콘크리트 양생작업(5~7스판) - 지하1층 동바리 및 슬라브 거푸집 해체작업(9스판) - 지하2층 찬넬 및 브레이싱 해체작업(11스판) - 지하2층 슬라브 철근조립작업(12스판) - 지하2층 동바리 및 슬라브 거푸집 작업(환기구#2) - NTR 강관 11,12 강관굴착 작업 및 방수철판설치(환승통로)		이성규 과장
	쉴드터널	- 작업없음		윤두원 부장
5월15일(일)	935정거장	○ 작업사항 없음 - 현장휴무에 따른 관리내용 ․ 토공, 가시설, 구조물등 이상유무 확인 ․ 양수기 작동상태 확인 ․ 전기시설 이상유무 확인 ․ 화재예방 순찰 ․ 작업장 폐쇄 이상유무 확인 ․ 공사구간 시민불편사항 확인 ․ 야간 교통시설물 이상유무 확인 ․ 현장민원 해결 등	-	이우기 과장 이규언 대리
	936정거장
	쉴드터널

3. 휴일 근무자 명단

2016.5.14.(토)				2016.5.15.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	이 병 철		감리단	감리원	-
시공사	공사부장	윤 두 원	총괄책임자	시공사	공무팀	이 우 기	당 직 자
	공사팀	이 성 규			공사팀	이 규 언	당 직 자
		이 태 우
	설비팀	강 상 우
	공무팀	김 혁 기
	안전팀	강 형 석
		이 현 희
	품질팀	윤 석 준

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-
	유압천공기	9TON	-

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 횡갱공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~18:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.