휴일 작업 계획

(16.5.21, 16.5.22)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
5월21일(토)	935정거장	지장물 받침 거푸집해체 및 설치 작업(3스판) 강관버팀보 해체작업(1~2스판) 중앙파일 개구부 방수작업(1~2스판) 출입구 파일제작 작업	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	- NTR # 11,12 강관압입 및 굴착작업 , 방수철판 및 토압지지대설치 - 지하2층 슬라브 동바리 설치 및 외벽방수작업(1스판) - 지하2층 환기구 벽체 및 동바리 설치작업(환기구#2) - 지하2층 중간슬라브 철근조립작업(12스판) - 지하1층 측벽 되메우기 및 가시설 해체(4-7스판)		이성규 과장
	쉴드터널	- 상행선 횡갱#1 슬라임청소 바닥정리 방수준비작업 - 상행선 횡갱#2 슬라임청소 바닥정리 방수준비작업 - 하행선 인버트 철근조립 - 횡갱버럭반출작업		조희진 대리
5월22일(일)	935정거장	지장물 받침 거푸집해체 및 설치 작업(3스판) 강관버팀보 해체작업(1~2스판) 중앙파일 개구부 방수작업(1~2스판) 출입구 파일제작 작업	이명환 이사	박진철 대리
	936정거장	- NTR # 11,12 강관압입 및 굴착작업 , 방수철판 및 토압지지대설치 - 지하2층 슬라브 동바리 설치 및 외벽방수작업(1스판) - 지하2층 환기구 벽체 및 동바리 설치작업(환기구#2) - 지하2층 중간슬라브 철근조립작업(12스판) - 지하1층 측벽 되메우기 및 가시설 해체(4-7스판)		이성규 과장
	쉴드터널	- 상행선 횡갱#1 슬라임청소 바닥정리 방수준비작업 - 상행선 횡갱#2 슬라임청소 바닥정리 방수준비작업 - 하행선 인버트 철근조립 - 횡갱버럭반출작업		정시권 팀장

3. 휴일 근무자 명단

2016.5.21.(토)				2016.5.22.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	송 인 섭		감리단	감리원	이 명 환
시공사	공무팀장	윤 두 원	총괄책임자	시공사	공무팀장	정 시 권	총괄책임자
	공사팀	이 성 규
					공사팀	이 성 규
		이 태 우
						박 진 철
		조 희 진
					공무팀	이 우 기
	공무팀	최 규 훈
						김 태 모
	안전팀	이 영 오
						최 규 훈
		이 현 희
					안전팀	이 영 오
	품질팀	윤 석 준
						이 현 희
	관리팀	송 대 훈
					관리팀	이 희 성

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-
	유압천공기	9TON	-

○ 휴일 작업 사유

- 935,936장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~18:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.