휴일 작업 계획

(16.6.4, 16.6.5, 16.6.6)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
6월4일(토)	935정거장	1~3스판 지장물받침 기둥 거푸집 설치작업 장비투입구 덕트 거푸집설치 중앙파일 개구부 철근 및 거푸집 조립 출입구#1 굴착 및 토류판설치, 피스 및 주형보 받침 설치 출입구#2 줄파기 파일천공 출입구#3,4 휀스이동 및 굴착	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	- NTR #12 강관압입 ,벽체 거푸집 및 동바리 설치작업(NTR) - 지하2층 슬라브 및 동바리 설치,철근 조립 (1스판) - 지하1층 매몰파일 면정리 및 중앙파일 용접작업(8~9스판) - 지하2층 슬라브 거푸집 해체 및 방수작업(12스판) - 지하1층 슬라브 철근조립(환기구#2) - 지하1층 바닥버림 준비작업(환기구#4) - 지하3층 내부계단 동바리 및 거푸집설치(내부계단)		이규언 대리
	쉴드터널	- 횡갱#1,#2 접속부 방수 및 라이닝 철근조립작업 - 하행선 인버트 배관설치,철근조립, 발진부 세그먼트 절단 및 인양 - 오탁수 처리장 철거		조희진 대리
6월5일(일)	935정거장	1~3스판 지장물받침 기둥 거푸집 설치작업 장비투입구 덕트 거푸집설치 중앙파일 개구부 철근 및 거푸집 조립 출입구#1 굴착 및 토류판설치, 피스 및 주형보 받침 설치 출입구#2 줄파기, 파일천공 출입구#3,4 휀스이동 및 굴착	문성공 이사	윤두원 부장
	936정거장	- NTR #12 강관압입 ,벽체 거푸집 및 동바리 설치작업(NTR) - 지하2층 슬라브 및 동바리 설치,철근 조립 (1스판) - 지하1층 매몰파일 면정리 및 중앙파일 용접작업(8~9스판) - 지하2층 슬라브 거푸집 해체 및 방수작업(12스판) - 지하1층 슬라브 철근조립(환기구#2) - 지하1층 바닥버림 준비작업(환기구#4) - 지하3층 내부계단 동바리 및 거푸집설치(내부계단)		이성규 과장
	쉴드터널	- 횡갱#1,#2 접속부 방수 및 라이닝 철근조립작업 - 하행선 인버트 배관설치,철근조립, 발진부 세그먼트 절단 및 인양 - 오탁수 처리장 철거		최규훈 대리
6월6일(월) 현충일	935정거장	1~3스판 지장물받침 기둥 거푸집 설치작업 장비투입구 덕트 거푸집설치 중앙파일 개구부 철근 및 거푸집 조립 출입구#1 굴착 및 토류판설치, 피스 및 주형보 받침 설치 출입구#2 줄파기, 파일천공 출입구#3,4 휀스이동 및 굴착	이병철 이사	윤두원 부장
	936정거장	- NTR #12 강관압입 ,벽체 거푸집 및 동바리 설치작업(NTR) - 지하2층 슬라브 및 동바리 설치,철근 조립 (1스판) - 지하1층 매몰파일 면정리 및 중앙파일 용접작업(8~9스판) - 지하2층 슬라브 거푸집 해체 및 방수작업(12스판) - 지하1층 슬라브 철근조립(환기구#2) - 지하1층 바닥버림 준비작업(환기구#4) - 지하3층 내부계단 동바리 및 거푸집설치(내부계단)		이성규 과장
	쉴드터널	- 횡갱#1,#2 접속부 방수 및 라이닝 철근조립작업 - 하행선 인버트 배관설치,철근조립, 발진부 세그먼트 절단 및 인양 - 오탁수 처리장 철거		최규훈 대리

3. 휴일 근무자 명단

2016.6.4.(토)				2016.6.5.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	송 인 섭		감리단	감리원	문 성 공
시공사	현장소장	김 경 록	총괄책임자	시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자
		이 태 우
	공사팀
						이 성 규
		조 희 진
						최 규 훈
		이 규 언
					공무팀	이 우 기
	건축팀	강 상 우
					안전팀	강 형 석
	공무팀	김 혁 기
						이 영 오
	안전팀	강 형 석
					품질팀	손 석 준
		이 현 희
					관리팀	이 희 성
	품질팀	윤 석 준

2016.6.6.(월)
구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	이 병 철
시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자
		이 성 규
		최 규 훈
	공무팀	이 우 기
	안전팀	강 형 석
		이 영 오
	품질팀	손 석 준
	관리팀	이 희 성

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-
	유압천공기	9TON	-

○ 휴일 작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~18:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.