휴일 주간작업 계획

(16.7.16,토~ 17.17,일)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월16일(토)	935정거장	출입구#1 터파기 및 주형보 설치 출입구#2 터파기 및 토류판 설치 출입구#3,4 터파기 및 주형보 설치 1~3스판 자재인양 및 되메우기 본선환기구 기초 철근조립 자전거주차장, 천창 거푸집 설치 정거장 환기구#1 덕트 거푸집 설치	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	- 2스판 지하2층 벽체 거푸집조립 - 11스판 기둥, 간벽 철근 및 거푸집 설치 - 1스판 지하2층 버팀보 해체 - 환기구#1 기초 철근조립 - 12스판 지하2층 1단벽체 방수 - NTR 벽체 콘크리트 타설배관 설치		이성규 과장
	쉴드터널	- 횡갱#1 기초철근 조립 - 횡갱#2 라이닝 거푸집 설치 - 하행선 인버트 보도헌치 거푸집 설치		조희진 대리
7월17일(일)	935정거장	출입구#1 터파기 및 주형보 설치 출입구#2 터파기 및 토류판 설치 출입구#3,4 터파기 및 주형보 설치 1~3스판 자재인양 및 되메우기 본선환기구 기초 철근조립 자전거주차장, 천창 거푸집 설치 정거장 환기구#1 덕트 거푸집 설치	문성공 이사	박진철 대리
	936정거장	- 2스판 지하2층 벽체 거푸집조립 - 11스판 기둥, 간벽 철근 및 거푸집 설치 - 1스판 지하2층 버팀보 해체 - 환기구#1 기초 철근조립 - 12스판 지하2층 1단벽체 방수 - NTR 벽체 콘크리트 타설배관 설치		이규언 대리
	쉴드터널	- 횡갱#1 기초철근 조립 - 횡갱#2 라이닝 거푸집 설치 - 하행선 인버트 보도헌치 거푸집 설치		윤두원 부장

3. 휴일 근무자 명단

2016.7.16.(토)				2016.7.17.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	송 인 섭		감리단	감리원	문 성 공
시공사	공사팀	김 경 록	총괄책임자	시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자
		이 성 규
						이 규 언
		이 태 우
						박 진 철
		조 희 진
	공무팀	김 혁 기
					공무팀	이 우 기
		최 규 훈
						김 태 모
	안전팀	강 형 석
		이 현 희
					안전팀	강 형 석
	품질팀	손 석 준
						이 현 희
	관리팀	이 희 성

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바 7063
백호	06W	서울02타 5572
백호	015	서울02하 7463

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~12:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.