휴일 주간작업 계획

(16.7.2, 16.7.3)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월2일(토)	935정거장	1~3스판 지장물받침 거푸집 해체 및 되메우기 작업 10스판 승강장 거푸집 해체 출입구#1 터파기 및 주형보 설치 출입구#3,4 터파기 및 주형보 설치 본선환기구 바닥방수 환기구#4 되메우기	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	- 2스판 지하2층 1단벽체 철근조립 - 7~9스판 승강장 거푸집 설치 - 환기구#4 벽체 및 슬라브 콘트리트 양생 - 11스판 지하2층 1단벽체 외벽방수 - 환기구#2 기초 되메우기 준비 - NTR#11,12 벽체 철판거푸집 설치작업		이규언 대리
	쉴드터널	- 하행선 인버트 철근조립 - 횡갱#1 라이닝 기초 철근 조립 - 횡갱#2 접속부 방수보강 작업 - 상행선 도달부 인버트 철근 조립 - 지상부 토사비트 정리 작업		조희진 대리
7월3일(일)	935정거장	1~3스판 지장물받침 거푸집 해체 및 되메우기 작업 10스판 승강장 거푸집 해체 출입구#1 터파기 및 주형보 설치 출입구#3,4 터파기 및 주형보 설치 본선환기구 바닥방수 환기구#4 되메우기	문성공 이사	박진철 대리
	936정거장	- 1스판 지하3층 동바리 대각재 해체 - 2스판 지하2층 1단벽체 철근조립 - 환기구e1 덕트 기초철근 조립 - 11스판 지하2층 1단벽체 외벽방수 - 환기구#2 기초 되메우기 - NTR#11,12 벽체 철판거푸집 설치작업		이성규 과장
	쉴드터널	- 하행선 인버트 철근조립 - 횡갱#1 라이닝 기초 철근 조립 - 횡갱#2 접속부 방수보강 작업 - 상행선 도달부 인버트 철근 조립 - 지상부 토사비트 정리 작업		윤두원 부장

3. 휴일 근무자 명단

2016.7.2.(토)				2016.7.3.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	송 인 섭		감리단	감리원	문 성 공
시공사	공사팀	정 시 권	총괄책임자	시공사	공사팀	윤 두 원	총괄책임자
		이 태 우
						이 성 규
		조 희 진
						박 진 철
		이 규 언
					공무팀	김 태 모
	설비팀	강 상 우
						최 규 훈
	공무팀	김 혁 기
					안전팀	강 형 석
	안전팀	강 형 석
						이 영 오
		이 현 희
					품질팀	손 석 준
	품질팀	윤 석 준

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바 7063
백호	06W	서울02타 5572
백호	015	서울02하 7463

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~12:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.