휴일 작업 계획

(16.4.2,토)

1. 사업명 : 서울지하철 921공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
4월2일(토)	935정거장	1~3스판 지장물받침 기둥 거푸집 설치작업 1~3스판 중앙파일 해체 및 인양작업 8~10스판 승강장 철근 및 거푸집조립 작업 환기구#4 덕트 철근 및 거푸집조립작업 출입구#1 줄파기 및 파일천공 작업 출입구#3,4 터파기 및 주형보 설치	송인섭 이사	이태우 과장
	936정거장	- ntr #11,12 강관압입 및 굴착작업 - 1스판 지하3층 기초 철근조립 작업 - 5~7스판 중앙파일 해체 및 보조파일설치작업 - 환기구#2 철근조립 준비 작업 - 8스판 상부슬라브 방수작업 - 9스판 철근 조립 및 거푸집설치작업 - 12스판 집수정 슬라브 양생작업		이성규 과장
	쉴드터널	- 상행선 횡갱#1 세그먼트보강지보 설치 작업 - 상행선 황갱#2 굴착 및 지보설치 숏크리트 타설 - 하행선 인버트 철근 운반 및 조립 작업 - 하행선 횡갱#2 세그먼트보강지보 설치 준비 작업		최규훈 대리
4월3일(일)	935정거장	○ 작업사항 없음 - 현장휴무에 따른 관리내용 ․ 토공, 가시설, 구조물등 이상유무 확인 ․ 양수기 작동상태 확인 ․ 전기시설 이상유무 확인 ․ 화재예방 순찰 ․ 작업장 폐쇄 이상유무 확인 ․ 공사구간 시민불편사항 확인 ․ 야간 교통시설물 이상유무 확인 ․ 현장민원 해결 등	-
	936정거장
	쉴드터널

3. 휴일 근무자 명단

2016.4.2.(토)				2016.4.3.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	송 인 섭		감리단	감리원	-
시공사	공무팀장	정 시 권	총괄책임자	시공사	품질팀	손 석 준	당 직 자
		이 성 규
	공사팀
					공사팀	박 진 철	당 직 자
		이 태 우
		최 규 훈
	건축팀	허 만 혁
	공무팀	김 혁 기
	안전팀	강 형 석
		이 현 희
	품질팀	윤 석 준

○ 935정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	서울82바7063

○ 936정거장 장비현황

구 분	규 격	등 록 번 호
카고크레인	18ton	경기90자2140

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-
	유압천공기	9TON	-

○ 휴일 및 야간작업 사유

- 935,936정거장 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 쉴드터널 횡갱 굴진공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 935,936정거장 : 07:00~18:00(주간)

- 쉴드 터널 : 07:00~12:00(주간)

○ 기타

- 휴일작업에 의한 추가 투입비 및 감리비는 시공사 부담임.

야간 작업계획서

○ 공구명 : 서울지하철 921공구

○ 야간작업일 : 2016.4.4.(월) ~ 2016.4.8.(금)

○ 야간근무자

일 시	시 공 사	감 리 단
2016.04.02(토)	작업없음
2016.04.03(일)	작업없음
2016.04.04(월)	안전 : 이영오 과장	이 병 철
	공사 : 정시권 팀장, 이용광 대리
2016.04.05(화)	안전 : 강형석 팀장	문 성 공
	공사 : 윤석준 실장, 이태우 과장
2016.04.06(수)	안전 : 이영오 과장	송 인 섭
	공사 : 정시권 팀장, 손석준 과장
2016.04.07(목)	안전 : 강형석 팀장	이 명 환
	공사 : 윤석준 실장, 박진철 대리
2016.04.08(금)	안전 : 이영오 과장	이 병 철
	공사 : 윤두원 부장, 이규언 대리

○ 야간 작업내용(쉴드터널)

일 시	작 업 내 용	자 재	장 비	인 원
2016.04.02(토)	쉴드터널 : 작업없음	-	-	-
2016.04.03(일)	쉴드터널 : 작업없음	-	-	-
2016.04.04(월)	쉴드터널 : 상행선 횡갱#2 굴착작업	-	문형크레인,백호 드릴,백호,덤프, 천공기	관리자: 2명 근로자: 15명
2016.04.05(화)	쉴드터널 : 상행선 횡갱#2 굴착작업	-	문형크레인,백호 드릴,백호,덤프, 천공기	관리자: 2명 근로자: 15명
2016.04.06(수)	쉴드터널 : 상행선 횡갱#2 굴착작업	-	문형크레인,백호 드릴,백호,덤프, 천공기	관리자: 2명 근로자: 15명
2016.04.07(목)	쉴드터널 : 상행선 횡갱#2 굴착작업	-	문형크레인,백호 드릴,백호,덤프, 천공기	관리자: 2명 근로자: 15명
2016.04.08(금)	쉴드터널 : 상행선 횡갱#2 굴착작업	-	문형크레인,백호 드릴,백호,덤프, 천공기	관리자: 2명 근로자: 15명

○ 터널 장비현황

구 분		규 격	등 록 번 호
쉴드터널	굴삭기	08W	서울02파8353
	문형크레인	30ton	-
	문형크레인	10ton	-
	유압천공기	9TON	-

○ 야간 작업사유

- 쉴드터널 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

○ 작업시간

- 쉴드터널 : 18:00 ~ 익일07:00 (야간작업)