1. 노후 상수도관 정비

시설안전부 (3146-1521)	시설안전부장 : 강 신 재 / 누수방지과장 : 유 승 효 / 담당 : 이 동 욱

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	안전한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	안심하고 생활할 수 있는 안전도시
	실․본부․국	안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성
	과․담당관	안전하고 깨끗한 수돗물 공급
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
		노후 상수관 정비거리	67	74	95	89	68
업무 프로세스		① 사업계획 수립(’17.1월) → ② 사업심사(’17.2월 중) → ③ 설계및공고(’17.1~3월) → ④ 계약(’17.3~4월) → ⑤ 시공(’17.3~10월) → ⑥ 준공(’17.10~11월)
협력체계 (파트너십)	내 부	수도사업소 → 설계 및 공사시행
	자치구	자치구 → 도로굴착 승인(협의)
	외 부	시설관리공단 → 공사감독

□ 사업목적

○ 회주철관, 아연도 강관 등 녹이 잘 발생하고 누수에 취약한 수도관을 내식성관으로 교체하여 최적의 관망환경을 조성하고 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

○ 누수에 비교적 취약한 비내식성관을 교체하여 누수요인을 제거함으로 유수율 증대에 기여

□ 사업개요

○ 사업규모 : 2020년까지 잔여 노후 상수도관 310㎞(’16. 12. 31. 기준)

○ 사업기간 : 1984년 ~ 2020년

○ 총사업비 : 34,997억원

-  기 투자비 (1984년 ~ 2016년) : 31,356억원(13,339㎞ 정비완료)

□ 홍보계획

○ 상수도관 교체공사 전 주민설명회 개최 : ’17. 3월

○ 단위 공사 실시 전 공사안내문 등 홍보

□ 추진계획

○ 2017년 노후관정비 : 89㎞(사업비 950억원)

-  배급수관정비 71㎞(사업비 575억원), 송배수관정비 18㎞(사업비 375억원)

○ 연차별 정비계획

구 분		정비대상	’17년	’18년	’19년	’20년
합 계	연장(㎞)	310	89	68	68	85
	사업비(억원)	3,641	949	841	841	1,010
배급수관	연장(㎞)	246	71	50	50	75
	사업비(억원)	2,187	574	461	461	691
송배수관	연장(㎞)	64	18	18	18	10
	사업비(억원)	1,454	375	380	380	319

□ 세부추진계획                                               (단위 : ㎞)

핵심성과지표명	2017년 목표	2/4 (상반기)	4/4 (하반기)
노후 상수관 정비거리	89	30	59

○ 사업비 집행계획(2017년) : 94,967백만원 (시비 94,967백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4 (상반기)	4/4 (하반기)
1	노후 배급수관 정비	57,467	34,480	22,987
2	노후 송배수관 정비	37,500	22,500	15,000
합 계		94,967	56,980	37,987

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	․사업계획 심사	2
2월	․설계도면 심사 ․계약심사의뢰	5
3월	․낙찰자 선정 및 계약체결 ․계약심사 의뢰 및 입찰공고 등 ․공사착공 준비	8
4월	․4월 정비목표 : 2㎞ ․공사 착공 준비사항 확인 - 8개 사업소 공사추진 현황 ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	13
5월	․5월 정비목표 : 12.5㎞ ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	27
6월	․6월 정비목표 : 15.5㎞ ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석 ․2분기 추진실적 보고	33
7월	․7월 정비목표 : 7.6㎞ ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석 ․우기철 공사현장 안전관리 이행 지시	42
8월	․8월 정비목표 : 9.6㎞ ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	53
9월	․9월 정비목표 : 17.8㎞ ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석 ․3분기 추진실적 보고	73
10월	․10월 정비목표 : 20.9㎞ ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	96
11월	․11월 정비목표 : 3.1㎞ ․주간추진실적 분석 및 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	98
12월	․’16년 정비실적 및 공사준공 사항 보고 ․ 각 종 통계자료 작성	100

1. 노후밸브 정비

시설안전부 (3146-1532)	시설안전부장 : 강신재 / 시설관리과장 : 정윤홍 / 담당 : 홍석현

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	안전 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	안심하고 생활할 수 있는 안전도시
	실․본부․국	안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성
	과․담당관	안전하고 깨끗한 수돗물 공급
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
		노후 밸브 정비	1,666	2,008	2,188	3,200	3,200
업무 프로세스		① 사업계획수립(’17.1~2월) → ② 현장조사(’17.2월) → ③ 설계및공고(’17.1~3월) ④ 계약(’17.3~5월) → ⑤ 노후밸브정비(’17.3~12월) → ⑥ 준공(’17.12월)
협력체계 (파트너십)	내 부	수도사업소 → 설계 및 공사시행
	자치구	자치구 → 도로굴착 승인(협의)
	외 부	건설관리용역업체 → 공사감독

□ 사업목적

○  상수도 밸브 중 ’94년 이전에 설치된 노후한 회주철 및 녹물발생 우려 있는 고장 밸브를 연차적으로 정비하여 안정급수 도모

○  노후밸브 정비로 누수발생시 신속한 대처로 시민 불편 방지

□ 사업개요

○ 사업규모 : 노후밸브 정비 3,200개소

○ 사업기간 : 2008 ~ 2027년

○ 총사업비 : 504,030 백만원

구 분	계	’08~’16 (9년)	추 진 계 획
			소계	’17년	’18년	’19~27년
정비 수량 (개소)	79,017	43,873	35,144	3,200	3,200	28,744
소요 예산 (백만원)	504,030	146,430	357,600	25,900	26,210	305,490

○ 잔여노후밸브 현황 : 총 35,144개소

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총 계		35,144	6,376	3,747	5,216	2,030	4,728	4,496	5,537	3,014
소화전		14,681	2,862	1,591	2,026	1,192	1,537	2,001	2,082	1,390
일반 밸브		20,463	3,514	2,156	3,190	838	3,191	2,495	3,455	1,624
	300㎜이하	18,768	3,285	1,987	2,972	734	2,991	2,260	3,106	1,433
	400㎜~900㎜	1,429	205	157	179	101	194	180	271	142
	1,000㎜이상	266	24	12	39	3	6	55	78	49

□ 홍보계획

○ 단위 공사 실시 전 공사안내문 등 홍보

□ 추진계획

○ ’17년 노후밸브 정비 : 3,200개소

○ ’17년 총사업비 : 23,200백만원

-  사업소별 계획

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
개 소	3,200	545	340	495	130	495	395	545	255
백만원	23,200	3,950	2,465	3,590	940	3,590	2,865	3,950	1,850

□ 세부추진계획

(단위 : 개소)

핵심성과지표명	2017년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
노후 밸브 정비	3,200	80	1040	1040	1040

○ 사업비 집행계획(2017년) : 23,200백만원(시비 23,200백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	노후 밸브 정비	23,200	580	7,540	7,540	7,540

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	ㆍ 노후밸브 정비계획 수립	3%
2월	ㆍ 노후밸브 정비계획 수립 ㆍ 노후밸브 현장조사	7%
3월	ㆍ 노후밸브 정비목표 80개소 ㆍ 계약심사의뢰 및 계약 ㆍ 공사착공	10%
4월	ㆍ 노후밸브 정비목표 340개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	20%
5월	ㆍ 노후밸브 정비목표 340개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	30%
6월	ㆍ 노후밸브 정비목표 360개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	40%
7월	ㆍ 노후밸브 정비목표 340개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	50%
8월	ㆍ 노후밸브 정비목표 340개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	60%
9월	ㆍ 노후밸브 정비목표 360개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	70%
10월	ㆍ 노후밸브 정비목표 340개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	80%
11월	ㆍ 노후밸브 정비목표 340개소 ㆍ 월별 진행사항 보고 - 월별 정비목표 달성도 및 진행사항 분석	90%
12월	ㆍ 노후밸브 정비목표 360개소 ㆍ ’17년 정비실적 및 최종결과 보고 ㆍ 각종 통계자료 작성	100%