문서번호	녹지관리과-10303
결재일자	2015.11.2.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
협 조

-한양도성 순성길 정비공사-

실정사항 검토 보고

2015. 10.

-한양도성 순성길 정비공사-

실정사항 검토 보고

「한양도성 순성길 정비공사」추진 도중 현장여건 및 이용객 편의를 위한 변경 필요 사항이 발생하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		공사 개요

위    치 : 남산 한양도성 2km(배드민턴장, YTN옆), 낙산 전망대 주변

공사개요

- 철 거 공 : 석축 철거 외 4종

- 식 재 공 : 관목(덜꿩나무 외 6종 1,875주),

초화류(맥문동 외 1종 31,320본)

- 시설물공 : 문화재안내판 외 2종

- 포 장 공 : 야자매트깔기

공사기간 : 2015.09.14 ~ 11.12

도 급 비 :137,176,000원(관급자재비 22,189천원 별도)

도급업체 :(주)토형산업 (대표 김윤옥)

Ⅱ		추진 근거

「한양도성 순성길 정비가이드라인」순성길에 야자매트 사용 권장

※ 한양도성도감-3497호(2015.10.16)

□ 순성길 조성시 기존 지형을 훼손하지 않고 자연 상태 유지를 기본으로 하며,

토양유실을 방지하기 위해 친환경 야자매트 사용을 원칙으로 한다

□ 경사로 등 안전상에 반드시 필요한 부분 외에는 보호펜스를 지양한다.

□ 순성길의 신규 조성 시 경사지형인 경우에는 빗물처리를 고려하여 설계하도록 한다

Ⅲ		구역별 정비계획

남산구간 순성길 야자매트 설치 구간 추가

- 공사 구간과 연결되는 산책로에 잡목이 우거져 있고 노면상태가 불량해 추후 완공 시 공사의 완성도가 떨어지고 이용객 불편이 예상되므로,

금회 본 구간도 야자매트 추가 설치하여 일괄 정비

- 추가되는 구간중 경사가 심해 겨울철 땅이 얼어 낙상 우려가 있는 지역은 미끄럼방지용으로 설치

추가 설치 대상지	추가 설치 구간

사면 접근 차단을 위해 기존 야자매트 설치공간을 녹지대로 변경

- YTN옆 구간(맥문동 식재지) 사면 위로 절벽이 있어 향후 이용객들이 꽃을 보기 위해 접근했을 때 낙상할 우려가 있음.

- 가이드라인에 맞게 휀스를 설치하기 보다는 사면 연접 야자매트 공간을 녹지대로 변경(맥문동 식재)하여 이용객 접근을 차단.

맥문동 식재지 절벽 발생	기존 야자매트 공간을 녹지대로 변경

철거되는 야자매트를 마사토포장 구간  중 토사유실 빈번 지역으로 재활용

- 순성길 초입부 마사토포장 구간 중 토사유실이 많아 유지관리상 어려움이 많았던 구간으로 야자매트 이전 설치(40㎡)

토사유실 빈번지역	야자매트 이전 설치(재활용)

Ⅳ		야자매트 추가 구매

구매수량 : 친환경 야자매트(W1000 / 미끄럼방지용) 63.8m

구매방법 : 조달구매

소요예산 : 금2,925,510원(고정핀 포함)

일반형	미끄럼방지용

Ⅴ		보고자 의견

추가되는 관급자재 물량은 조달 구매후 도급자에게 인계하여 설치하고, 기존 야자매트 이전 및 신규 설치품은 설계변경으로 추진코자 함.

첨  부 : 야자매트 설치계획도 1부.  끝.