문서번호	생태공원과-1449
결재일자	2018.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
협조

- 그라스 정원 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2018. 7

한강사업본부

생태공원과

- 그라스 정원 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

특색있는 한강변 경관을 조성하고자 시행중인「그라스 정원 조성사업」과 관련 서울시 시설공단의 공사현장 실정보고를 아래와 같이 검토하여 사업  추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독3처-6509(2018.07.10.) 공사현장 실정보고서 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 그라스 정원 조성사업

○ 공사기간 : 2017.04.19. ~ 2018.07.17.

○ 주요내용

∙식재공 : 에메랄드그린 등 2종 51조, 초화류 127,950본 식재

∙시설물공 : 야자매트포장, 잡초방지매트

○ 도 급 비 : 금353,803,000원

○ 도 급 자 : ㈜현우그린 대표 남상준

▢ 실정보고 및 승인여부

구 분	변경사유 및 변경내용	승인여부
식 재 공 사	○ 현장 생육여건 및 경관성·기능성을 고려하여 수목 변경	승인
	▸에메랄드그린(H3.0) : 27주 → 0주 ▸스탠다드장미(H2.5xW1.0) : 24주 → 0주 ▸주목(H3.0xW1.5) : 0주 → 24주 ▸전나무(H2.5xW1.2) : 0주 → 9주 ▸스탠다드장미(H1.2) : 0주 → 165주
	○ 동절기 유지관리 효율성과 경관성을 높이기 위한 초종 및 수량 조정
	▸쥐꼬리새(핑크뮬리,15cm) : 64,263본 → 40,263본 ▸억새(그린라이트, 15cm) : 520본 → 1,519본 ▸억새(모닝라이트, 15cm) : 5,880본 → 1,479본 ▸억새(무늬억새, 15cm) : 990본 → 1,490본 ▸억새(제브라, 15cm) : 960본 → 539본 ▸숙근과꽃(15cm) : 0본 → 519본
구 분	변경사유 및 변경내용	승인여부
식재 공사	▸은사초(15cm) : 0본 → 5,978본 ▸홍띠(15cm) : 0본 → 4,569본 ▸마타리(15cm) : 0본 → 1,400본 ▸리아트리스(15cm) : 0본 → 2,409본 ▸샤스타데이지(15cm) : 0본 → 1,449본 ▸에키네시아(15cm) : 0본 → 5,765본 ▸큰꿩의비름(15cm) : 0본 → 2,700본 ▸옥잠화외14종(15cm) : 14,057본 → 9,697본 ▸검정사초(8cm) : 1,060본 → 827본 ▸구슬사초(8cm) : 1,800본 → 6,200본 ▸브리치트리차새풀(4치) : 2,380본 → 2,040본 ▸사초골드밴드(10cm) : 5,900본 → 4,591본 ▸수크령하멜론(10cm) : 18,630본 → 8,028본 ▸파니쿰스프레이(10cm) : 8,530본 → 0본 ▸흰줄무늬대사초(8cm) : 2,980본 → 11,398본 ▸흰줄무늬사초(8cm) : 0본 → 9,500본 ▸삼색조팝(4치) : 0본 → 6,500본 ▸삼색버들(15cm) : 0본 → 2,600본 ▸붓들레야(15cm) : 0본 → 2,220본 ▸사철패랭이(8cm) : 0본 → 951본 ▸잔디(0.3*0.3*0.03) : 100㎡ → 0㎡ ▸금계국 외 4종 식물매트(340*500*40) : 0㎡ → 0.8㎡ ▸소엽맥문동 식물매트(340*500*40) : 0㎡ → 85.3㎡ ▸수크령 식물매트(340*500*40) : 0㎡ → 8.3㎡	승인
이식공	○ 초화식재지 기존 관목 이식	승인
	▸덜꿩나무(이식,H1.2-1.5) : 0주 → 697주 ▸철쭉(이식,H0.3-0.7) : 0주 → 80주
폐기물	○ 노후 앉음벽 철거 반영	승인
	▸구조물헐기(굴삭기0.6+브레이커) : 0 → 35.2㎥ ▸집적및상차(굴삭기0.6) : 0 → 35.2㎥ ▸폐기물운반(DT24ton) : 0 → 35.2㎥ ▸폐기물처리(폐콘) : 0 → 82.7ton
우배수공	○ 흙쓸림 및 빗물고임이 우려되는 구간 식물매트로 잔디떼 수로 조성	승인
부대공	○ 현장여건(배수불량, 점질토)을 고려, 식재구간에 식재용 마사토 포설 ▸식재용마사토(T100mm) : 0 → 6,303.7㎡	승인
	○ 공사현장 가림막휀스 설치 ▸가림막휀스(H1.1*W2.0) : 0 → 213경간
	○ 쥐꼬리새(핑크뮬리) 식재수량 변경에 따라 잡초방지매트 수량 감 ▸잡초방지매트(T5mm) : 3,776.3 → 2,516.4㎡

▢ 계략 설계변경 금액 : ************

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		***********	***********	***********
도급비	소 계	***********	***********	***********
	공급가액	***********	***********	***********
	부가가치세	**********	**********	**********
관급자재		***********	***********	***********

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선 시공후 추후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 1. 공사현장 실정보고서 승인요청 공문 1부.

2. 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.

3. 개략공사비 내역서 1부. 끝.