문서번호	토목부-25756
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사-

방음벽 추가 설치에 따른 검토보고

2015.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 -

방음벽 추가 설치에 따른 검토보고

분진, 소음 및 쓰레기 무단투기 등 생활불편 해소를 요구하는 민원이 지속적으로 제기되고 있는 삼호아파트 구간에 방음벽을 추가로 설치하고자 검토 보고드림.

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015.12.10.

○ 총사업비 : 668백만원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

현  황

○ 개봉역앞 구조개선공사로 인하여 버스정류장이 이전(개봉고가밑에 → 삼호아파트앞)됨에 따라 버스 급정차, 공회전, 가속출발 등으로 소음, 분진 등을 이유로 방음벽 설치를 지속적으로 민원 제기함.

○ 개봉 삼호아파트앞은 차도상 하수BOX(2련)으로 인하여 각종 지장물이 보도에 매설되어 있고, 보도부에 방음벽 기초 설치가 불가함에(한전지중화 우회) 따라 방음벽 설치는 아파트담장 경계부 옹벽을 활용하는 방법으로 시공이 필요한 실정임.

추진경위

○ 방음벽 설치 청원서 접수(개봉삼호 제15-10호, ‘15. 6. 8.)

○ 개봉역주변 교통체계 개선 공청회에서 건의(결과보고, 토목부-15721,‘15. 7.30)

○ 방음벽 설치 재요청(저층세대 동의서 첨부,‘15. 9.18)

○ 주민설명회(1회) 개최(설명회 결과 보고, 토목부-21402호, ‘15.10.12.)

○ 방음벽 설치관련 2차협의 결과 보고(남부감 제15-423호, 2015.11.16.)

○ 건의사항에 대한 회신(토목부-24520호, ‘15.11.20.)

○ 방음벽 설치 건(개봉삼호 제15-42호, ‘15.11.26)

검  토

○ 주민설명회 개최(‘15.10.12.) 결과 아파트 담장 경계부 옹벽 위에 방음벽 설치는 가능하다는 아파트입주자대표회의 의견에 따라, 기존 옹벽 현장조사 및 구조검토 결과 무근 콘크리트로 되어 풍화중 구조검토 결과 N.G됨.

○ 기존 옹벽과 합벽으로 아파트 안에 철근콘크리트 기초를 보강하면 구조검토 결과 방음벽 설치가 가능함.

※ 아파트내 수목도 제거에 대하여 동의(개봉삼호15-42호,‘15.11.26.)

- 설치 규모 : 연장 83m, 높이 2.0 ~ 2.4m, 구조 : 흡음형 + 투명방음판, 간섭장치

○ 적용단가 검토 : 신규단가 적용

- [낙찰율 65.736%+100%〕/2 =협의율(82.868%)

○ 구조기술지원 감리원 검토 결과

관련문서	검 토 결 과	비고
- 감리제15-333호 (2015.11.20)	- 기존옹벽 보강 상세도 TYPE-A,B에서 기존콘크리트와 보강콘크리트 일체화가 가장 중요 하므로 앵커 D16 근입깊이 검토가 필요 - 기존옹벽 보강 상세도에서 TYPE-A,B 벽체 배면만 계산되어 있는데 벽체 전면에 대한 단면 검토내용이 필요
- 감리제15-340호 (2015.11.30)	- 조치결과 내용에 대하여 의견없음.

○ 공사비 증·감

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	수 량	공사비	비고
1, 방음벽설치공사	L=84.0m			49,934,178
방음벽지주설치	H=1.70m	개소	7.00	956,592
방음벽지주설치	H=2.00m	개소	16.00	2,472,896
방음벽지주설치	H=2.10m	개소	4.00	642,088
방음벽지주설치	H=2.40m	개소	17.00	3,073,107
투명방음판설치	H=1.7~2.1m,PMMA8T	M2	48.35	7,293,354
투명방음판설치	H=2.40m,PMMA8T	M2	42.70	6,425,537
흡음형(AL)방음판설치	H=1.7~2.1m,흡음형(AL)	M2	52.50	4,348,732
흡음형(AL)방음판설치	H=2.40m,흡음형(AL)	M2	30.50	2,507,374
기초 앵커설치(L형앵커)	M22x500L	지주당	44	2,956,008
소음감쇠기 설치	H=270xW=400	M	83.00	19,258,490
2, 기존구조물보강				13,575,560
터파기(기계:소형장비)	0.12M3(0~1m)	M3	129.80	555,023
되메우기(다짐)	기계90%+인력10%	M3	93.43	391,097
잔토처리		M3	36.37	16,329
기존구조물 깨기	T=30cm미만	M3	16.70	491,564
콘크리트타설	철근	M3	36.21	788,616
거푸집설치	보통마감	M2	75.55	1,964,979
철근가공및조립	보통	Ton	5.319	1,622,007
신구-콘크리트접합	(치핑:인력)	M2	104.85	3,842,647
철근앵커설치	D16mmxL=200mm	EA	249.00	3,236,253
지장수목 제거	B=10cm	주	31.00	547,801
지장수목 제거	B=30cm	주	1.00	111,548
지장수목 제거	B=4cm미만	주	26.00	7,696
3, 자재비				4,663,667
레미콘	25-24-12	M3	36.57	1,811,641
철근	D13mm	Ton	2.810	1,455,369
철근	D16mm	Ton	2.660	1,366,657
4. 직접공사비				68,143,405
제경비				9,408,755
기존구조물 사용성검토 용역비		식		8,701,140
임목폐기물 처리비		Ton	1.467	146,700
5. 공급가액				86,400,000
6. 부가가치세				8,640,000
7.도급공사비				95,040,000

감리단 검토 의견

○ 버스정류장 이전에 따른 소음, 분진 등으로 방음벽 설치는 필요함에 따라, 안전진단전문업체(대한민국상이군경회) 용역보고서 의견과 같이 기존 담장 옹벽(담장기초)을 보강하여 방음벽을 설치하는 것이 타당하다고 판단되며,

○ 증액되는 공사비 95,040천원에 대하여는 본부 승인 후 설계변경 자문회의(소심의)를 거쳐 결과에 따라 추후 설계변경에 반영하고자 함.

조치계획

○ 개봉 삼호아파트에서 소음, 분진 및 생활환경 악화를 이류로 방음벽 설치를 지속적으로 요구하고 있으므로 민원해소를 위하여 감리단 검토의견과 승인코자 하며, 증액되는 공사비(95,040천원)에 대하여는 본부 설계변경 자문회의(소심의) 심의 결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  : 감리 검토의견서 1부.  끝.